서울대공원 추경예산(안)

(단위 : 백만원)

연번	사업명	소요예산	페이지
계		3,663
1	지하(공동)구 내 배관 및 지주대 교체	2,790	1
2	야행관 안전보강 공사	700	3
3	식물원 안전확보를 위한 노후시설 정비	173	5

지하(공동)구내 배관 및 지주대 교체

부 서 명	성 명	전화번호
기반시설안전 추진반	반장 : 이윤권	500-7050
	담당 : 김형집	500-7051

□  사업목적

○  노후화된 서울대공원 기반시설 근원적 대응

○  지하구내 배관 및 케이블 지지력 강화로 시설물 안전관리 강화

□  사업개요

○  사업근거

-  서울대공원 운영실태 특별감사 결과 지적사항

-  서울대공원 지하구 관로 점검용역 결과 보고서(2014. 4월)

○  사업내용

-  지하구내 배관 및 케이블 지주대 교체

▸ 지주대 3,700개소 교체

-  지하구내 소화배관 및 잡용수 배관 교체

▸ 소화배관 10Km(관경 ￠50~100mm), 잡용수배관 8.5Km(관경 ￠50~400mm)

□  추진현황 및 계획

○  현황

- 공동구 연장 : 9.2Km

- 수용시설 : 상수도, 중․온수관, 소화․잡용수배관, 전력․통신케이블 등

○  추진계획

- 설계 및 발주 : 2014. 10 ~ 12월

- 계약 및 공사시행 : 2014. 12 ~ 2015. 8월

□  소요예산(회계명)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	2,790,000		2,790,000
배관등 지주대 교체	370,000	0	370,000	100,000원 × 3,700개소 = 370,000천원
소화배관 교체	1,000,000	0	1,000,000	100,000원 × 10,000m = 1,000,000천원
잡용수배관교체	1,420,000	0	1,420,000	167,000원 × 8,500m = 1,419,500천원

□  추경사유

○  각종 관로 및 케이블을 지지하는 지주대 붕괴 시 2차 피해 우려로 긴급교체 필요

○  소화배관 및 잡용수 배관의 신속한 교체로 누수발생 등 안전사고 사전예방

야행관 안전 보강공사

부 서 명	성 명	전화번호
동물복지과	과장 : 이달주	500-7740
	담당 : 차준호	500-7741

□  사업목적

○  개원 당시 시설물로 노후화되어 건물 옥상과 벽면을 통하여 오래 동안   우수가 침수되어 시멘트 벽체 크렉 및 백화 현상등으로 건물기반 시설을 보강 공사 할 필요가 있으며 또한 동물 탈출 방지 시설을 설치하여 관람객 및사육사 안전과 동물 탈출을 방지코자 함.

□  사업개요

○  사업근거 : 호랑이 사고로 인한 노후화 시설물 안전에 대한 시장

보고 및 시(조사과) 감사 결과

○  시설 문제

- 건물벽체 크렉과 백화현상으로 시멘트 액 누출

- 환기불량으로 습기 많음

- 배수불량으로 악취

○  사업내용 : 동물사 건물구조 안전보강공사 및 동물탈출 시설정비 등

-  장소 : 서울대공원 야행관(620㎡)

- 보강공사내용

▸ 건물구조 보강 공사 및 보수

▸ 건물외벽 토양 제거

▸ 지붕 방수 및 건물 내·외 배수로 설치

▸ 동물 탈출 방지 시설(이중문, 17개) 설치 등

○  소요예산 : 700백만원

□  소요예산(회계명)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	700,000	0	700,000
야행관구조안전 보강공사등	700,000	0	700,000	건물구조 보강 및 보수 : 420㎡ × 800 = 336,000 옥상방수 및 배수로 설치 : 620㎡ × 400 = 248,000 동물탈출방지 시설 : 17개소 × 5,000 = 85,000 외벽 토양제거 및 조경 = 31,000

배수불량에 따른 악취	출입구 환기불량	야행관 벽체 백화현상

식물원 안전확보를 위한 노후시설 정비

부 서 명	성 명	전화번호
조경과	과장 : 이성주	500-7500
	담당 : 이상균	500-7562

□  사업목적

○  온실식물원이 설치된 지 30년이 경과함에 따라 철골구조물 등이 노후되어 관람객의 안전사고 우려와 시설관리에 어려움이 가중되어 노후시설에 대한 정비를 시행코자 함

□  사업개요

○  사업근거 : 서울특별시온실식물원관리규칙

○  사업규모 : 온실식물원 2,825㎡, 번식온실 493㎡

○  사업기간 : 2014. 9 ~ 12월

○  사업내용

-  온실식물원 개폐장치 교체(7m×18개소)

-  온실식물원 철구조물 보수

- 번식온실 노후 창호 교체(145㎡)

- 번실온실 공압식 개폐 천정 교체

○  소요예산 : 173백만원

□  추진계획

○  2014. 9월 : 실시설계용역 시행

○  2014. 10월 : 시설공사 시행

○  2014. 12월 : 시설공사 준공

□  소요예산

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
계	173		173
시설비	170	-	170	· 시설공사비 : 160,000천원 - 온실식물원 개폐장치 교체 18,000천원 - 온실식물원 철구조물 보수 80,000천원 - 번식온실 노후 창호 교체 25,000천원 - 공압식 개폐 천정 교체 37,000천원 · 실시설계비 : 10,000천원
시설부대비	3	-	3	· 시설부대비 : 3.000천원

□  추경사유

○  시설 노후로 인한 사고 우려로 관람객의 안전을 강화하고 시설관리의 효율성을 증대하고자 조속히 사업 시행 필요

□  현황사진

온실식물원 노후된 수동개폐장치	온실식물원 내부 고가관람계단 부식된 철구조물
온실식물원 노후된 천정 구조물	번식온실 노후된 측창(내부)