문서번호	보행자전거과-5427
결재일자	2015.4.27.
공개여부	비공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	보행안전팀장	보행자전거과장	보행친화기획관		도시교통본부장
협 조

’15년 보행환경 개선지구 사업비 배정계획

2015. 4.

도시교통본부

(보행자전거과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	평가위원회 구성
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	5개 자치구
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

’15년 보행환경 개선지구 사업비 배정계획

「’15년 보행환경 개선지구 사업 추진계획」에 따라 사업대상지 5개소(자치구공모 3, 시민공모 1, 지정사업 1)를 선정하고 사업비를 재배정하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ ’15년 추진계획

○ 사업기간 : ’15. 2 ~ 12월

○ 사업대상 : 5개소(자치구 공모 3, 시민공모 1, 지정사업 1)

○ 사업비 : 16억원(시비)

- 자치구 공모(6억, 3개소×2억/개소), 시민공모(2억), 지정사업(8억)

○ 사업내용 : 지역특성에 맞는 콘텐츠 보강으로 서울 대표 보행명소 육성

- 안내체계, 보행지장물 정비, 차량관리 등 종합적 보행환경 개선

□ 선정방법

○ 자치구 대상 사업공모 및 선정위원회를 통해 3개소 선정

- 자치구별 발표(PT 이용) 및 질의응답을 통한 대상지 선정

- 사업계획의 내용, 추진의지, 기대효과, 자치구 발표에 대한 정성적 평가

○ 보행친화도시 서울 조성을 위한 시민공모전 수상작 1개소 선정

- 실현 가능성, 활용성, 안전성, 창의성 등의 항목에 대한 심사 평가

- 시민 주도 보행환경 개선활동의 일환으로 우수작을 실제사업으로 구현

○ 특구 지정 등 지역 특수성을 감안한 시 지정 사업지 1개소 선정

-「잠실관광특구」지정 관련, 석촌호수~석촌고분 주변지역 개선

- 유네스코 세계문화유산 등재 및 한성백제 유적지를 연계한 명소화 추진

Ⅱ		사업대상지 선정

□ 선정결과

○ 자치구 공모 : 3개소(신청지 11개소 중 선정위원회에서 결정)

- 영등포구 영중로 지구, 성동구 서울숲길 주변, 강동구 강풀만화거리

	【 선정위원회 개요 】
▷ 일시 및 장소 : ’15. 4. 1(수) 14:00~16:00 / 보행자전거과 회의실 ▷ 위원 추첨 : 기 구성된 위원(10명) 중 심의위원(5인)을 당일 추첨으로 선정

○ 시민 공모 : 1개소(마포구 성미산마을, 공모전 1주제 금상 수상작)

- 위 치 : 마포구 성산동 주변 (폭 : 4~5.5m, 면적 : 489,000㎡)

- 주요내용 : 거주자우선주차구역 철거 및 속도저감 유도시설 설치

- 향후계획 : 현장 검토 및 보완 후 사업 추진(자치구, 수상자 연합시행)

	【 시민공모 개요 】
▷ 공모명 : 보행친화도시 서울 조성을 위한 시민 공모전 ▷ 공모기간 : ’14. 11. 24 ∼ ’15. 1. 2(40일간) ▷ 공모내용 : 걷기 좋은 길을 만들기 위한 시민 아이디어 ▷ 주최/주관 : 서울시, ㈜조선일보사 / (사)녹색교통 ▷ 심사결과 - 공모전 1주제 : 총 7개팀 선정(금상 1/은상 3/동상 3) - 공모전 2주제 : 총 18개팀 선정(금상 2/은상 6/동상 10)

○ 지정사업 :「송파구 보행환경 개선지구 확대 및 명소화」추진

- 위 치 : 석촌호수 ~ 석촌고분간(폭 8~10m, 면적 210,700㎡)

- 주요내용

· 보행특화구간 보도 포장, 교차로구간 바닥 요철 시공

· 석촌호수 진입부 조형물, 안내시설물, 경관조명(수목등, 벽부조명 등) 설치 등

Ⅲ		세부 추진계획

□ 기본계획안 수립

○ 안전한 보행환경 개선지구 조성을 위한 종합개선계획 수립

- 단순 보도개선이 아닌 다양한 기법 적용으로 보행환경의 쾌적성 제고

- 지정사업의 경우 용역 추진을 통한 기본계획안 작성

○ 경찰협의 등 유관기관 및 주민의견 수렴 후 설계안 확정(자치구별)

- 차로 축소 등 교통안전시설물 신설 및 변경에 따른 교통안전시설 심의 조속 추진

- 주민협의체를 구성하여 불법주정차, 거리가게 등 사업추진 시 우선 검토되어야 될 사항에 대하여 다양한 의견 사전 반영

□ 예산배정

○ 기본계획 수립 및 경찰협의 등 완료 후 사업비 배정

구 분	사업대상지	재 배정처	시비(백만원)	예산과목
자치구 공모	영중로 지구	영등포구	200	시설비
	서울숲길 주변	성동구	200
	성내동 강풀만화거리	강동구	200
시민공모	성미산마을	마포구	200
지정사업	석촌동 일대	송파구	800	자치단체 자본보조

□ 추진일정

기본계획 작성 (주민, 유관기관 협의)	□	사업비 배정	□	공사 시행 (자치구별)	□	효과 모니터링 (시·구)
’15. 4. ~ 5.		’15. 5. ~ 7.		’15. 7. ~ 11.		’15. 11. ~ 12.

Ⅳ		행정사항

□ 공사시행 및 사후 모니터링

○ 보행환경 개선지구 지정 고시 및 홍보 시행

- 근 거 : 보행법 9조(보행환경개선지구의 지정)

· 내 용 : 지구 명칭, 목적 및 필요성, 소재지, 지정구간, 법적 근거 등

· 방 법 : 시보, 자치구 소식지, 인터넷 홈페이지, SNS 등 활용

○ 사업 전후 만족도 조사를 위한 모니터링

- 보행환경 개선지구 관리대장 작성 등 정량적, 정성적 조사 실시

- 사후 모니터링을 통한 개선안 도출, 지역주민 의견 반영 등

□ 「보행환경 개선사업 평가위원회」구성‧운영

○ 근 거 : 보행법시행령 11조(평가위원회 설치·운영 등)

○ 운영기간 : ’15. 1 ~ 12월

○ 자문위원 : 분야별 전문가 및 시민단체 대표로 탄력 운영

○ 자문내용 : 보행환경 개선지구 선정, 사업 모니터링 및 평가

- 보행환경개선지구 사업 시행을 위한 개선내용 자문

○ 소요예산 : 2,250천원(150천원/인 × 5인 × 3회)

- 예산과목 : 자전거 이용 활성화 및 교통환경 개선, 보행환경 개선사업, 보행전용거리 운영, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙임 : 1. 자치구 공모 선정결과 및 관련자료 1부

2. 시민공모전 선정사업 개요 1부

3. 송파구 지정사업 개요 1부.  끝.