사 무 인 계 인 수 사 항

항               목

1. 주요사업추진현황 : 별첨

2. 주요지시사항목록(대통령, 국무총리,시장 등) : 해당없음

3. 보존문서 목록 : 해당없음

4. 장부․대장 목록 : 해당없음

5. 차량 현황 : 해당없음

6. 재산조서 : 해당없음

7. 채권, 채무조서 : 해당없음

□□ 1  채권조서

□□ 2  채무조서

8. 세입세출예산현계표 : 해당없음

□□ 1  세입예산현계표

□□ 2  세출예산현계표

□□ 3  국비세출예산현계표

9. 세입세출외 현금수지현계표 : 해당없음

10. 지방교부세 수불현계표 : 해당없음

11. 적립금 조서 : 해당없음

12. 유가증권 수불현계표 : 해당없음

13. 보조금 수지현계표 : 해당없음

14. 임시일상경비 수지현계표 : 해당없음

15. 물품 조서 : 해당없음

16. 기타 필요하다고 인정되는 사항 : 없음

<별지 제1호서식>

도시고속도로과 사무인계인수서

1. 2015. 년 1월 16일  현재  도시고속도로과의 업무를 별첨과 같이 인계인수 함.

2. 인계인수서 내용은 사실과 같이 작성하였음.

3. 인계인수 및 입회자는 다음과 같음.

ㅇ 인계자 :  전직위  도시고속도로과장   성 명  명경출  (인)

ㅇ 인수자 :  직  위  도시고속도로과장   성 명  홍숭희  (인)

ㅇ 입회자 :  직  위  토목부장           성 명  노우성  (인)

<별지 제2호서식>
주요사업 추진현황
구 분	건 명	사업내용(개요)	추 진 현 황	부 서
공사업무	강남순환 4공구	구간 : 금천구 독산동～금천구 시흥동 규모 : 도로개설 4～8차로, 연장 2.48km 사업기간 : 2001. 12. 29.～ 2016. 5. 19. 사업비 : 313,777백만원	공정 : 57% -교각 : 41기 중 잔여 3기 시공 중 -상부공 : 강교 294m, 2,119톤 설치
공사업무	강남순환 민간투자사업	구간 : 금천구 시흥동～서초구 우면 규모 : 왕복 6～8차로, 연장 12.4km 사업기간 : 2007. 11. ～ 2016. 5. 19. 사업비 : 627,980백만원(민자 5,242억원- 불변가 별도)	공정 : 70% -터널 : 굴착완료 -관악IC : 도림천지하차도(T.R.C.M) 완료 -선암교 : 교각(21개소) 강교 2,800톤 설치중
공사업무	강남순환 8공구	구간 : 서초구 우면동～강남구 수서동 규간 : 도로개설 4～10차로, 연장 7.96km 사업기간 : 2002. 7. 3. ～ 2018. 7. 31. 사업비 : 375,298백만원	공정률 : 21.4% -본선교각(과천방향) : 8기중 6기 시공중 -주암교(과천방향) : 광역상수도 2,280m중 640m 시공예정 -화물터미널앞지하차도 (복공판) 설치중
공사업무	정릉램프 연결공사	사업위치 : 성북구 정릉동(정릉램프 주변) 사업규모 : 폭 5~6m, 연장 533m - 신설램프 120m, 본선확장 82m, 보도Box 31m, U-Type 37m, 토공 263m 사업기간 : 2013. 12 ～ 2016. 12 총사업비 : 12,200백만원(1,300백만원)	-'14.10.23 : 도시계획시설 사업실시계획 고시 -'15.1월현재 교각4기중2기 (P1,P2) 가시설 공사중
설계자문위원회	본부설계변경 자문위원회운영	설계변경 심의위원회(자문회의) 현황 - 총 355회 개최하여 1,946명(외부위원 247명)이 참석 957건을 처리하였음	설계변경 자문회의실적 -2011.1월 ~ 현재 총 957건을 자문하여 24,140백만원 절감
※ 참 고： 주요사업은 역점추진업무, 계속추진대상업무, 기획 및 현안중인 사항을 포함 위 사실을 확인함.
2015년 1월 27일
확인자：직위 토목부장 직급 기술4급 성명 노우성 인