보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독1처-2183
보존기간	5년		협 조	대리
결재일자	2015.03.06.
공개여부	공개
제 목	현장 실정보고[보도부 가드레일판 추가 도장 등]

1		공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 개봉고가차도 보수공사-강서

나. 공사기간 : 2014.09.22 ~ 2015.03.20

다. 공사개요 : 교면포장(SMAT-CON) 2,156㎡, 토공부 재포장 20a, 보도부 재포장 10a

라. 도 급 액 : 1,145,350,430원

마. 도 급 자 : 미래건설기술(주) 대표 염일영

바. 발 주 청 : 강서도로사업소 시설보수과

2		보고내용

본 공사와 관련 보도부 가드레일판 추가 도장 및 개봉고가 슬래브 하부 콘크리트 보수를 위한 트럭탑재크레인 사용일수 증가에 대한 검토보고입니다.

(1) 가드레일판 추가 도장

가. 현황 및 문제점

- 개봉고가 가드레일은 광명→서울방향으로 보차도 경계부에 설치되어있음.

- 당초 설계서상 가드레일판 강재도장은 앞면(차도측)만 도장하도록 되어있으나, 기존 가드레일판 뒷면(보도측) 및 지주의 도장부 녹발생 및 들뜸현상으로 재도장이 필요한 실정임.(발주청 구두지시 사항임)

나. 가드레일판 강재재도장 추가 물량 실측

연번	위 치	지 점	연장	면적	비고
1	개봉고가 보차도구간 (광명→서울방향)	가드레일판 (보도측)	W=450mm L=445.9m	200.66㎡
2	〃	가드레일 지주	∮100mm 개소수=228개	42.96㎡
	합 계			243.62㎡

※ 기존 가드레일(보도측) 현황

기존 가드레일판(보도측) 현황	기존 가드레일판(보도측) 현황

다. 강재재도장 수량 및 개략공사비 산출

- 가드레일판 강재재도장(추가) 수량산출

․ 가드레일판 : 폭(W) 0.45m × 연장(L) 445.9m = 200.66㎡

․ 가드레일 지주 : π × 구경(Φ) 0.10m × 높이(H) 0.6m × 갯수(N) 228개

= 42.96㎡

- 강재재도장(전체면적) 수량산출

․ 가드레일판 및 기타 실측으로 인한 면적 증가

당초 면적(A)=300㎡ → 변경 면적(A)=605㎡ [(증) 면적(A)=305㎡]

- 개략공사비 : (증) 12,562천원

라. 검토의견

- 상기와 같이 발주청 구두지시된 사항으로 기존 보도측 가드레일판 및 지주에 대해 강재도장을 실시하여 가드레일의 내구성을 증진시키고자 함.

2. 트럭탑재형 크레인 사용일수 증가

가. 현황 및 문제점

- 개봉고가차도 하부에 남부순환로가 통과하고 있으며, 주변으로 주차시설이 위치하고 있음.

- 당초 설계서상 개봉고가차도 슬래브 하부 및 교각 등 콘크리트 보수와 배수시설 정비에 대해 트럭크레인(10ton)을 사용하여 정비하도록 되어있으나,

- 공간비계 설치 면적 감소로 인한 사용일수 증가 및 주차시설로 인한 작업공간 협소로 트럭크레인(10ton) 사용이 어려운 실정임.

나. 트럭탑재형 크레인(3ton) 사용현황

연번	위 치	장비 사용공종	일수	비고
1	개봉고가 슬래브 하부	콘크리트 표면보수 및 단면복구	64일
2	〃	배수시설 정비	30일
	합 계		94일

※ 개봉고가차도 슬래브 하부 현황

개봉고가차도 슬래브 하부	개봉고가차도 슬래브 하부

다. 장비 규격 조정 및 작업일수 산출

- 장비 규격 조정

․ 장비규격 : 당초 크레인(트럭) 10ton → 변경 트럭탑재형 크레인(3ton)

․ 작업일수 조정 : 당초 60일(480시간) → 변경 94일(752시간) [(증) 34일(272시간)]

(작업일수 산정 : 작업일보 및 감독일지 참조)

- 개략공사비 : (감) 1,023천원

라. 검토의견

- 상기와 같이 개봉고가차도 공사추진 중 공간비계 설치 면적 감소 및 작업공간 협소로 인해 장비 규격 및 작업일수를 조정하여 시공함이 타당하다고 사료됨.

3		조치내용

- 상기 사항을 발주청에 실정보고하고, 그 결과에 따라 조치하고자 함.

따로붙임 : 1. 위치도 및 현황사진 각 1부.

2. 개략공사비 산출내역 각 1부.  끝.