관리번호	2-3

응봉교 건설공기 지연에 따른 대책 마련

【도시기반시설본부 토목부】

□ 추진현황

처리 결과		반영 여부
종결	진행	수용	일부수용	미수용	검토
○		○

□ 민원요지

○ 건설공기는 최대한 빠른 시기에 마무리 될 수 있도록 하고,

○ 시민들에게 공기 등 공사개요를 정확히 공지하는 안내문 게첨

□ 시장님 말씀(요청) 사항

○ 기존교통량(일 58,000대)을 처리하면서 협소한 공간에서 단계적으로

공사를 시행하는데 어려움이 많음

○ 주민들의 불편을 최소화하기 위해 우선 주거지역만이라도, `13년 상반기까지 완료하도록 완료하겠음

□ 추진사항(결과)

○ `12. 5. ~ `13. 11. : 주거지역인 시점부 구간 공사완료

- 단계별 공사계획에 따라 일 58,000대의 교통을 처리하면서 기존 응봉교 철거 및 새로이 응봉교 건설

- 교통 우회용 가설교량 설치

○ `13.12. ~ `15. 1. : 동부간선도로 횡단 구간 응봉교 건설

○ `15. 1. ~ `15. 8. : 철도횡단구간 기존 응봉교 철거 및 확장 교량 건설

○ `15. 8. 30 : 응봉교 건설구간 왕복 4차로 우선 개통

□ 특이사항 및 미담사례

○ `15. 8. 28 : 보도자료 배포 (왕복 4차로 우선 개통)

○ `15. 8. 30 : 응봉교 왕복 4차로 우선 개통 관련 시의원 등 현장 체험

- 시의원(김기대, 박양숙, 박중화, 이상목), 성동구청장, 도시기반시설본부장

관리번호	4-3

제목 : 겸재고가도로 설치 반대 및 겸재교 문화공간으로 조성

【도시기반시설본부 토목부】

□ 추진현황

처리결과		반영여부
종결	진행	수용(일부수용)	미수용	검토
○		○

□ 민원요지

○ 운동장 편입계획이 있던 전동중학교 교장 및 학부모의 학습권침해를 주장하며 교량건설을 반대함.

○ 낙후된 면목동을 위해 시공 완료된 주교량을 문화공간으로 조성 요구함.

□ 시장님 말씀사항

○ 문화다리 2차선을 편측 또는 양측으로 할 것인지 설치방안 검토 후 장래 확장에 대비하여 문화다리에 고가의 시설물 설치 지양.

○ 주민 반대 시 접속교량은 2차로만 우선 건설하고 장래 확장 가능한 방안으로 대안 제시할 것.

□ 추진(사항)결과

○ 본선교량은 당초 계획대로 4차선 도로로 완료하여, 2015.6.22 임시개통 하였음(문화시설은 미설치)

○ 접속교량은 2013.11.29일 2차선으로 재설계하여 교통량을 감안 동대문구측은 진출입 램프 2개소를 설치하고, 중랑구측은 교통량의 변화에 따라 장래 확장하는 것으로 기초공(교각, 교대)을 기설치한 상태임.

관리번호	7-2

양천구 지하차도 공사관련 피해 대책 요청

【도시기반시설본부 토목부】

□ 추진현황

처리 결과		반영 여부
종결	진행	수용	일부수용	미수용	검토
○		○

※ 해당사항에 ○ 표시

□ 민원요지

○ 서부트럭터미날앞 교차로 건설 중 차량통행 소음으로 인해 생활하는데 불편하니 기존에 설치되어 있던 방음벽을 공사 준공 전 재설치 요청함.

□ 시장님 말씀(요청) 사항

○ 방음벽설치 시 생태적, 디자인 등을 종합적으로 고려 방음벽 용도로 가로수를 활용하는 등 쾌적하고 효율적인 설치 방안은 없는지 검토해 보기바람.

□ 추진사항(결과)

○ 2012.11.07. : 방음벽 설치에 따른 주민의견 조회

○ 2012.12.10. : 서울시 디자인심의 위원회 심의

○ 2013.03.30. : 설치완료

□ 미수용(검토) 사유   ※ 검토 건은 향후계획 포함 작성

○ 없음

-

○

-

□ 특이사항 및 미담사례(언론보도사항 필히 기재)

○ 없음

-