155. 도시고속도로 연결램프 추가설치(화랑로 진출입로)

	<건의(민원) 사항>
□ 도시고속도로 연결램프 추가설치

□ 사업개요

○ 위    치 : 중랑구 북부간선도로 묵동IC내

○ 규    모 : 진입램프(B=5m, L=640m), 진출램프(B=5m, L=847m)

○ 사 업 비 : 215억원(설계비 10.3억원)

○ 사업기간 : 2008. 8 ~ 2016.12(설계 : 12.12.26~15.12.31)

○ 설 계 사 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

□ 추진경과

○ ’08.08~’09.12 : 타당성조사 및 기본계획 시행

○ ’10.04.07~’11.05.31 : 기본설계용역 시행

○ ’13.01.09 : 실시설계용역 착수(~’15.12.31)

○ ’13.04.03 : 노선변경안 검토 및 협의(도로계획과)

○ ’13.08.30~09.12 : 기본설계(안) 공람공고

○ ’13.09.09 : 노원구청장 방문(기본설계안 및 검토안 설명)

○ ’13.09.17 : 이노근 국회의원 방문(현안사항 및 구조물 보고)

○ ’13.09.30 : 주민설명회 개최(공릉2동 주민센타)

○ ’13.10.~11. : 검토 노선안에 대한 경제성 및 타당성 검토

○ ’13.12.12 : 화랑램프 추진 노선안 조정 시달(도로계획과)

- 진입램프 실시설계 시행, 진출램프 장기안 검토

○ ’14.04.17 : 주민공람공고 시행(묵동IC내 진입램프)

○ ’14.10.27 : 건설기술심의

○ ’14.12.22 : 묵동IC내 진출램프 추진 시달(도로계획과)

○ ’15.03.10 : 주민공람공고 시행(묵동IC내 진출램프)

작성자	토목부장 : 노우성	☎3708-2540	설계과장 : 이승우	☎2585	담당 : 이석근	☎2588

□ 갈등사항 : 없음

□ 검토의견 : 진행중

□ 향후계획

○ ’15. 4. : 세부검토 및 측량, 관련기관 협의

○ ’15. 5.~ 6.: 건설기술심의 및 설계VE

○ ’15. 7.~ 8.: 설계자문, 디자인심의

○ ’15. 12. : 설계용역 완료

□ 위치도

□ 대상지 현황(조감도)