’16년 노후 옥내급수관 교체사업 추진

중부수도사업소

노후 옥내급수관 교체(갱생) 사업을 ’18년도까지 완료 할 수 있도록 특단의 대책을 수립하여 추진코자 함

□ 사업소별 연차별 추진계획

구 분	총 계	기 교 체 (’07~’14)	연차별 계 획
			소 계	’15년	’16년	’17년	’18년
가구수	23,334	9,575	13,759	1,900	3,800	3,800	4,259
사업비 (억원)	112	39	73	10	20	20	23

□ ’16년 목표달성을 위한 대책

○ 노후 옥내급수관 홍보 안내문 제작·인쇄 (30,000매)

○ 공동주택 공용급수관 교체 공문 및 홍보 안내문 발송 (4회)

- 비내식성 강관을 공용급수관으로 사용하는 아파트 (24개 단지 7,164가구)

○ 자치구 민원실 홍보 안내문 비치 및 홍보 요청 (2회)

- 구청(4개구청 민원실), 주민센터(68개소)

○ 수도관련 업체 홍보 요청 (2회)

- 관내 수도설비 업체 107개 업체

□ 건의 사항

○ 특단의 대책에 따른 인원 보강 (2명)

- 검토 보고서, 공사비지원 승인, 완공상태 검사요청 및 지출 : 내근 직원 1명

- 옥내배관 교체 전담홍보 및 전수조사 정리 : 1명

□ 향후계획

○ ‘94년 3월 이전 건축허가된 아연도강관을 급수관으로 사용하는 주택에    대해 다각적 홍보로 조기 교체 유도

○ 공동주택(아파트, 연립 등) 방문 집중 개별 홍보

○ 연립주택, 다세대주택의 세대배관 교체 신청시 공용배관 교체 독려

○ 급수불편 민원처리, 아리수 품질관리 확인제 수질 검사 요원을 활용한       연중 지속적인 홍보