문서번호	물재생계획과-1766
결재일자	2016.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	하수관리팀장	물재생계획과장		물순환안전국장
협 조
	하수정비팀장

16년 빗물받이 확충 및 이설(악취) 사업비 자치구 예산배정계획 보고

2016. 2

물순환안전국

(물재생계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘16년 빗물받이 확충 및 이설(악취) 사업비

자치구 예산배정계획

집중호우시 신속한 노면수 배제를 위한 빗물받이 확충과 횡단보도 및 버스정류장의 빗물받이에서 하수냄새가 발생하여 시민에게 불쾌감을 주는 빗물받이 이설을 위한 자치구 사업비 지원계획을 보고드림

Ⅰ		검토내용

□ 빗물받이 확충 시설

○ 34개 침수취약지역 및 집중호우시 상습침수지역

○ 빗물받이 구체 및 뚜껑 파손으로 노후된 빗물받이

○ 빗물받이가 없어 우기시 노면수배제 불량지역, 경사가 급한 개소 등

○ 횡단보도, 버스정류장 등은 다수 시민이 머무르는 지역은 제외

○ ‘15 자치구 하수실태 평가 우수 자치구(성동구외 4개구)는 인센티브 금액 배정

○ 빗물받이 1개소당(m당) 설치비 1,000천원 ~1,500천원 기준 적용

□ 빗물받이 이설(악취)

○ 횡단보도, 버스정류장, 지하철 입구에 설치된 빗물받이 중 하수악취 발생으로 인하여 악취 체감도가 높은 빗물받이

- 효과가 낮을 것으로 판단되는 근거리 이설(3m 이내)은 제외

○ 빗물받이 1개소당 이설비 2,000천원 기준 적용

Ⅱ		사업추진시 유의사항

□ 빗물받이 설치

○ 일반지역에 대해선 빗물받이 설치시 이토실 설치(A-type)

○ 악취민원발생 다수 지역과 해충발생으로 위생안전에 위해를 줄 우려가 있는 지역은 이토실 미설치(B-type)

A-【이토실 설치 시】	B-【이토실 미설치 시】 악취민원 다수 발생 지역 등

○ 간선, 이면도로에 빗물받이 확충으로 집중호우시 노면수 배수처리 원활

- 빗물유수 방향과 일치하는 빗물받이 설치하여 유입량 증대

- 상류지역 빗물유입시설 부족시 빗물받이 확충 설치

간선도로 배수불량	이면도로 배수불량

□ 노후 불량 빗물받이 정비

빗물받이 뚜겅 파손	빗물받이 구체 파손	빗물받이 노후 불량

□ 측면통수형 빗물받이 설치

○ 저지대 우수집중지역 위주의 설치 및 쓰레기 유입방지시설 병행 설치 요망

시범설치 측면통수형 빗물받이	빗물받이형 경계석-사각	덮개에 쓰레기 유입방지시설 설치
		유입방지바 상세

※ 평시에 쓰레기 유입이 방지되도록 현장여건에 맞는 시공요망

□ 연속형 빗물받이 설치

○ 도심지 주변시설 가로환경과 어울리도록 시공

○ 차량통행시 파손되지 않는 구조로 시공, 소음발생 저감제품 사용 요망

□ 빗물받이 이설 설치(악취방지)

○ 이설장소에 대해 우수유입 불량, 주변 빗물받이 간격을 고려하여 설치

	버스정류장 앞 빗물받이
	횡단보도와 이격 설치

○ 기존 빗물받이 폐쇄시 배수설비 폐쇄 지침(물재생계획과-5212(15.12.22)호) 참조

○ 연차별 빗물받이 이설실적 및 추진 계획

구분	소 계	2015년	2016년	2017년	2018년	비고
대상	2,670개소	786개소	400개소	600개소	884개소

Ⅲ		‘16년 추진계획 및 예산배정 계획

□ ‘16 사업개요

○ 사업대상 : 25개 자치구  빗물받이 확충 : 470개소 , 이설(악취) : 400개소

○ 소요예산 : 1,800백만원

○ 사업기간 : ‘16. 3월 ~ ’16. 6월(우기전 완료)

□ 자치구 신청현황 및 예산배정 계획

○ 빗물받이 확충 및 이설사업

<단위 : 개소, 백만원>

연번	자치구	자치구 신청		예산배정계획
		확충	이설	확충	이설	확충		이설	합계
		개소	개소	개소	개소	포상금	금액	금액
계		2,717	1,883	470	400	320	680	800	1,800
1	종로구	100	100	20	20		30	40	70
2	중구	52	20	20	10		30	20	50
3	용산구	72	52	20	10		30	20	50
4	성동구	100	60	20	15	100	30	30	160
5	광진구	140	50	15	10		20	20	40
6	동대문구	110	50	30	10		40	20	60
7	중랑구	81	45	20	10	30	30	20	80
8	성북구	97	14	15	10		20	20	40
9	강북구	21	50	20	10	80	30	20	130
10	도봉구	69	52	20	10		30	20	50
11	노원구	71	70	20	15		30	30	60
12	은평구	70	120	20	25		30	50	80
13	서대문구	47	-	20	-		30	0	30
14	마포구	235	120	20	25		30	50	80
15	양천구	200	52	20	10	60	30	20	110
16	강서구	99	71	15	15		20	30	50
17	구로구	50	125	20	25		30	50	80
18	금천구	104	52	20	10	50	30	20	100
19	영등포구	36	110	20	23		30	46	76
20	동작구	200	162	15	32		20	64	84
21	관악구	194	192	20	40		30	80	110
22	서초구	69	98	15	20		20	40	60
23	강남구	240	51	15	10		20	20	40
24	송파구	160	117	15	25		20	50	70
25	강동구	100	50	15	10		20	20	40

□ 세부 추진계획

○ ‘16. 2월          예산배정, 공사발주 및 착공

○ ‘16. 3월 ~ 6월  빗물받이 확충 및 이설 사업 시행

○ ‘16. 6월          사업완료(우기전 6.30)

※빗물받이 확충 사업완료후(우기전) 빗물받이 이설 시행

□ 행정사항

○ 빗물받이 추진사항 주간보고 (매주 금요일)

○ 우기전(6.30) 사업완료, 공정관리 철저 지시

※ 「2013년 하수도분야 업무편람」을 준수하여 빗물유입시설 확충 및 빗물받이설치 (P54~P55, P92, P96~P98)

붙   임 : 사업대상지 현황 사진 1부.  끝.