'16~'18년 빗물마을 조성 현장점검 결과 보고

빗물관리시설물 유지관리 점검 및 시행 중인 공사현장 안전관리 등을 위한 「'16~'18년 빗물마을 조성사업」 현장점검 결과 보고임

□ 추진근거

○ '16~'18년 빗물마을 조성 시·구 합동 현장점검 계획

(물순환정책과-21336, 18.11.23)

□ 점검개요

○ 점검대상 : '16~'18년 빗물마을 조성사업

- '18년도 4개 마을 조성사업 중 명시이월(강북, 금천) 대상은 '19년도에 사업추진 예정으로 점검에서 제외

○ 점검기간 : 2018.11.23.~2018.12.07.(15일간)

○ 점검방법 : 시·구 합동 현장점검(육안점검)

○ 점검자 편성

조명	점검자		점검대상	비고
	서울시	자치구(치수과)
1조	정재훈	성 북: 유진호 동대문: 이영은 성 동: 김재혁	성북(장위), 동대문(전농), 성동(송정)
2조	김동우	금 천: 김재윤 양 천: 이호준 은 평: 김세준	금천(시흥), 양천(신월), 은평(불광)
3조	송유경	강 북: 송준하	강북(수유)
총괄 : 물재이용관리팀장

○ 주요 점검내용

- 빗물마을 조성사업 구간 내 빗물관리시설물별 유지관리 실태 점검

- '18년도 시행 중인 빗물마을 조성사업 현장 안전관리 실태 점검

- 사업부진 공정 만회대책 등 적기 공사완료를 위한 공정관리 실태 등

□ 주요 점검 및 조치 결과

○ '16~'17년도 빗물마을 조성사업 유지관리 미흡한 구간 정비요구

- 투수블록 부분침하, 줄눈재 채움 미흡 3개소(금천구,성북구, 은평구)

○ '18년도 빗물마을 시공 및 안전관리 미흡한 구간은 정비요구

- 빗물관리시설물(경계석, 띠녹지) 시공 부실 2개소(동대문구,성동구)

- 안전펜스 및 시설물 적치 등 안전관리 미흡(동대문구)

□ 향후일정

○ '18.12월 : 지적사항 조치계획서 제출(자치구→서울시)

○ '18.12월 ~ 4월 : 지적사항 정비(자치구)

○ '19.05월 ~ 6월 : 명시이월된 사업은 자치구(강북, 금천)와 협의하여 시·구 합동 현장점검 예정

따로붙임 : '16~'18년 빗물마을 현장점검 지적사항 1부.  끝.