월계~녹천 철도이설사업 공사기간 검토

2016. 7. 12.(화)

동부간선도로 확장(1공구)에 따른 ‘경원선 월계~녹천 철도이설사업’이 월계4구역 용지제공 지연으로 착공이 지연됨에 따라 철도이설사업 사업기한 연장 요청에 대한 검토 보고임

※ 한국철도시설공단 수도권본부장 건설총괄처-10784(2016.6.30.)호

□ 사업개요(공정율 75%)

○ 공 사 명: 경원선 월계~녹천간 철도이설공사

○ 공사위치: 노원구 월계4동 ~ 도봉부 창4동 일원

○ 공사기간: 2009.9.14. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비: 64,875백만 원

□ 추진경위(월계4구역 재개발)

○ '10. 2.: 월계4구역 주택재개발조합 설립

○ '12. 6.: 월계4구역 주택재개발 사업시행인가

○ '14. 6.: 월계4구역 주택재개발 관리처분계획인가

○ '15. 7.: 월계4구역 주택재개발사업 착공

○ '15. 9.: 월계4구역 기부채납 부지 길내기 공사 시행

□ 현황 및 문제점

○ 월계4구역 용지제공 지연(2014.12→2015.9)으로 경원선 월계~녹천 철도이설사업 착공이 지연됨에 따라 궤도부설 및 길내기 공사 등을 위한 절대공기(25개월)가 부족한 실정임

□ 처리계획

○ 공사기간 변경: '16.12.31.→'17.9.30.

첨부  경원선 철도이설 노선 현황 1 부. 끝

작성자	도로계획과장: 하종현(☎2133-8060) 도로시설계획팀장: 한정무(☎8081) 담당: 백부현(☎8083)

□ 경원선 철도이설 노선 현황