- 서울역 일대 도시재생사업 추진 관련 -

제11차 시·구 협력회의

2017.  9. 15. (금)

도시재생본부

[공공재생과]

보고순서

회의개요                                             --3

2017년도 예산 집행계획                             --4

3. 중림로 보행문화거리 조성공사 (도로시설과 심희원팀장) --5

4. 성요셉문화거리외2개소 조성공사(도로시설과 김일팀장) --6

5. 남산옛길 보행중심가로 조성공사 (도로시설과 김일팀장) --7

6. 남대문시장 진입광장조성 및 지하보도 공간 활용 공사(도로시설과 박흥규팀장)--8

7. 우리마을 가꾸기 조성 공사(중림) (도심재생과 김승주팀장)     --10

8. 우리마을 가꾸기 조성 공사(회현) (도심재생과 김승주팀장)     --11

9. 약현성당 포토존 조성공사외1(공원녹지과 구동근 팀장) --13

- 서울역 일대 도시재생사업 추진 관련 -

시·구 협력회의 개요(11차)

□ 회의개요

○ 일시 : 2017. 9. 15.(금)  10:00~11:30

○ 장소 : 서울시청 본관 3층 공용회의실

□ 참석대상(16명)

○ 중      구 : 도심재생과장, 도로시설과장, 공원녹지과장, 사업담당 팀장

중림동장, 회현동장

○ 한      전 : 한국전력공사 차장

○ 공공재생과 : 공공재생과장, 서울역재생계획팀장, 지원팀장

○ 지 원 센 터 : 도시재생지원센터장, 코디네이터

○ 용  역  사 : 동해,PMA,미래 용역사 PM

□ 주요 논의안건

○ 대상사업 : 6개 사업 (사업담당 팀장 발표)

- 중림로 보행문화거리 조성공사 (도로시설과 심희원팀장)

- 성요셉문화거리외2개소 조성공사(도로시설과 김일팀장)

- 남산옛길 보행중심가로 조성공사 (도로시설과 김일팀장)

- 약현성당 포토존 조성공사외1(공원녹지과 구동근 팀장)

- 남대문시장 진입광장조성 및 지하보도 공간 활용 공사(도로시설과 박흥규팀장)

- 우리마을 가꾸기 조성 공사(중림,회현) (도심재생과 김승주팀장)

○ 2017년 완료사업 공정관리 및 부진사업 공정 만회대책

	결정해야 할 사항
보행문화거리 조성사업 등 공사 추진 일정 관리 적정 검토 부진사업에 대한 공정 만회 대책 방안 수립 (예산 조정 방안 등)

붙임   보고서식 1부.  끝

작 성 자	공공재생과 :홍선기☎2133-8640 서울역재생계획팀장 : 김장성☎8642 담당 : 조선휘☎8648

				2017년도 예산집행현황								2017년 예산현액 : 21,684백만원 본 예산 : 20,864백만원, 사고이월820백만원 (2017. 9. 5. 현재)
구분		주요 사업																		비고
						예산액			집행 현황						예산 검토			본예산 변경
						본예산	사고이월	예산현액	재배정	원인행위	자치구,sh 재배정		지출	집행잔액	지출예정	이월예상액	불용예상액	변경	증감
						20,864	820	21,624	21,517	20,867	17,684		12,365	9,259	8,456	0	803	20,821	803
용역		1			계획 수립 용역 총괄 소계	1,186	503	1,689	1,689	1,689	0		913	776	776	0	0	1,689	0
		1-1			도시재생 활성화 실행계획	850	-	850	850	850			510	340	340	0	0	850	0
		1-2			건축자산 진흥구역 관리계획	120	-	120	120	120			51	69	69	0	0	120	0
		1-3			중림동 활성화 실행계획		76	76	76	76			0	76	76	0	0	76	0
		1-4			회현동 일대 지구단위계획	38	-	38	38	38			0	38	38	0	0	38	0
		1-5			보행문화거리 기본 및 실시설계	86	174	260	260	260			260	0	0	0	0	260	0	준공
		1-6			산업생태계 조사	92	-	92	92	92			92	0	0	0	0	92	0	준공
		1-7			서울역 미래비전 수립		253	253	253	253			0	253	253	0	0	253	0
거버 넌스		2			거버넌스 총괄 소계	1,477	0	1,477	1,370	1,270	0		1,102	375	175	0	200	1,277	200
		2-1			손&남 프로젝트 추진	107	-	107	107	107			107	0	0	0	0	107	0
		2-2			계절별 축제	260	-	260	260	260			122	138	138	0	0	260	0
		2-3			한·영 프로젝트	100	-	100	100	100			100	0	0	0	0	100	0
		2-4			도시재생지원센터 운영	550	-	550	550	550			550	0	0	0	0	550	0
		2-5			지역거점공간 운영	300	-	300	193	93			93	207	7	0	200	100	200	공공건축
		2-7			주민공모(아이디어 공모)	20	-	20	20	20			20	0	0	0	0	20	0
		2-8			주민공동체 형성사업(공모)	140	-	140	140	140			110	30	30	0	0	140	0
재생사업	소계	3			재생사업 총괄 소계	18,120	317	18,377	18,377	17,827	17,684		10,347	8,030	7,427	0	603	17,774	603
	앵커	3--1			앵커시설 조성(총괄)소계	8,030	0	8,030	8,030	8,030	8,030		8,030	0	0	0	0	8,030	0
		3-1-1			중림동(성요셉아파트앞 창고시설)	2,230	-	2,230	2,230	2,230	2,230		2,230	0	0	0	0	2,230	0	SH
		3-1-2			서계동(서계동 도시계획시설 부지)	4,000	-	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	0	0	0	0	4,000	0	SH
		3-1-3			회현동(회현동 건축자산)	1,800	-	1,800	1,800	1,800	1,800		1,800	0	0	0	0	1,800	0	SH
	거리	3-2			보행문화거리 조성(총괄)	6,997	317	7,314	7,314	6,764	6,764		2,317	4,997	4,447	0	550	6,764	550
		3-2-1			중림로 보행문화거리 조성	2,937	317	3,254	3,254	3,254	3,254		2,317	937	937		0	3,254	0
		3-2-2			성요셉문화거리 조성외2	1,443	-	1,443	1,443	1,443	1,443			1,443	1,443		0	1,443	0	중구
		3-2-3			약현성당내 포토존 조성외1	367	-	367	367	367	367			367	367		0	367	0	중구
		3-2-4			국립극단길 조성	500	-	500	500	500	500			500	500		0	500	0	용산구
		3-2-5			남산옛길 보행중심가로 조성	700	-	700	700	700	700			700	700		0	700	0	중구
		3-2-6			남촌 놀이터 조성	1,050	-	1,050	1,050	500	500			1,050	500	0	550	500	550	중구
	마을	3-3			우리동네가꾸기(총괄)	840	0	840	840	840	840		0	840	840	0	0	840	0
		3-3-1			중림동 우리동네가꾸기	250	-	250	250	250	250		0	250	250		0	250	0	중구
		3-3-2			서계동 우리동네가꾸기	340	-	340	340	340	340		0	340	340		0	340	0	용산구
		3-3-3			회현동 우리동네가꾸기	250	-	250	250	250	250		0	250	250		0	250	0	중구
	특화 사업	3-4			특화사업(총괄)	2,253	0	2,193	2,193	2,193	2,050		0	2,193	2,140	0	53	2,140	53
		3-4-1			서계동 전망데크 및 아트월	0	-	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0
		3-4-2			서계동 구릉지 테마계단	50	-	50	50	50	50		0	50	50		0	50	0	용산구
		3-4-3			남대문시장 진입광장 조성	1,066	-	1,066	1,066	1,066	1,000		0	1,066	1,045		21	1,045	21	중구
		3-4-4			남대문시장 지하공간개발	1,077	-	1,077	1,077	1,077	1,000		0	1,077	1,045		32	1,045	32	중구
		3-4-4			서계동 거점공사	60		60	60	60	30		51	9	9	0	0	60	0	감나무집 중림창고
기타		4			기타 총괄 소계	81	0	81	81	81	0		3	78	78	0	0	81	0	0
		4-1			기간제근로자등보수	6	-	6	6	6			3	3	3		0	6	0
		4-2			시책추진업무추진비	8	-	8	8	8			0	8	8		0	8	0
		4-3			시설부대비	67	-	67	67	67			0	67	67		0	67	0	중구

3		중림로 보행문화거리 조성공사

〈 중구 - 도로시설과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 중림로(실로암사우나 ～ 충정로역)

○ 규  모 : 연장 450m, 폭 15~20m(1차분 100m, 완료)

○ 기  간 : ‘16.11.  ~ ‘17.12.

○ 사업비 : 6,593백만원 (시비 : 4,893, 사업자 : 1,700)

○ 시  행 : 중구청 도로시설과,   시공사 : ㈜대흥토건

□ 추진현황 (공정율 22%)

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월	10월	11월	12월
<2단계 지중화공사>
2단계 지중화공사 협약
2단계 지중화공사
<2단계 보행문화거리 조성>
중림로 2차구간 보도철거
보차도경게석 및 측구설치
보도블럭포설
아스팔트 평삭 및 포장

□ 부진사유 및 공정만회 대책

- 한전(서울지역본부) 지중화공사가 선행되지 않아 본공사 추진 지연

▸ 금년내 준공을 위해 1차(‘17.08.30), 2차(’17.09.07)에 걸쳐 촉구 중

- 2차분 지중화 및 보행문화거리 조성공사 추진을 위한 ‘약 12억원’ 예산부족

□ 추진계획

○ ’17.09. : 한전 ․ 통신 지중화공사 2차분 협약 체결

○ ’17.10. : 한전 ․ 통신 지중화공사 2차분 착공

○ ’17.11. : 중림로 보행문화거리 조성공사 2차분 착공

작 성 자	도로시설과장 : 소철호 ☎ 3396-8252 팀장 : 심희원 ☎ 6111 담당 : 변재원 ☎6112

4		성요셉 문화거리외 2건 조성사업

〈 중구 도로시설과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 중림동 서소문 6길, 만리재길 37길 등

○ 규  모 : 연장 920m, 폭 3~8m, 보도개선, 공지조성, 하수관부설 등

○ 기  간 : ‘17.05.  ~ ‘17.11.

○ 사업비 : 1,560백만원

○ 시  행 : 중구청  도로시설과,   시공사 : 용성종합건설주식회사

□ 추진현황 (공정율 30%)

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월		10월		11월		12월
식재공
하수도공
전기공
포장공
마무리 공사

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

- 공개공지 조성 : 조경셕 쌓기 120㎡, 계단램프 및 토공작업

- 하수관 부설 : 160m/210m(D450)

□ 부진사유 및 공정만회 대책

※ 2017. 11.30 준공예정

□ 추진계획

○ ’17.  9.30. : 한국경제 공개공지 조성

○ ’17. 10.30. : 하수관 부설

○ ’17. 11.30. : 포장 완료 / 공사준공

작 성 자	도로시설과장 : 소철호☎3396-8252 도로계획팀장 : 김 일☎3396-6101 담당 : 백서종☎3396-6103

5		남산옛길 보행중심가로 조성

〈 중구 도로시설과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 회현동 퇴계로 12길

○ 규  모 : 연장 530m, 면적 2,900㎡

○ 기  간 : ‘16. 4.  ~ ‘17.12

○ 사업비 : 700백만원

○ 시  행 : 중구청  도로시설과,

□ 추진현황

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월		10월		11월		12월

□ 부진사유 및 공정만회 대책

※ 설계중

□ 추진계획

○

○

○

작 성 자	도로시설과장 : 소철호☎3396-8252 도로계획팀장 : 김 일☎3396-6101 담당 : 백서종☎3396-6103

6		남대문시장 진입광장조성 및 지하차도 공간 활용 공사

〈 중구청 도로시설과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 남대문로4가 3-6일대(지하보도 포함)

○ 규  모

- 지상 : 진입광장 조성 2,500㎡, 시민잔디광장 1개소, 조망쉼터 2개소

- 지하 : 지하보도(1,200㎡) 입면정비, 커큐니티룸 1개소, 휴게시설 3개소, 벽면전시 3개소, 바닥포장 A=7.72a(B=4m, L=193m) 등

○ 기  간 : ‘17.11.  ~ ‘18.6

○ 사업비 : 2,000백만원(2017. 8. 23)

○ 시  행 : 중구청  도로시설과(보도관리TF팀)   ※용역사 지오아키텍처

□ 추진현황 (공정율 _0%)

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월		10월		11월		12월
서울시 계약심사 의뢰
공사 발주 및 착공
공사 시행 및 준공(2018.6)

□ 부진사유 및 공정만회 대책

-   계약 심사 준비중(설계내역 수정)

□ 추진계획

○ ’17. 10 : 서울시 계약심사 의뢰

○ ’17. 11 : 공사발주 및 착공

○ ’18.   6 : 공사 준공

작 성 자	도로시설과장: 소철호 ☎ 3396-8252 팀장:박흥규 ☎ 3396-6091 담당 황인태 : ☎ 3396-6092

7		중림동 우리동네 가꾸기 시범사업

〈 도심재생과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 중림동 56-53 일대(봉래초교 후문~손기정체육공원 후문)

○ 규  모 : 연장 150m, 폭 2.5~ 4.0m

○ 기  간 : ‘17.5.  ~ ‘17.12.

○ 사업비 : 금250백만원

○ 시  행 : 중구청 도심재생과, 용역사 : ㈜동해종합기술공사, 시공사 : 미정

□ 추진현황 (공정률: 실시설계 99%, 공사추진 0%)

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월		10월		11월		12월
실시설계 용역 준공
일상감사 및 계약심사
공사계약 및 추진
공사 완료 및 준공

□ 부진사유 및 공정만회 대책 (2017년12월 준공)

-   2017년12월31일까지 준공이 되지 않을 경우 사유

▸ 실행을 위한 기본계획(안) 결정 지연

▸ 여러차례 주민설명회(3회) 개최 및 주민의견 수렴, 관련기관(교육청) 협의 지연

▸ 동절기 기간 동안 공사중단으로 공사지연 예상

□ 추진계획

○ ’17.10. : 일상감사 및 계약심사

○ ’17.10.~11 : 공사계약 및 추진

○ ’17.12. : 공사완료

작 성 자	도심재생과장: 신대식 ☎ 3396-8242 팀장: 김승주 ☎ 3396-5771 담당: 김영명 ☎ 3396-5772

8		회현동 우리동네 가꾸기 시범사업

〈 도심재생과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 회현동1가 118-1번지 일대

○ 규  모 : 연장 157m, 폭 1.5~3m

○ 기  간 : ‘17.7.~ ‘17.12.

○ 사업비 : 금250백만원

○ 시  행 : 중구청 도심재생과, 용역사 : ㈜동해종합기술공사 시공사 : 미정

□ 추진현황 (공정률 : 실시설계 99%, 공사추진 0%)

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월		10월		11월		12월
실시설계 용역 준공
일상감사 및 계약심사
공사계약 및 추진
공사 완료 및 준공

□ 부진사유 및 공정만회 대책 (2017년12월 준공)

-   2017년12월31일까지 준공이 되지 않을 경우 사유

▸ 실행계획을 위한 기본계획(안) 결정 지연

▸ 주민설명회 개최 및 주민의견 수렴

▸ 동절기 기간동안 공사 중단으로 공사지연 예상

□ 추진계획

○ ’17.10. : 일상감사 및 계약심사

○ ’17.10.~11. : 공사계약 및 추진

○ ’17.12. : 공사완료

작 성 자	도심재생과장: 신대식 ☎ 3396-8242 팀장: 김승주 ☎ 3396-5771 담당: 홍다예 ☎ 3396-5775

9		약현성당 포토존 조성공사

〈 중구청 공원녹지과 〉

□ 사업개요

○ 위  치 : 중구 청파로 447-1 약현성당 내

○ 규  모 : 100㎡

○ 기  간 : ‘17. 4. ~ 11.

○ 사업비 : 250백만원

○ 사업내용 : 약현성당 내 포토존 조성 및 전신주 지중화

□ 추진현황 (공정율 15%)

○ 공종별 예정 공정표 (9. 15. 현재)

공 종	2017년
	9월		10월		11월		12월
실시설계 검토
공사시행

□ 추진실적

○ ’17. 8. 28.   : 지중화 사업 시행 요청(공원녹지과 → 도로시설과)

□ 추진계획

○ ’17. 10월초     : 공사 발주 및 계약

○ ’17. 10. ~ 11. : 공사시행 및 준공

작 성 자	공원녹지과장: 함석주 ☎ 3396-8244, 팀장 : 홍순철 ☎ 5871, 담당 : 이승민 ☎5872