1123. 도림고가 엘리베이터 설치 (집행현황)

□ 사업목적

◦ 도림고가 도림동 방향의 계단 경사가 급하여 보행 약자의 안전한 보행환경 조성을 위한 엘리베이터 설치

시민참여예산 사업 현황자료

□ 사업개요

◦ 위  치 : 영등포구 문래동 36번지 ~ 도림동 159번지 (도림고가남단)

◦ 규  모 : 엘리베이터 설치 1개소, 경사로 정비 등

◦ 기  간 : 2018. 2 ~ 2018. 11

◦ 사업비 : 450백만원

□ 예산/집행현황                                                   (단위 : 천원)

예산과목	집행현황
	예산현액	지출액	집행률	방침 수립	착수 현황	추진유형	제안자-사업자 동일여부
도림고가엘리베이터설치(시민참여)	450,000	0	0%	O	X	1. 시 직접 사업	제안자:자치구 시행자:서울시
특기사항 (사업 미착수 등 발생 시 사유 작성)	엘리베이터 설치를 위한 실시설계 용역중 (2018.3.15. ~ 2018.7.27.)

□ 사업실적 및 향후계획

◦ 2018. 2 : 실시설계용역 발주

◦ 2018. 3 : 실시설계용역 계약 및 실시

◦ 2018. 4 : 엘리베이터 도시디자인 심의 (조건부동의)

◦ 2018. 5 ~ 6 : 구조물 기초 지장물 협의 및 규제심의 진행중

◦ 2018. 7 : 엘리베이터 토목부분 공사 발주

◦ 2018. 8 : 전기, 기계부분 발주

◦ 2018. 11 : 공사준공

작 성 자	남부도로사업소장 : 박기범 ☎3284-5101 시설보수과장 : 권태선 ☎ 5460 담당 : 고흥일 ☎5465