환경영향평가 협의내용 이행조치 결과

사업명	가락시장 시설현대화사업	승인기관 (사업자)	서울특별시 (서울시농수산식품공사)
분 야	소음진동	이행조치 완료기한	2018.10.26

구분(분야)	협의내용	이행조치 요청내역	이행조치 결과	비고
소음진동	◦공사 시 사업지구 주변으로 가설방음벽을 설치․운영하고, 가설방음벽 설치 후에도 소음 환경 기준을 초과하는 경우 추가적인 저감 방안을 강구 하여야 함.	◦사업 지구 주변 가설방음벽을 설치(가설방음판넬 높이 준수)	◦도매권역 1공구 부지에 남은 건어 제2경매장 철거 공사 시 공사장 소음 관리 지침 및 환경영향평가 협의내용을 이행하여 생활소음규제기준을 준수하겠음. ◦1공구 공사 부지의 EGI 휀스는 2020년 (예정) 신축 공사 전까지 기존대로 유지하고 신축 공사 시에는 가설 방음판넬로 교체하겠음.	첨부 1 이행 기간의 연장 사유
		◦가설방음벽 설치 후 소음 환경 기준을 초과하는 경우 추가적인 저감 방안 강구	◦향후 가설 방음벽 설치 후 민원 발생시 추가적인 소음저감 방안을 강구하겠음.

첨부 1. 이행 기간의 연장 사유

본 가락시장 시설현대화사업은 2010년 8월 30일에 환경영향평가(본안) 협의를 완료하고 2011년 6월 소매권역 1단계 가락몰 신축 공사 착공하여 2015년 2월에 완료하였음. 2018년 현재 도매권역 1공구 철거공사가 계속진행 중이며 향후 2025년까지 가락시장 시설현대화사업을 완료할 계획임.

본 사업은 사업지구 전 지역을 동시에 공사를 진행하는 방식이 아닌 순환재건축 순서대로 진행됨에 따라 기존 도매시장의 운영과 해당 유통인의 이전을 통한 사업부지 확보를 해야 하는 실정이기에 단계적으로 당초 사업 계획 일정보다 지연이 되면서 공사를  진행하고 있는 상황임(※ 사업 기간 : 당초 ´09년~´18년  →  변경 ´09년~´25년)

도매권역(1-4공구) 사업 진행 상황은 도매권역 1공구 철거공사는 2016년 4분기 축산직판동, 2017년 1분기 제1주차장, 2분기 가공처리장, 3분기 청과직판시장 다, 라동 철거한 후 환경영향평가대상사업 공사 중지를 하였으며, 2018년 2분기 청과직판시장 가, 나동 철거 후 현재는 환경영향평가대상사업 공사 중지(통보서 제출 2018.7.29.) 상태임

향후에는 2018년 12월(예정) 건어2경매장을 철거한 후 2020년(예정) 채소2동 신축 착공 전까지는 환경영향평가대상사업 공사 중지 통보서를 제출할 예정임

2019년에는 환경영향평가 협의내용(토지이용계획 등) 변경에 따라 『환경영향평가법』 제33조 및 동법시행령 제55조 규정에 의거 환경영향평가 환경보전방안검토를 실시할 예정이며 환경영향평가에서 공사 시 사업지구 주변으로 가설방음벽을 설치․운영한다는 협의 내용을 사업 특성에 맞게 조정할 계획임

그 이유는 일반적으로 철거공사 후 바로 신축공사를 실시하는 다른 개발사업과는 다르게 기존 가락시장 유통인들이 정상적인 사업 운영을 하면서 단계적으로 해당 유통인 이전 후 철거공사를 시행하고 있어 철거공사를 수행하는 업체와 신축공사를 수행하는 업체를 동시에 발주 및 계약하여 가락시장 시설현대화사업을 진행할 수 없는 상황임

아울러 해체 및 철거공사에 대하여 송파구청에 비산먼지 발생사업 등에 대한 신고할 때에 비산먼지 발생 억제시설 및 조치사항으로 EGI 휀스 및 방진막 설치, 살수작업, 수시청소를 하는 것으로 조치하여 신고증명서를 발급받았음

추가적으로 이전의 철거 공사 보다 공사장 소음 관리를 강화하기 위해 도매권역 1공구 부지에 남은 건어2경매장 철거 공사 시에는 공사장 소음관리 지침서 및 환경영향평가서에 의거 소음 저감 대책(1. 주간 작업 실시, 2. 경적 사용 금지, 3. 공사 장비 분산 배치, 4. 공휴일 및 야간 작업 금지, 5. 차량 속도 제한 등)을 시행하여 생활소음규제기준을 준수토록 하겠음.