(양식)

2019년 안전관리 향상을 위한

상수도 공사현장 추진 공정 회의

2019. 8. 27(화) 15시

강남수도사업소

(담당자와 검토후 총괄로 보내주세요)

주요공사 추진 현황 보고                                                                                            [2018. 7. 20. 현재]

연번	공 사 명	공사기간	사업비 (도급비)	사 업 개 요	공정률 (%)	시공사	감독청 (보고자)	업 무 담당자
1	내곡지구 이중화 배관 부설공사	’19.5.27 ~ 10.23	1,300 (442)	D=500㎜, L=800m	L= m (0.0%)	㈜세웅씨에스	시설공단 (유헌석)	전동건
2	한남IC~압구정역간외 3개소 송배수관 정비공사	’19.4.4 ~ 11.16	2,400 (926)	D=400~700㎜ L=1,100m	L= 0m ( 0%)	송도건설주식회사	시설공단 (최인규)	박홍
3	경기고사거리~봉은사역사거리간 외 1개소 송배수관 정비공사	’19.5.9 ~ 11.24	4,250 (2,933)	D=600~1350㎜ L=3,100m	L= 0m ( 0%)	대일수도(주)	시설공단 (이정복)	김진성 김병주
4	예술의전당교차로~우면삼거리간 송배수관 정비공사	’19.5.7 ~ .11.02	2,000 (1,859)	D=700㎜ L=670m	L= 0m (0.0%)	㈜비성건설	시설공단 (강평구)	강희창
5	사평대로~삼호가든사거리간 송배수관 정비공사	’19.7.1 ~ 12.31	2,930 (2,033	D=1350㎜ L=620m	L=0m (0.0%)	웅진코웨이엔텍(주)	시설공단 (강평구)	최지영
6	대치동 968-3 ~ 984 –4번지외 4개소 배급수관 정비공사	’19.3.28 ~ 09.23	1,800 (706)	D=200~300㎜ L=1,812m	L= 0m (0.0 %)	주마건설㈜	시설공단 (이정복)	고태우
7	신사동 617-3~629-24번지외 5개소 배급수관 정비공사	’19.3 .29 ~ 10.24	1,645 (742)	D=100~300㎜ L=2,014m	L= 0m (0.0%)	㈜서홍	시설공단 (최인규)	고원석
8	서초동 1341번지외 6개소 배급수관정비공사	’19.4.22 ~ 10.18	1,010 (587)	D=150~300㎜ L=1,280m	L=0m (0.0%)	다사랑건설㈜	시설공단 (김정현)	안효민

공사추진 현황 보고

(공사명 :               )

□ 사업개요

○ 위    치 :

○ 공사개요 : D= 0mm, L=m

○ 공사기간 : 2019. 07. 24 ~ 2019. 11. 19.

○ 수 급 자 :   건설  대표 :

○ 사 업 비 :  백만원 (도급비 :  백만원, 관급비 : 백만원)

○ 발 주 처 : 강남수도사업소 급수운영과  박홍(3146-4853)

○ 감 독 청 : 서울시 시설관리공단 손성국(*************)

○ 공    정 : 0% [D=500mm, L=438m]

□ 추진실적

○ 추진내용

- 시공현황(공정율: 0.0%)(실적  0m/목표  0m)

- D=30~300mm, L= 0m 부설완료(3,4,5,6,7구간 완료)

구간	위치	관경	연장	시공일자		포장복구		비고
				착수	완료	복구현황	복구기관
계			1,890		660
1							삼주건설 (원인자)	야간
2							삼주건설 (원인자)	야간
3						가복구	강남구청 (관리청)	주간
4							강남구청 (관리청)	주간
5							강남구청 (관리청)	주간,야간
6						완전복구	강남구청 (관리청)	주간
7							강남구청 (관리청)	주간
8							강남구청 (관리청)	주간

○ 세부 추진실적 (6.29 ~ 7.21)

- 관부설 D500mm, L= 100m (   에서            까지)

‣ 기존관철거(L=0m) 및 기존관 폐쇄(L=438m)

※ 미철거 사유 :

- 제수변설치: D500mm, 1개소(구형변실)

○ 공사준비 검토사항

- 공사안내판 설치(대형 및 소형) 및 안전관리설치현황

‣ 사전예고 교통안내간판(500, 300, 200, 100m등) 설치

‣ 공사장 전방 싸인보드, 로봇신호수, 에어간판, 교통신호수 배치

- 공사시행전 자재적치 및 운반

‣ 직관은 공사직전 현장으로 자재운반

‣ 이형관 및 기타자재

‣ 공사완료후 남은 자재는 중간집하장으로 운반

○ 공사중 검토사항

- 포장복구(기존 아스팔트 두께등)

‣

‣

- 공사중

‣

○ 공사완료 검토사항

-

‣

‣

□ 문제점 및 대책

○ 문제점

-

-

○ 대  책

-

-

□ 향후계획

○ 관로 부설(1구간) :

○ 기 성 시 행(1차) :

○ 설계 변경 시행   :

○ 공 사 준 공     :

□ 기타(특이) 사항

○ 노무비 지급 등 공사대금 관련 보고

-

○ 품질, 안전 등 점검사항 보고

- 관충진 시공계획서 및 사급자재공급원 검토

-

-

○ 기타 문제점 및 건의사항 보고

- 특이사항 없음

□ 위치도

1구간 - 8월~9월중 작업완료 예정

2구간 - D300, L=410m완료, D100, L=100m완료 (8월초 작업완료 예정)

범 례(부설)

완료 :

예정 :

□ 사진대지

안전관리(신호수 배치-모범운전자)	안전휀스 설치전경
관부설 및 다짐 전경	제수변설치 및 변실정비
환토재(모래)부설 및 심도 전경	포장복구 및 공사완료 후 물청소 전경