도시철도 종합안전대책 추진중 사업 세부내용

(2019년도 3/4분기 현재)

□ 국토교통부 과제 : 객실내 CCTV설치

연번	관리 번호	사 업 명	추 진 내 용	비 고
4	2-7	객실내 CCTV설치 (부분완료)	▣ 1단계(2012년) 완료 (111개 편성, 939칸) ○ 전체 차량중 혼잡도와 범죄사건이 가장 많은 2, 7호선 우선시행 - 추진일정( ’11.11월 ~ ’12.06월 : 설치완료) ○ 2호선 신형 VVVF 전동차 38편성 356칸에 712대(칸당2대) 카메라 설치 ○ 5~8호선 전동차 각 1개편성(4개편성, 30칸) 객실 CCTV 시범설치(2011년) ○ 7호선 전동차 69개편성 553칸 객실 CCTV 설치(2012년) ▣ 2단계(2012년 이후) - 진행중 ○ 전동차 영상기록장치(CCTV) 설치 업무조정(’17. 10월) - 방침수립 및 예산심사: 차량분야 - 설치 세부계획 수립 및 발주, 설치 공사관리: 정보통신처 ○ 사장방침-163(2018.02.22.)『전동차 실시간 모니터링 시스템 구축을 위한 영상기록장치(CCTV) 설치 방안』 ○ 객실 CCTV 설치 - ‘18년~ ’19년2월: 200칸 설치(신조 전동차 도입설치) - 신조전동차 도입설치: ‘19~’25년 - 자체 설치: ‘20~’21년 (844칸 1,688대) - 2020~2021년 자체설치 예산(74.3억 원)배정요청 ○ 운전실 CCTV 설치(정보통신1사업소) - 정보통신1사업소-2730(’19.3.27)『전동차 영상기록장치 제작 구매설치 방침수립』 - 서울시 계약심사 결과수신: ‘19.4.5일 - 전동차 운전실 영상기록장치 제작구매 설치 계약체결 ․ 계약기간: ’19.6.20.~‘20.5.15. ․ 계약업체: ㈜글로벌텔레콤 ․ 계약금액: 891,508,320원 - CCTV 제작규격서 승인 : ‘19.8.27.(정보통신1사업소)	차량 운영처로 변경

연번	관리 번호	사 업 명	추 진 내 용	비 고
4	2-7	객실내 CCTV설치 (부분완료)	- 5~8호선 전동차 영상기록장치 제작구매 시범설치 ․ 설치편성: 708편성(7108호, 7008호) ․ 기 간: ‘19.10.02~10.31 ․ 설치일자: ‘19.10.02 ․ 작업내용: 전방 카메라 및 Poe 인젝터설치, 기존 NVR 프로그램 추가설치 및 저장 영상확인 등	차량 운영처로 변경