8호선 추가역 건설사업 분야별 주요업무 추진현황

※ 19.5월 기준

구 분	분 야		관련 부서	담당자	추진 현황
기본계획 /GB인가	토 목[총괄] 건 축		토목처 건축처	-	완료
교통 및 환경	전략환경 및 소규모영향평가		토목2사업소	-	완료
	환경보전방안				완료
	교통영향평가				완료
역사 기본 및 실시설계 (일괄발주)	건 축[총괄]		건축처	임태건 차장, 김휴석 과장	용역 시행 중 (17.1.~현재, ‘19.4월 말 기준 공정률 96.4%) ※토지보상(LH공사) 지연에 따라 순연 중
	토 목		토목처	신정환 차장, 정학균 주임
			토목2사업소	박길춘 주임
	역사전기		전기처
	역사기계(기계관제, 소방포함)		기계처
			승강기관리단
	PSD(구조체, 부대건축)		승강장안전문관리단
	기본설계 경제성(VE) 검토		토목처	-	완료
	실시설계 경제성(VE) 검토		건축처	-	완료
시스템 설계 (분야별 발주)	전기	전차선	전기처		설계	용역 시행 중(17.11.20.~현재) ※용역 정지
		송배전
					공사
	신호(신호관제 포함)		신호처		설계	19.6월 설계용역 발주 예정
			제2종합관제센터		공사
	통신(통신관제 포함)		정보통신처		설계	19.05.17. 설계용역 개찰
			제2종합관제센터		공사
	전자		전자처		설계	예 정(자체설계)
					공사
	궤도		궤도처		설계	완료(18.04.02~12.10)
			궤도2사업소		공사	발주 예정(2020년 상반기 내 준공 예정)
	PSD(PSD관제 포함)		승강장안전문관리단		설계	예 정(자체설계)
			제2종합관제센터		공사
	전력관제		제2종합관제센터		설계	예 정(자체설계)
					공사
차 량	전동차 개수업무		차량정비처		예 정
영 업	역명 제정		영업계획처		추진 중