국회대로 지하화 및 상부공원화 추진현황

□ 사업개요

서울제물포터널 건설	국회대로 지하차도 및 상부공원화
○ 위 치 : 신월IC ~ 여의도동 ○ 규 모 : 왕복 4차로,연장 7.53km (소형차 전용) ○ 기 간 : 2010. ~ 2020.10 ○ 사업비 : 4,547억원(시비 794억원) ('07.3월 불변기준)	○ 위 치 : 신월IC~국회의사당 교차로 ○ 규 모 : 연장 7.6㎞, 폭 40~55m (친환경공간 약 11만㎡) ○ 기 간 : 2013 ~ 2024 ○ 사업비 : 4,015억원

□ 추진현황

【서울제물포터널 건설】 (’19.11월말 71%)

○ ˈ07.07.27 : 민간제안서 제출

○ ˈ09.02.02 : 사업제안서 타당성조사 완료 (KDI PIMAC)

○ ˈ11.06.16 : 우선협상대상자 선정

○ ˈ13.11.15 : 민간투자사업심의 (기획재정부)

○ ˈ14.05.09 : 협약 체결

○ ˈ15.09.17 : 실시계획 승인

○ ˈ15.10.16 : 공사착공

【국회대로 지하차도 및 상부공원화】(’19.11월말 3.6%)

○ ˈ12.11.20	: 국회대로 친환경공간 조성방안 수립

○ ˈ13.03.~ˈ13.10.	: 아이디어공모 시행 (시민, 대학생)

○ ˈ13.05.~ˈ15.02.	: 타당성조사 및 기본계획 시행

○ ˈ16.07.~ˈ17.07.	: 제물포터널 구조물 중첩 구간 설계 (신월IC)

○ ˈ16.07.~ˈ20.06.	: 지하차도 및 도로다이어트 구간 설계

○ ˈ19.11월 현재	: 구간별 정상 추진 중

- 지하차도 설치(제물포터널과의 중첩구간, 1.2km)	: 공사 중(공정 12%)

- 지하차도 설치+도로다이어트(6.4km)	: 기본 및 실시설계 중

- 상부 공원(약 11만㎡)	: 설계 공모 중(12월완료)

□ 향후계획

【서울제물포터널】

○ 2020년 10월	: 개통 예정

【국회대로 지하차도 및 상부공원화】

○ 2020년 : 지하차도 설계 완료, 상부공원화 설계 착수

○ 2021년 : 상부공원화 설계 완료

○ 2023년 : 지하차도 및 도로다이어트 완료

○ 2024년 : 상부공원 및 친환경공간 조성 완료 예정