「서울시 시네마테크 건립」사업개요

영상문화 산업의 지속적 발전을 위해 고전·독립·예술영화 등 다양성 영화에 대한 안정적 상영인 서울시 시네마테크 건립을 추진하고자 함

1		사 업 개 요

○ 사업목적

- 독립영화, 예술영화, 비상업영화 등의 전문 상영관 운영을 통해 영상산업의 저변과 다양성을 확보하는 거점 공간을 조성

- 영화관련 자료기재, 미디어센터 등 영상문화 복합공간으로 활용

○ 사업기간 : ’17. 3. ~ ’22. 3.

○ 총사업비 : 26,482백만원(국비 1,182백만원, 시비 25,300백만원)

○ 건축규모 : 연면적 약 4,800㎡, 지하3층~지상10층(부지면적 : 804.1㎡)

- 건립위치 : 서울시 중구 마른내로 38(중구 초동 공영주차장)

○ 공간구성 : 영화 상영관(3개), 미디어센터, 아카이브, 전시실 등

- 층별 공간구성(안)

	10층 (루프탑)	∙야외 극장	155㎡
	9층	∙운영 사무실	311㎡
	8층	∙영상작업실 ∙영상장비 보관실	211㎡ 51㎡
	7층	∙영상교육장(3개) ∙영상자료 전시실	234㎡ 174㎡
	6층	∙중극장(167석) ※ 독립영화 전용관	230㎡
	5층	∙영화도서관 및 보관실 (영화 관련 도서 및 DVD·블루레이 열람)	118㎡
	4층		248㎡
	3층	∙소극장(128석)	187㎡
	2층	∙기념품숍	97㎡
	1층	∙카페 ∙매표소	158㎡ 49㎡
	지하1층 ~ 지하2층	∙대극장(234석) ※고전영화 전용관 ∙영사실 ∙전기실	381㎡ 51㎡ 167㎡
	지하3층	∙주차장 ∙기계실	221㎡ 291㎡

2		추 진 경 과

○ 영화문화산업발전 종합계획 수립, 시테마테크 조성 발표	: ’15. 3.

○ 서울시 시네마테크 건립 기본계획 수립	: ’15. 7.

○ 중앙투자심사 통과(조건부 적정)	: ’16.11.

○ 시의회 공유재산 관리계획 의결	: ’17. 4.

○ 서울시네마테크 설계공모	: ’17.12.

○ 설계용역 계약 체결 및 계획설계 착수	: ’18. 5.

○ 계획설계 완료 및 중간설계 착수	: ’18.12.

○ 중간설계 완료 및 실시설계 착수	: ’19. 5.

○ 실시설계 완료	: ’19.10.

○ 서울시네마테크 운영 공청회 개최	: ’19.12.

3		향 후 일 정

○ 건축공사 계약 체결	: ’19. 12.

○ 운영단체 선정, 개관준비 착수	: ’20.하반기

○ 전시공사 착공	: ’21.하반기

○ 건축공사 및 전시공사 준공	: ’22. 3.