“신뢰와 기술을 바탕으로 초일류 기업 지향”

(주)신명건설기술공사

수 신	:	서울시 도시기반시설본부장
참 조		방재시설부장
(경 유)
제 목	:	전면책임감리용역 업무수행 계획보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 본부와 ‘13.04.01일 총괄계약하여 용역수행중인“용허리공원 빗물저류조 설치공사 전면책임감리용역”에 대한 것으로서 현재 계약된 1차감리 용역중 보조감리원 투입기간이 도래되어 붙임과 같이 실정보고 하오니 공사기간과 병행하여 감리업무 수행할 수 있도록 검토하시어 승인하여 주시기 바랍니다.

아      래   -

가.용 역 명 : 용허리공원 빗물저류조 설치공사 전면책임감리용역

나.감리기간(총괄) : 2013.04.01~2014.09.30                                       1차  : 2013.04.01~2014.09.30

※ 공사기간(총괄) : 2012.12.21 ~ 2014.09.30

2차  : 2013.04.16 ~ 2014.09.30

붙   임  :  업무수행 계획보고 1부. 끝.

잠원 2 빗물펌프장 신설공사 외 1개소 전면책임감리용역

책임감리원    임    재    영

담당/ 토목감리원 박 동 균
시 행	: 잠원2감 2014-193(2014.07.10)
주 소 우)137-857 서울특별시 서초구 서초2동 1324-1(용허리공원)
전화 02-3487-1708, FAX 02-3487-1709 jam3487@hanmail.net

2014년

용허리공원 빗물저류조 설치공사

( 전면책임감리 업무추진 현황보고 )

2014.07.10

용허리공원 빗물저류조설치공사 전면책임감리용역

(주) 신명건설기술공사

용허리공원 빗물저류조 설치공사

( 전면책임감리 업무추진 현황보고)

○ 본 사업은 재해위험지구의 우수취약시설을 보강 신설하여 침수 방지대책       일환으로 시행하는 저류조 설치공사로

- 2012.12월 착공 현재 암거 237m중 237m 완료  현공정 98.1%

○ 금년 9월30일 완료 목표로 수목이식 및 시설물 설치등 조경공사에 박차를      가하고 있으며

○ 본공사 서초대로 유입관로 횡단작업하여 수방대비에 만전을 기하고 유관       기관인 서초구청의 추가보완요구사항을 추진중이고

○ 기계 및 전기공사는 인수기관인 서초구청에 유지관리교육을 하고 저류조       시운전을 계획중에 있으나

○ 현재 계약된 1차감리 용역중 보조감리원(토목)투입기간이 14.07.31일 도      래되어 남은 잔여공사 안전사고 발생이 없고 원활한 인수인계등 마무리에      철저를 기하고자 공사기간(14.09.30)과 병행하여 감리업무 수행할 수 있      도록 하고자 함.

□ 공사 및 감리 현황

○ 용 역 명 : 용허리공원 빗물저류조 설치공사 전면책임감리용역

○ 감리기간(총괄계약): 2013.04.01.~2014.09.30

1차: 2013.04.01.~2014.09.30

○ 공사개요 : 빗물저류조 V=15,000㎥, 유입관로 L=237m(2.0×1.5@1)

주배수펌프설치10.5㎥/min 4대,  지배수펌프설치0.5㎥/min 2대

○ 공사비 및 감리비

- 총공사비 :  11,535백만원 (도급비 7,625백만원)

(토목·조경 9,869, 전기 568, 기계 350, 폐기물처리 45, 이전비 및 기타 703)

○ 시공사  : 케이월드종합건설 외 1개사

○ 감리사  : ㈜신명건설기술공사외 2개사

□ 공사추진현황 –저류조 및 유입관거 237m 완료. 현공정 98.1%

1.저류조 설치완료

2.유입관로 암거 237m 완료

① 잔여공종은 서초구청 추가요구사항

○ 저류조 토출관로 개량(203m)

○ 저류조 토출관로 가정하수관 역류방지장치설치

○ 서초대로 상 도로 침수시를 대비한 중분대 사이 우수흐름 통로 설치

○ 저류조 앞 사거리 맨홀 및 관로(D600) 신설

3.전기 및 기계공사 시운전 준비

4.조경공사- 수목이식 및 시설물설치중

□ 현안문제 보고

1.보조감리원 연장투입요청

○ 본 공사는 서초대로와 서운로에서 시행하는 공사로 현재 조경공사와 서초구청에서 추가요청한 사항을 검토하여 공사를 추진중으로 현재 저류조 및 유입암거 237m를 시공하여 공정 98.1%로

○ 기발주된 2차공사 준공기한이‘14.09.30일이고 책임감리용역 계약기간이  14.09.30까지나 1차감리용역중 토목보조감리원 1명의 투입기한(14.07.31)이 도래되어 검토한 바, 인수기관인 서초구청의 추가요청사항 반영을 위한 안전,품질등 원활한 공사관리와 견실한시공 및 인수인계등 을 위해 공사와 병행하여 보조감리원의 주재가 더욱 필요한 필요한 실정이고,

○ 또한 잠원2빗물펌프장 신설공사의 원활한 추진과 용허리빗물저류조의 추가실정보고,시공사 기성, 설계변경, 준공도서작성 및 기계(인수인계,시운전),전기(인수인계,시운전),폐기물등의 감리행정관련업무를 위한 지속적인 감리근무가 필요한 실정임.

□ 대  책

○ 본 공사 상기와 같은 사항으로 2014년 수방대비를 위해 시공사선 열악한 환경과 작업능률을 고려해 공사추진중이고

○ 본 공사의 전면책임감리용역 감리사도 시공과정을 독려 부실시공 방지와 안전하고 원활한 공사추진을 위해 보조감리원도 기간연장 계속업무 수행함이 타당하다고 사료되며

○ 본 공사추진에 철저를 기하고자 전면책임감리 용역수행에 따른 용역비는 추후 설계변경시 반영토록 함이 가하다고 사료 됩니다.

- 개   요 : 보조감리원(토목) 감리사보 1인

- 감리기간: 당초‘13.4.1 ~14.07.31, 변경 :‘13.4.1~ 14.09.30

- 감 리 비: 19,563천원-제잡비포함

2014.  07.

책임감리원  임 재 영