철도안전법 제45조에 따른

철도보호지구 조건(준수)사항

신금호역 출입구 신설․이설 및 환기구 이설공사

□ 착공시 제출서류

1. 철도보호지구 행위신고서(시공사, 공사기간 명기) 제출(국토교통부 철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침 별지 제1호 서식)

- 협의시 제출된 철도보호지구 행위신고서가 착공시 변경(공사기간, 신고자 변경)사항이 있을 경우 변경하여 제출하여야 하며, 공사기간이 추가될 경우에도 공사기간을 수정하여 제출하여야 합니다.

2. 철도보호지구 안전관리계획서 제출(국토교통부 철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침 별표3 서식)

- 철도보호지구 안전관리계획서를 서식에 의거 작성하여 제출하여야 하며, 굴착(암구간 포함), 그라우팅, 수방계획, 크레인 등 대형장비 설치 및 운용계획, 비상연락체계도 등이 포함될 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

- 착공시 제출된 철도보호지구 안전관리계획서의 주요내용(공사관계사 및 관계자, 안전관리자, 비상연락망, 설계 및 건설공법 등)이 변경될 경우 변경사항을 제출 하여야 합니다.

3. 계측계획서 수립 제출(지하철 자동화 계측기 체크리스트 포함)

- 계측관리계획서는 계측기기의 사양을 구체적으로 제시하고, 계측빈도 및 계측관리 기준치를 상세 명기(지하철 구조물 내부 계측계획 포함)하여 제출하시기 바랍니다.

- 지하철 내부 자동화 계측은 별도의 체크리스트 및 증빙서류를 포함하여 제출하여야 합니다.

4. 지하철 안전점검계획서 제출(안전진단 전문기관)

- 지하철 구조물 안전점검계획서는 공사 전,중,후 지하철 구조물 상태에 대한 정밀점검(안전진단 전문기관)이 실시 될 수 있도록 해야 하며, 점검범위 및 자격요건이 충족되도록 작성하여 제출하여야 합니다.

5. 설계도서(최종분) 및 공사착수서류 제출 (세부사항은 협약서 내용에 따름)

□ 일반사항

1. 도시철도 시설물은 「시설물의 안전관리 및 유지관리에 관한 특별법」제2조 1호의 1,2종 시설물로서 철도안전법 제45조 및 동법 시행령 제46조, 「철도보호지구에서의 행위제한에 관한 업무지침(국토교통부 고시 제2018-331호)」에 의거, 우리공사 협의조건을 준수하여야 합니다.

2. 공사장 안전 및 시공관리에 대해서는 관련 법 및 규정, 인허가 기관의 지시에 따라 공사시행자 및 시공사․건설사업관리자(감리) 책임 하에 관리하여야 합니다.

3. 제출된 설계내용 대로 공사를 하여야 하며, 추가굴착(협의되지 않은 천공작업 포함) 및 부득이하게 변경(굴착규모․공법 등) 할 경우에는 변경된 설계도서를 우리공사에 제출하고 재협의를 거친 후에 공사를 하여야 합니다.

4. 공사 착수 전 시행자(시공사, 감리, 안전점검, 계측 등)는 우리공사(토목2사업소☎02-6110-5228)와 합동으로 지하철 안전관리를 위한 공사 착수회의(안전교육)를 실시하여야 하며, 사업시행자(시공사 등) 책임 하에 도시철도 시설물 보호를 위한 안전교육(매뉴얼 등) 관리사항을 숙지하고 교육내용을 해당 일일작업 전 작업원에게 철저히 교육시키고 기록․유지하여야 합니다.

5. 지하철 안전운행 및 시설물 보호를 위하여 우리공사 직원의 인접굴착공사 관리업무 수행에 따른 현장점검 및 설계자료 열람, 각종 자료요구 등 요청시 적극 협조하여야 합니다.

6. 지하철 인접구간에서는 발파를 금지하고 부득이 발파시에는 사전 우리공사와 협의  하여야 합니다.

8. 계측기 설치는 공사 착수 전에 우리공사 토목2사업소와 합동으로 계측계획에 대한 적합성 여부․운영 및 관리방안 등을 상호 간 협의한 후에 설치하여야 하며, 공사 중 주기적으로 우리공사(토목2사업소)에 계측결과를 제출하고 공사완료시 계측종합 보고서를 제출하여야 합니다.

9. 공사 중 또는 안전점검 결과 지하철 시설물 이상 발생(우려)시는 즉시 우리공사(인접굴착공사 비상연락체계도 참조) 및 허가 감독기관에 통보와 동시에 선안전 조치를 하여야 하며, 안전진단 전문기관에 도시철도 시설물 손상 피해에 대한 원인분석과 대책수립을 의뢰  하고, 그 결과에 따라 원인자 비용부담으로 보수(보강)공사를 시행하여야 합니다.

10. 해당공사는 사업시행자(시공사․감리 포함) 주관 하에 책임시공 요하며, 동 협의조건에 명기되지 않은 사항은 행정기관의 인허가 조건, 공사시방서 및 관련법령, 제 규정을 준수하여야 합니다.

11. 지장물 이설(재시공, 원상복구 등), 계측기 설치, 흙막이 가시설 설치, 기존 구조물 깨기,  신설 구조물(신구 접합부 포함) 구조물 및 시스템 시공, 방수마감 등 제반 시공과정에서 열차 안전운행 및 철도시설 보호 등 공용 중인 지하철 5호선 안전을 최우선으로 안전시공 하여야 합니다.

12. 줄파기 작업은 반드시 도시철도 구조물 저촉여부 확인 및 보호조치 등 철저한 안전대책 강구 후 시공사 및 감리 등 관련 책임자 입회 하에 시행하여야 합니다.

13. 공사 착공 후 공사 관련 세부사항은 우리공사 토목2사업소(☎02-6110-5228) 및 분야별 시설(시스템) 관련부서(건축, 전기, 기계, 통신, 해당 역 등)와 사전 협의 하에 시행하여야 합니다.

14. 시공에 따른 민원 등 각종 문제발생시 대응 및 조치책임 등은 원인제공자(사업시행자,   시공사, 책임감리) 부담으로 처리하여야 합니다.

15. H-파일시공은 지하철 5호선 구조물 저촉여부 확인 및 철저한 보호조치 후 안전시공  하여야 하며, 반드시 Pre-Boring에 의한 관입방법으로 시공하여 지하철 시설물에 미치는 진동 및 충격을 최소화하고 보호몰탈/방수재 보호철저 등 5호선에 유해한 영향이 미치지 않도록 정밀 주의시공 하여야 합니다.

16. 신금호역 역사 내부공사 시행시는 사전 우리공사 관련 부서에 통보 후 반드시 안전 책임자 입회 하에 정밀 주의시공 하여야 합니다. (중요작업은 우리공사 직원 입회 시행)

17. 역사 내 공사시행과 관련 현장 안전관리 철저시행 및 내부 작업 종료시 관련 책임자는 자재 적치상태, 뒷정리 상태를 철저히 확인하여야 합니다.

18. 도시철도 역사 내부에서 고소작업 시행에 따른 작업원 추락 등 안전사고가 발생치 않도록 사업시행자 책임 하에 안전시설 설치 및 관련 안전규정 철저 준수하여야 합니다.

19. 구조물 깨기는 수방 이상유무 확인 후 5호선 구조물에 진동 및 분진 등의 피해가 없도록 다이아몬드 와이어 소우, 코아드릴 등으로 절단하여야 하며, 철근 이음길이 확보 등을 위하여 철근배근 탐사기로 위치 확인 후 인력깨기로 시행하여야 합니다.

20. 신구 구조물 연결부 시공을 철저히 하여야 합니다.(충분한 철근 겹이음장 확보, 방수처리 철저 등)

21. 공사기간 중 공사장비 및 낙하물, 버럭, 분진 등 공사잔재에 의한 도시철도 이용승객의  통행불편(민원) 및 시설물 피해가 없도록 안전대책(낙하물 방지망, 안전휀스, 동선, 조명설비 등 설치)을 철저히 수립 시행하여야 합니다.

22. 공사 중 소음․진동으로 인한 지하철 시설물 훼손 및 지하철 이용시민(신금호역 근무직원 포함) 불편이 없도록 안전시공 및 방음 방진 관련 대책을 철저히 강구하여야 합니다.

23. 지하철 구조물 시공 및 방수마감은 향후 5호선 구조물 안전성 및 유지관리에 유해한  영향이 없도록 정밀하게 시공(원상복구) 하여야 합니다.

24. 동 공사로 인한 인접 5호선 구조물에 유해한 영향(구조물 저촉, 방수쉬트 손상 등)이   미치지 않도록 현황 측량 및 줄파기 결과에 따라 철저한 정밀주의 안전시공(마감공사 포함)을 하여야 합니다.

25. 공사장 주변 각종 지장물에 대비, 지장물 손상으로 인한 5호선 구조물 및 열차 안전  운행에 유해한 영향(노면수 유입, 누수, 가스폭발 등)이 없도록 관련 안전 보호대책을 철저히 강구 시행하여야 합니다.

26. 공사 시행 전 관련도면 및 현황측량, 줄파기 결과 등에 따라 지하철 구조물 보호를 위해 지상부에 지하 도시철도 구조물(통과구간) 표시(경계휀스, Line Marking, 파일라인, 깃발 등) 및 이격거리, 깊이가 표시된 표지판을 설치하고, 도시철도 인접구간의 토류벽 시공, 게측기 설치, 그라우팅 등 각종 공사시 관련 책임자 입회 하에 시행하여야 합니다.

27. 공사 착공 전 도시철도 인접구간 공사장 휀스 내벽에 도시철도 안전확보를 위한 도시철도 관련 상관관계(이격거리, 깊이 등 표기) 도면, 준수사항, 연락처 등이 명기된 도시철도 안전간판(플렉스형)을 제작 설치하여야 합니다.[세부사항은 우리 공사 토목2사업소(02-6110-5228와 협의시행)]

28. 제반 가설재는 굴착과 동시에 적기에 설치하고 해체시에도 사전에 버팀목을 설치하여 가시설 좌굴 및 지반변형이 방지될 수 있도록 정밀 주의시공 하여야 합니다.

29.  지하철과 인접하는 흙막이 토류시설은 저진동 천공장비로 수직도를 유지하여 정밀 주의시공하여야 하며, 그라우팅 작업시 과다한 압력전달로 인한 도시철도 구조물 손상, 저촉, 약액침투 등 유해한 영향이 발생치 않도록 하여야 합니다.

30. 도시철도 건설당시 매몰강재 등 지장물 철저 확인 후 안전시공 및 지장물 발생시 우리공사와 협의 후 안전대책을 강구하여 처리하여야 합니다.

31. 공사 중 집중호우, 외부 유입수, 굴착구간 담수 등으로 5호선 구조물에 부력(양압력)  발생 및 누수, 외수유입 등 유해한 영향이 없도록 수해에 대비한 충분한 배수펌프, 비상 수방자재 확보 및 철저한 수방 안전대책을 철저히 강구 시행하여야 합니다.

32. 도시철도 역사구간에서의 용접 및 가스절단작업 시행(예정)시 사업시행자 책임 하에 서울시 용접 및 가스절단작업 안전관리 준수사항 철저이행 및 안전사고 예방 사전 점검표를 이용하여 안전사고 또는 화재 발생요인 등에 대한 점검을 통해 화재 안전사고가 발생하지 않도록 철저한 조치를 요합니다.

33. 공사현장의 안전사고 예방을 위하여 우리공사 및 지장물 관리기관이 포함된 비상연락망을 작성, 현장비치하고 우리공사 현장 관리부서에 제출하여 긴급상황 발생시 신속한 대응 및 상호 유기적인 업무체계가 구축될 수 있도록 철저한 조치를 요합니다.

34. 시공과정에서 사업시행자(책임감리, 시공사, 설계사 등 포함)의 과실로 인하여 지하철  5호선에 피해(이상)가 발생하였을 경우 원인자 부담으로 도시철도 시설물의 원상복구와 보강(비용)을 실시하여야 하며, 준공 후에도 도시철도 5호선 시설물이 동 시공과정 및 사용 중 피해의 영향과 부주의 등으로 인하여 안전성, 내구성, 사용성을 심각하게 저해할 경우 원인제공자(시공자, 책임감리자, 설계자 등)는 도시철도 구조물의 원상복구와 보강을 이행(부담)하여야 합니다.

35. 상기조건 외 사항은 우리공사와 기협의된 분야별 제반 검토의견, 설계서, 시공계획서, 공사시방서 등 관련 규정 및 각종조건을 준수하시기 바랍니다.

36. 공사 관련 세부 시행조건, 공사범위, 안전관리, 유지관리, 준공(검사) 및 인수인계 등 관련사항은 협약서(특약사항) 체결내용에 따라야 합니다.

37. 신고인(시공사)는 서울교통공사에서 배부된 안전교육 매뉴얼(붙임2)을 준수하여야 합니다.

38. 동 공사를 완료하기 최소 7일 전에는 서울교통공사(토목2사업소)에 그 사실을 알려야 합니다.

붙임 : 1. 비상연락체계도 양식 1부

2. 안전교육 매뉴얼 1부(별첨).  끝.

【붙임】

도시철도 안전 비상연락체계도

					서울교통공사
	본 사(토목처)									제2종합관제센터											유관기관
	02-6311-9887									02-6311-5005
																					구 청 : 00구청 00과 02-○○○○-○○○○
																					소방서 : 00소방서 00과 02-○○○○-○○○○
																					기타1: 0000 02-○○○○-○○○○
	토목2사업소 02-6110-5228 답십리 토목관리소(주/야) 02-6311-5657									신금호역(주/야) 02-6311-5382
																					기타2 : 0000 02-○○○○-○○○○
						신 고 인					사업시행자 000 (02-○○○○-○○○○)
						시공사				감리사			계측사				안전진단기관
						○○○○ (T. )				○○○○ (T. )			○○○○ (T. )				○○○○ (T. )
	공사 중 도시철도 안전 관련 긴급상황 발생(우려)시 철도보호지구 관리자에게 연락하여 사실을 알리고, 안전조치를 취할 수 있도록 하여야 한다.
								담 당 자 연 락 처
	서울교통공사															현 장 책 임 자
	철도보호지구관리자									관제업무 종사자
	토목2사업소 (T.02-6110-5228) 답십리 토목관리소(주/야) (T.02-6311-5657)									제2종합관제센터 02-6311-5005						시공사 감리단 계측사 안전점검			000 (010-○○○○-○○○○) 000 (010-○○○○-○○○○) 000 (010-○○○○-○○○○) 000 (010-○○○○-○○○○)
	인접굴착 담당자 :○○○ (T.010-○○○○-○○○○)

※ 청색부분 작성 제출