설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 박상철	요청일		2015년 6월 일
공 사 명	구리암사대교연결도로건설공사
공사개요	공사규모		사업연장(L) = 1.88km 폭원(B) = 25.0~35.0m(6차로) 확장
	공사기간		2012. 8. 2 ~ 2015. 6. 30
	감 리 사		(주)도화엔지니어링, (주)제일엔지니어링종합 건축사사무소
	설 계 사		(주)경화엔지니어링
	시 공 사		㈜신성건설, ㈜평광건설, ㈜대우종합조경
자문 안건명			미끄럼방지포장 반영			요청금액		증) 153백만원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ▢ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 정수장사거리~훈련원사거리 교통소통대책 서울지방경찰청 교통규제심의 결과에 따라 미끄럼 방지포장을 설계 반영하는 것임.
원설계자 의견(요약) ○ 내용 :
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 정수장사거리~훈련원사거리 횡단보도 주변 미끄럼방지포장 당초 : - 변경 : 4,817㎡					▪ 공사비 증감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 153백만원 - 증 : 153백만원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 미끄럼방지포장 ㆍ 0 → 4,817㎡
별첨서류	1. 감리단 검토보고서 1부 2. 설계내역서 1부 3. 변경전후 도면 1부				▪ 공사예정시기 : 2015. 6 ▪ 소요관급자재 : 없슴

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	구리암사대교연결도로건설공사
계약금액	18,242,000 천원	계약일	2012. 7. 27	시공사	(주)신성건설 외 2개사
공사기간	2012. 8. 2 ~ 2015. 6. 30	낙찰율	80.405%	설계자	(주)경화엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	(주)도화엔지니어링 (주)제일엔지니어링 종합건축사사무소
공사규모	사업연장(L) = 1.88km 폭원(B) = 신규 35.0m(6차로) 및 기존25.0m→35.0m(6차로) 확장			※ 작성자 : 박상철 (☎ 3708-2559)

□ 자문안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증) / 감)
변 경 개 요	-		▪ 미끄럼방지포장 - 4,817㎡	▪ 수량 - 증 4,817㎡
공 사 비	- 백만원		153백만원	증 153백만원
적 용 요 율			조달발주시 금액 적용
설계변경요구자	☑ 발주처 ▢ 계약상대자
협의율 적용 근거	공사계약일반조건 제7절1의나
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인 (업무연락전 도시기반시설본부-15-2114 (2015. 4. 15)
	관련규정	공사계약일반조건 제6절1항의가4)
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⓺공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	정수장사거리~훈련원사거리(기존 시가지) 교통소통대책 관련 서울지방경찰청 교통 규제심의 결과에 따라 동 구간의 황단보도 설치된 주변에 미끄럼방지포장을 설계변경 - 미끄럼방지포장 : 0 → 4,817㎡
효 과	① 공기단축( 월), ⓶ 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⓹ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 ▢ 미이행

□ 관련문서

1. 업무연락전 : 도시기반시설본부-15-2114 (‘15. 4. 15), 14-42854 (‘14.11.3)

2. 서울지방경찰청 교통관리과-30192 (‘14.10.30)

3. 실정보고 검토보고 (감리단) : 고덕(감리) 2015-113 (2015. 4. 1)

3. 실정보고 (시공사) : 신성암사 2015-66 (2015. 3. 12)