서울형 공공자전거용

거치대 구매‧설치 및 안내간판 설치 과업지시서

2017. 08.

서  울  시  설  공  단

(공공자전거운영처)

서울형 공공자전거용

거치대 구매‧설치 및 안내간판 설치 과업지시서

제1장 일반사항

1. 추진개요

1) 소요예산 : 금1,253,320,000원(십이억오천삼백삽십이만원)※ 부가가치세 포함

2) 사업내용 : 서울형 공공자전거용 거치대 구매‧설치 및 안내간판 설치

3) 납품일자 : 계약일로부터 11월 30일까지

4) 계약방법 : 제한경쟁입찰

2. 세부구매 품명 및 수량

1) 공공자전거용 거치대 : 4,940개

2) 거치대설치 : 4,940개,  안내간판설치 : 380개

4) 상세내용은 첨부한 규격서에 의함.

3. 입찰참가자격

1) 입찰공고일 전일까지 검사가 완료된 RFID를 이용한 무인대여용 자전거

거치대 납품실적이 최근 10년간 누적건으로 1,400대 이상 제작․납품한

실적이 있는 업체

4. 계약조건

1) 납품기한 : 계약일로부터 11월 30일까지

2) 납품장소 : 발주처가 지정하는 장소

3) 납품수량 : 거치대 4,940대

4) 납품조건 : 기 구축된 서울 공공자전거 “따릉이“ 시스템과 물리적/기술적으로              완벽하게 호환이 가능하여야 한다.

5) 하자기간 : 납품완료일(검사를 완료한 날)로부터 1년간

5. 세부 사업수행 내용

1) 사업수행 및 관리요건

- 계약상대자는 계약완료 후 10일안에 목표관리, 품질보증, 인력관리, 공정관리(품별 수급일정, 견본제품 제공 일정, 제조일정, 납품일정 등 포함), 시험관리, 보고체계(수시, 정기) 등을 포함한 사업수행계획서를 작성하여 발주처에 제출하여야 한다.

- 납품 후 유지보수를 위한 원활한 부품수급방안을 제시하고, 부품별 단가를 제출하도록 한다.

- 계약상대자는 전체 또는 부문별 사업관리책임자를 임명하여 수행토록 하여야 한다.

- 계약상대자는 사업수행에 따라 생산되는 관련자료 및 기록에 대해 발주처의 승인 없이 타인에게 제공·대여 등을 할 수 없다.

- 사업수행 과정상 발생하는 문제점은 발주처와 충분히 협의하여 조정·보완 하여야 한다.

- 사업수행 관련 안전사고와 기존 장비 및 시설에 대한 피해는 책임 당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등의 사유에 기한 경우, 발주처와 계약상대자가 협의하여 처리한다.

나. 품질 및 하자보증

- 계약상대자는 자체의 별도 품질보증을 위한 품질활동을 실시하여야 하며, 발주처의

검증 결과 평가의견에 제시된 요구사항을 보완하여야 한다.

- 자체의 결함 발생 시 무상교환을 원칙으로 하며, 이미 설치가 완료된 제품의 경우 교체로 인한 설치비용은 사업자가 부담하여야 한다. 또한 제품하자로 인하여 해당 거치대에 부착되어 있는 RFID용 Tag 및 QR 코드를 함께 교체하여야 하는 경우에도 사업자의 부담으로 교체 및 관련된 통신과 자전거 대여/반납 테스트를 진행하여야 한다.

- 사업종료 시 하자이행보증 증권를 제출해야한다.

- 납품지연에 따른 지연배상금은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률

시행규칙」제 75조를 따른다.

다. 검사 및 검수

- 발주처는 본 사업의 공기 준수 및 품질수준 극대화를 위해 사업 진행 사항에 대한 감독 및 검사를 실시할 수 있으며, 이 경우 감독 및 검사 요원은 발주처가 지정하는 직원으로 한다.

- 계약체결 후에는 제품견본을 제출하고, 발주처의 확인 후 제작을 시행한다.

- 제작 거치대에 대한 발주처의 합격여부를 확인한 후 납품하고 불합격 시에는 다른 제품을 납품하여야 한다.

- 사업 진행에 대한 감독 및 검사는 제반 작업진척 사항 등을 기준으로 실시하며, 감독 및 검사결과 지적사항에 대해 시의 시정요구가 있을 경우 계약상대자는 성실히 이행하여야 한다.

라. 분쟁의 해결

- 본 계약사항에 관하여 이견이 발생하였을 경우 또는 계약상에 정하지 아니한 사항에 대하여는 상호협의에 의해 해결한다.

- 계약서 및 과업지시서, 기타 서류 등에 명시되지 아니한 사항은 관계 법령에 의하고, 관계법령에 없으면 발주처와 계약상대자가 서로 협의하여 결정한다.

- 본 과업지시서 등 계약서에 명시되지 아니한 사항은 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법령 등에 따른다.

6. 공공자전거용 거치대 일반사항

1) 적용범위

- 본 과업지시서에 명기된 회사명 및 재료명은 디자인을 표현하기 위함이고 예상금액       산정을 위해 선정된 제품이며 이와 관련된 모든 제품은 공인기관이 인정하는 재료의        특성 및 기준에 적합한 즉, 동등이상의 제품을 사용할 수 있으며 이에 따른 제품의       선택은 감독자의 승인을 득하여 사용할 수 있다.

- 본 과업지시서상 명기되지 않은 사항에 대하여는 건설교통부 제정 건축공사 표준시방서,

토목공사 표준시방서, 기타 관련법령에 준한다.

- 도면과 과업지시서의 내용이 상이하거나 명기가 없는 등의 의문이 제기되었을 경우

공사 시공상 필요한 사항에 대하여는 감독원 지시에 따른다.

- 본 과업지시서 이외에 공사 진행중 감독자(또는 감리자)의 문서에 의한 별도 지시

사항도 과업지시서로 간주한다.

2) 적용규준

- 본 공사에 적용되는 관계법령은 제 규정과 기타 관련법규에 준한다.

• 도로법 (도로점용 규정)

• 건설산업기본법, 건설기술관리법

• 근로기준법 (노동안전관리규칙, 근로보건관리규칙)

• 직업안정법

• 공해방지법

• 도로교통법

• 기타 시공에 관한 법규

• 관련 규준은 K.S 규격과 KASS T 강구조 계산 규준, 철근콘크리트 계산 규준에         의한다.

3) 용어정의

- ‘발주처’라 함은 본공사를 시공자에게 도급을 주는 자

- ‘계약상대자’라 함은 발주처로부터 본 사업을 도급받은 자를 말한다.

• 계약상대자는 계약내역서, 설계도, 과업지시서 등에 의하여 성실히 설치하되,          감독자의 검사, 협의, 지시, 승인에 따라 시행한다.

• 계약상대자는 현장대리인, 현장종사자, 실측조사를 위한 조사업무자 등이 업무를          원만히 수행할 수 있도록 협조한다.

• 계약상대자는 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 이의 제기는 서면으로          하여야 한다. 단, 경미한 사항은 구두로 보고하고 담당원의 지시를 받을 수 있다.

• 계약상대자는 공사 기간 중에 당해 주변 시설물의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한          피해나 제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.

• 계약상대자는 납품 기간 중에 당해 시설물의 훼손, 분실, 변형 등으로 인한 피해나          제3자에게 끼친 손해에 대하여 일체의 책임을 진다.

- 감독원이라 함은 발주처에서 지정한 감독자 및 보조감독자로 임명된 자를 말한다.

• 현장대리인에 대한 지시, 승인 또는 검사결과는 모두 담당원의 권한과                 책임으로 간주한다.

• 감독원은 계약상대자 또는 현장대리인에 대한 중요한 지시 및 승인사항을         서면으로 한다.

• 감독원은 계약상대자가 관계 법령에 의해 공사를 원만히 수행할 수 있도록 협력한다.

• 감독원은 상위 항과 관련하여 관계 법령에 따라 작업 중지를 요청할 수 있으며,          현장조사 결과에 따라 현장지시, 설계변경 등을 시공자에게 요청할 수 있다.

이때, 계약자는 특별한 사유가 없는 한 담당원의 요청에 따라야 한다.

• 시공자는 설계 품질에 관한 변경사항에 대하여 감독자의 동의를 받아야 한다.

4) 거치대 설치

- 관계기관에 대한 수속

• 본 설치와 관련한 인허가 수속은 사전 감독원과 협의하여 공정에 맞도록 처리하며,          이에 소요되는 비용은 발주처와 협의하여 처리한다.

- 각종 설치의 보강

• 현장의 사정에 따라 감독원 및 감리자가 지시하는 보강공사 또는 필요한 시설중          국부적인 보수에 대하여 감독원의 의견을 따른다.

- 현장관리 및 정리

• 설치에 지장을 초래하는 경미한 장애물의 철거 및 작업으로 인한 발생물의 처리 등          현장 정리정돈을 철저히 하여야 한다.

• 공사 보양 및 원상복구: 설치 작업중 인접시설물, 인접건물 및 주변도로를 깨끗이          청소하고, 시설물을 보양조치 하며 주변시설 손상 시 원상복구 한다.

• 설치 및 준공에 필요한 작업 전, 작업 중, 작업 후 사진촬영 및 기록유지를 철저히          한다

- 설계변경

• 발주처가 필요하다고 인정할 때 변경이 가능하고 변경내용에 따라 도급 금액은 증감          될 수 있다.

• 현장 마무리 맞춤 등으로 재료의 치수 및 설치공법의 사소한 변경 또는 이에 수반          하는 약간의 수량 증감 등의 경미한 변경은 감독원의 지시에 의한다. 이때 도급금액은          증감 하지 아니한다. 다만, 재료, 공법 등의 조정 및 변경에 따른 수량의 증감 등            주요한 변경은 상호 협의하여 처리한다.

5) 시공기준

- 공사 계약문서의 적용상 우선순위

• 계약서

• 과업지지서

• 산출내역서

• 설계도

• 승인된 시공도면

• 관계 법령의 유권해석

• 감독원의 지시사항

※ 특별히 계약에 명기되어 있지 않을 경우의 공사 계약문서의 적용상 우선 순위는

상기 순으로 하되, 하위 순위의 적용 품질이 상위 순위보다 좋게 설계 및 기술            되어 있을 경우 하위 순위를 적용할 수도 있다.

- 설계도서 적용시 고려사항

• 도면, 내역서 및 과업지시서 어느 한쪽에 기재되어 있는 것은 상호 일치 되도록          작성하되, 상이한 사항이 있는 경우 우선순위에 따라 수정하고, 특별한 사항에           대해서는 감독자의 의견을 참조하여 발주처와 계약상대자 간 상호 협의하여 처리한다.

• 계약상대자는 시공 전 설계도서간 일치여부 및 현장상황과의 일치여부를 확인하고,          불일치 및 특별한 사항이 발견될시 발주처에 보고하여 상이한 사항에 대해서는           발주처와 상호 협의하여 처리한다.

- 시공자는 아래 항목을 검토할 수 있도록 각종 구조물의 시공상세도를 사전에 제출하여  감독관 또는 감리자의 검토/확인을 받아야 한다.

• 설계도면 및 시방서 또는 관계규정에 일치하는지 여부

• 현장기술자, 기능공이 명확하게 이해할 수 있는지 여부

• 실제 시공 가능한지 여부

• 안전성의 확보 여부

• 계산의 정확성

• 제도의 품질 및 선명성, 도면작성 표준에 일치 여부

• 도면으로 표시가 곤란한 내용은 시공 시 유의사항으로 작성되었는가 여부

6) 시공관리

- 설치기간

• 시공자는 실 착공 전 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을 득한다.

- 현장관리

• 근로기준법, 근로안전관리규정, 보건관리규정, 산재보험법 및 기타 관계법규에            따라 빠짐없이 행하고 다음 사항을 준수한다.

- 주변 구조물 복원

• 공사로 인해 주변 구조물이 손상을 입지 않도록 대책을 강구하여 철저히 시행한다.

• 계약상대자의 부주의로 인해 주변 시설물의 손상 및 인명사고가 발생할 경우            계약상대자의 책임으로 원상복구 및 보상을 시행한다.

- 인접 시설물 보호

• 시공자는 작업중 인접 시설물의 보호에 최선을 다하여야 하며, 훼손되거나 훼손의            우려가 있을 경우 즉시 담당원에게 보고하고 지시에 따른다.

7) 안전‧보건 및 환경관리

- 안전‧보건 및 환경관리 일반

• 계약상대자는 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여          안전대책을 수립시행하고, 사고 발생시 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며,            이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의          책임을 부담해야 한다.

• 계약상대자는 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인 피해를 주지 않도록           필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상복구하거나          보상을 하여야 한다.

• 계약상대자는 해당 공사수행의 직간접적인 영향으로 인한 인접지역 지반 변화를           방지하기 위하여 계측관리 등의 필요한 조치를 실시하여야 한다. 이의 미흡 또는            잘못으로 인한 피해 손실에 대한 처리와 보상 및 원상복구 등은 수급인이 부담하여야 한다.

- 안전관리계획

• 계약상대자는 건설기술진흥법 제62조에 의하여 안전관리계획을 수립하여 발주처에게          제출하고, 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다.

• 안전관리계획은 건설기술진흥법 시행령 제98조에 따라 작성한다.

- 안전관리상태 점검

• 발주처는 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급인의 안전에           관한 제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정          및 해당 작업을 일시중단 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 수급인은          즉시 시정 조치하거나 작업을 일시 중단하여야 한다.

7. 공공자전거용 거치대 설치

1) 시공계획

1-1. 위치선정 계획

- 위치선정

• 보행 및 통행에 지장이 초래되지 않는 공간선정

• 발주처와 감독관이 정해준 거치대의 수량, 방향을 준수하여 설치한다.

• 기 설치된 시설물의 철거‧이설은 감독관의 지시에 따라 진행하고, 추가되는 비용은

별도 청구를 할 수 있다.

- 시공 상세도면

• 설치위치의 특성, 위치, 이격거리 등을 시공 전 발주처와 협의하여 특이사항에           대해서는 설계도서를 조정하여 시공상세도를 작성한다.

- 사진촬영

• 설치 전 상태, 설치 중, 설치 후 단계별 사진을 촬영하여 감독자에게 제출하여야한다.

- 시공 전 협의

• 설치 작업을 시행하기 전에 각 공종의 책임자들이 회의를 개최하여 중요도 및 우선            순위를 상호 협의하고, 협의된 시공순서에 따라 순차적으로 공사를 시행해야 한다.

1-2. 시공

- 시설물 조사

• 설치위치 주변의 전력, 전화, 가로등 등의 시설물에 대한 설치위치 및 상태를 철          저히 조사하여 대여소 설치를 위한 시설물과 주변시설물과의 상충, 작업중 손상

등의 사고가 발생치 않도록 조치를 강구해야 하며, 이러한 의무를 등한시                 하여 사고가 발생할 경우 모든 책임은 수급인이 져야 한다.

- 인접구조물 등에 대한 안정 검토

• 인접구조물에 근접하여 설치를 시행할 경우 문제가 있다고 판단될 경우에는 위치

변경을 발주처에 요청해야 한다.

2) 설치계획

- 거치대의 연결

• 아래 도면과 같이 연결브라켓을 이용하여 2~3개의 거치대를 하나로 체결한다

- 거치대의 고정

• 바닥과의 고정은 셋트앙카(M10, 70~120)를 이용 흔들림이 없도록 캡너트

(4개소)로 고정한다

• 너트와 거치대 Base사이에는 와샤 및 스프링와샤를 사용하여 진동에 의한 너트            풀림을 방지한다.

• 보도의 요철이 심한 경우 거치대 설치 후 흔들림이 없도록 평탄화작업을 먼저             실시하고, 볼트에 너트 체결시 밀착되도록 정밀시공 한다.

8. 거치대 세부규격

항 목	규 격
일반사항	▪서울시 공공자전거 단말기와 물리적/기술적으로 호환(체결/반납)이 가능하여야 한다. ▪단말기와 체결되는 연결장치는 자전거와 미체결시에는 거치대링안에 자동으로 들어가 있으며, 연결 시 이용자가 빼서 사용할 수 있는 구조 여야 한다. 또한 연결장치가 자전거 연결의 필요이상으로 빠지지 않는 구조이여야 한다. ▪야외 환경에서 운영될 수 있도록 혹한기와 혹서기에 정상적으로 작동 될 수 있어야 한다. ▪현장 테스트 관련하여 필요한 경우 현장 테스트를 지원 하여야 한다.
번호판	▪식별이 가능하도록 숫자로 표현된 거치대 번호를 제공하여야 하며, 대여소별 수량에 맞추어 부착되어야 한다.
받침대	▪재질 : 냉간 압연무늬강판 ▪두께 : 3.2t ▪크기 : 580x690x15
거치링	▪재질 : 냉간 압연파이프 ▪두께 : 3.0t ▪크기 : Φ600×Φ48.6
거치커버	▪재질 : LUPOY SC1004ML(강화플라스틱) ▪색상 : PANTONE 7481C(초록), 7536C(회색) ▪크기 : 500x160.4x200
와이어	▪재질 : 강선(표면처리, 고주파열처리) ▪두께 : 8.0t(4000N 이상의 고 인장강도) ▪크기 : Φ8×410
스프링	▪재질 : 스테인레스 ▪두께 : 1.0t ▪크기 : Φ20×200
무게추	▪재질 : 탄소강(도금처리) ▪크기 : Φ27×85
연결판	▪재질 : 냉간 압연무늬강판 ▪두께 : 3.2t ▪크기 : 13×196
잠금뭉치	▪재질 : LUPOY SC1004ML(강화플라스틱) 이상 ▪색상 : 별도지정 ▪크기 : 54x86x32

9. 거치대용 QR코드 및 RFID Tag 세부규격

항 목	규 격
일반사항	대여 및 반납이 원활하도록 기능을 제공한다. 대여소 및 거치대 고유번호를 포함하여야 한다. AP장치의 SSID정보 및 대여소, 거치대 고유번호를 포함하여야 하며, 거치대 고유번호 및 대여소 위치좌표 등 시스템 등록을 위한 정보를 작성하여 제공하여야 한다. RFID와 QR 코드를 통하여 거치대 정보를 제공하여야 하며, 부착 후 현장테스트를 통해 정상적인 작동여부를 확인하여야 한다. 대여소 위치나 거치대 수량 등이 변동된 경우 변동내역을 반영하여야 한다. 거치대는 야외 환경에서 운영될 수 있도록 혹한기와 혹서기 등에도 정상적으로 작동될 수 있어야 한다. 기 구축된 서울시 공공자전거 시스템과 완벽히 호환되어야 한다.
환경조건	동작온도 : –20 ~ + 50℃ 방진/방수/방습 기능 포함 내충격성이 강해야 한다.
RFID Tag	거치대 및 대여소 정보를 단말기에 제공할 수 있어야 한다. RFID 규격 : ISO15693 만족 인식거리 15mm 이상 기 구축된 서울시 공공자전거 시스템과 완벽히 호환되어야 한다.
QR 표시부	스마트폰(따릉이 앱)으로 인식하도록 제공하여야 한다. Base64 암호화 거치대 및 대여소 정보 제공 기 구축된 서울시 공공자전거 시스템과 완벽히 호환되어야 한다.

10. 거치대 상세 설치도

11. 안내간판 설치

1) 안내간판 규격

2) 토공사 및 설치공사

2-1. 터파기 및 되메우기 계획

- 터파기작업

• 터파기의 구배, 폭, 깊이, 흙막이 시공방법, 되메우기 토사의 적치계획 및 잔토

처리계획, 장비계획, 가배수로 계획, 차단기 등 안전시설 설치계획을 수립한다.

- 되메우기 작업

• 다짐두께, 다짐장비, 다짐횟수, 시공함수비 등 작업계획을 수립한다

- 기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

2-2. 시공상세도면

• 지하매설물의 종류, 규격, 매설위치, 이격거리 등 공간관계명시 시공 전 협의에           따른 상호 조정도면

2-3. 사진촬영

- 기초 터파기가 완료되면 전체현황 및 지반상태를 확인할 수 있는 부위별 사진을

촬영하여 감독자에게 제출하여야 한다.

2-4. 시공 전 협의

- 터파기 작업을 시행하기 전에 각 공종의 책임자들이 회의를 개최하여 지하구조물

(건축물,급수관, 배수관, 가스관, 전선관, 통신관 등)이 서로 겹치는 부분이 있는지를        사전검토하고, 가장 적절한 작업의 우선 순위를 정한 후, 협의된 시공순서에 따라         순차적으로 공사를 시행해야 한다. 시공으로 인한 보수보강이 필요하다고 판단 될 때에는         상호 협의하여 처리한다.

2-5. 시공

- 기 매설된 구조물 조사

• 설치지역 내 지하매설물(전력, 전화, 상.하수도, 가스관 등)은 관의 종류, 설치위치,          높이 등을 철저히 조사하여 터파기시 이를 손상시키는 등의 사고가 발생치 않도록           이설, 방호, 철거 등의 조치를 강구하여야 한다.

- 인접구조물 등에 대한 안정 검토

• 인접구조물에 근접하여 터파기를 시행할 경우, 지하수위 저하 또는 안식각 부족           등으로 전도, 침하 등의 위험이 없는 지를 검토하고, 문제가 있다고 판단될 경우          에는 사전에 조치를 강구하고 시공방법에 대한 변경을 요청해야 한다.

3) 터파기

-  터파기는 반드시 인력으로 하되 필요시 소형 기계장비를 이용한다.

-  터파기는 구조물의 축조 또는 각종 관로의 매설에 지장이 없도록 설계도서 또는

감독자가 지시한 깊이와 폭 및 경사로 굴착한 다음 평탄하게 바닥을 고르고 감독자의         검사를 받아야 하며, 감독자의 승인 없이 기초공사를 시행해서는 안된다.

- 터파기시, 지반의 경연, 지형의 상황에 따라 토압에 견딜 수 있도록 견고  하게 조립, 설치하여야 한다.

-  터파기의 시공기면은 터파기로 인하여 원지반이 흐트러져서는 아니 되며, 소정의 기초  바닥면보다 깊게 파지 않도록 주의하여야 한다.

-  터파기 주변은 안전사고에 대비하여 수급인 부담으로 경계설비, 조명, 경고신호, 필요할  경우 보행자 횡단로 등을 설치하여야 한다

- 터파기시 예상하지 못한 지중조건이 발견되면 감독자에게 통지하고, 감독자의 작업재개

지시가 있을 때까지 해당구역의 작업을 재개해서는 안 된다.

3-1. 연약지반의 굴착 및 치환

- 구조물 또는 각종 관로의 터파기한 바닥이 연약지반으로서 보강이 요구되는 경우는  설계변경 승인을 얻어 필요한 넓이와 깊이로 연약지반을 제거하고, 치환재로 다짐완료  후 두께가 15㎝를 초과하지 않는 층으로 펴서 램머, 템퍼 등으로 조밀하게 다져야 한다.

3-2. 기존 포장지역의 굴착

- 기존 포장지역을 횡단하여 굴착할 경우에는 절단기(cutter)로 직선으로 절단하여          포장의 나머지 부분이 훼손되는 일이 없도록 하고, 3.1.1항에 의거, 기존 관로의          위치 및 매설심도를 확인한 후, 적어도 관상단 +30㎝부터는 인력으로 조심스럽게         굴착하여 기존관로의 손상을 방지하여야 하며, 보행자의 안전 및 통행에 지장이 없         도록 하여야 한다. 또한 복구작업은 두께가 15㎝를 초과하지 않은 층으로 펴서 램         머, 탬퍼 등으로 다져야 하며, 표면 마무리는 공사착수 전의 상태와 동일한                상태로 복구해야 한다.

3-3. 터파기한 흙의 처리

- 터파기한 흙중에서 되메우기에 적당한 흙은 터파기 장소 부근에 적치하고, 되메우기에         부적당하거나 사용하지 않을 잔토는 토공계획에 따라 터파기 장소 밖으로 운반한 후,         흙쌓기 규정에 의거, 적당한 층으로 포설되고 다져져야 한다. 이때 터파기 장소 부근에         적치하는 흙은 본 구조물에 피해를 주지 않도록 터파기의 가장자리로부터 최소 1m         이상, 깊은 터파기의 경우는 터파기의 깊이 이상 떨어진 장소에 적치하여야 한다.

4) 철거

- 철거 대상의 시설물 주위 터파기 및 볼트/너트를 제거 후 철거한다.

- 재설치 될 시설물의 경우 손상(충격/스크레치)이 가지 않도록 포장재로 보양작업을         한 후 철거를 한다.

- 철거 위치에 콘크리트 폐기물은 수거하여 폐기물관리법에 따라 처리한다.

5) 콘크리트 구조물 삽입

- 터파기 후 평탄작업을 거쳐 규격에 맞는 콘크리트를 타설 또는 구조물을 설치한다.

안내판의 높이와 각도에 유의해서 설치한다.

6) 구조물 결합

- 삽입한 콘크리트 구조물의 L자 형강(30*30*3, L=300)에 스텐전산볼트                  (4-M12,L=250)를 용접 후 스텐볼트(4-M12)와 캡너트로 안내판을 고정한다.

- 판석(석판)에 설치시 천공 후 셋트앙카(M12, L200)를 설치하여 캡너트로 안내판을         고정한다. 바닥면이 수평으로 평탄하지 않은 경우 수평으로 평탄하게 바닥을 정리한         후 안내판을 고정한다.

7) 되메우기

- 되메우기는 불순물, 유기물 등이 함유되지 않은 양질의 토사를 최적함수비에 가까운         함수비로 다짐완료 후의 두께가 20㎝ 이내가 되도록 펴서, 전압기 또는 램머 등으로         충분히 다져야 한다.

- 되메우기는 지하구조물의 방수층 또는 관로에 손상을 주지 않도록 주의해서 시공해야         하며, 외부방수 처리된 구조물의 경우에는 구조물의 상부 슬래브나 외벽으로부터           1m까지, 관로의 경우에는 관 상단에서 30㎝까지 되메우기용 재료를 사용하여             조심스럽게 되메우기 하여야 한다.

- 되메우기는 콘크리트의 강도 발현시간이나 모르타르의 경화시간을 고려하여 콘크리         트 및 방수공사 시공후, 적어도 1일 이상 경과 후에 시행한다.

- 되메울 부분에 물이 고여 있을 경우에는 되메우기 전에 완전히 제거하고, 건축물에서         바깥쪽으로 2% 정도 구배를 두어 건물 피트 내로 우수가 침입하지 못하도록 하여야         한다.

- 되메우기는 젖은 지반이나 스폰지 지반, 동결지반에 시공하지 않도록 하며, 함수비가          높거나 동결된 토사는 되메우기 재료로 사용하지 않는다.

- 되메우기 장소는 작업을 시작하기 전에 거푸집, 가설물 등의 잔재물을 깨끗이 제거한

다음 시공하여야 한다.

8) 현장 품질관리

- 되메우기의 각 층은 다짐이 끝나면 반드시 감독자의 검사를 받은 후 다음 층을 포설         해야 하며, 감독자의 승인 없이 시공된 부분은 승인기준에 충족될 수 있도록 수급인 부담         으로 재시공해야 한다.

- 현장밀도 시험결과, 적정한 밀도를 얻지 못한 경우에는 그 층을 다시 다지거나 가래질을         한 다음 다시 다지고, 필요하면 살수하고 재시험하여 소요 밀도를 얻을 때 까지 전         과정을 반복하여야 한다. 이때 재시공 및 재시험에 따른 비용은 수급인의 부담으로         한다.

12. 콘크리트 구조물 작업

1) 콘크리트 배합

1-1. 재료

- 시멘트의 종류는 저발열 시멘트(4종) 또는 고로슬래그시멘트로 한다.

- 화학혼화제는 레미콘 생산업체와 상의하여 정하며, AE감수제 지연형 또는 감수제          지연형을 사용한다. 다만, 담당원의 승인을 얻어 AE제, AE제, AE감수제 표준형 또는         감수제 표준형을 사용할 수 있다.

- 필요시 감독의 승인을 받아 레미탈을 사용할 수 있다.

1-2. 배합

-  자갈 : 시멘트 : 모래 = 1:3:6 의 비율로 한다.

-  배합은 콘크리트의 소요품질(소요강도: 25N/㎟ or 250㎏/㎠ *주1)이 얻어지는 범위내          에서 단위 시멘트량을 가능한 한 적게 되도록 시험비빔에 따라 정하고 담당원의 승인을          받는다.

- 구조체 콘크리트의 강도관리를 위한 공시체의 양생방법은 표준양생으로 한다.

2) 앵커볼트

- 콘크리트구조물과 Base판재를 고정하기위해 타설시 앵커볼트를 삽입한다. 볼트는 콘크리트

표면으로부터 20mm~30mm 돌출되어야 한다.

3) 부어넣기

- 부어넣는 콘크리트의 온도는 30℃ 이하로서 가능한 한 저온으로 해야 한다.초기 수화열          관리를 위해 콘크리트 타설 시간은 일몰시부터 야간에 할 수도 있다.

- 부어넣기는 미리 정한 부어넣기 계획에 따라 실시한다.

- 부어넣기 계획중의 이어붓기 시간 간격은 외기 기온이 25℃ 미만일때는 90분,25℃ 이상에         서는 60분으로 한다. 다만 연속 부어넣기 부위에 결함이 생기지 않도록 특별한 방법을 강         구한 경우에는 담당원의 승인을 받아 연속 부어넣기 시간간격을 조정할 수 있다.

- 레미콘 인수위치에는 담당 책임기사를 고정배치 하여, 배출시 필요한 콘크리트 시험을 하         여야 하며(30m3당 시린더 2조) 어떠한 경우이든 레미콘에 가수를 하여서는 아니 된다.

- 레미콘의 강도, 공기량 및 슬럼프치에 관한 규정은 KSF 4009(레디믹스 콘크리트)에 의한다.

- 펌프로 타설시에는 압송중 레미콘 배합이나, 슬럼프가 변하지 않도록 하고, 특히 재료

분리로 인한 강도저하가 발생치 않도록 하여야 한다.

- 콘크리트 타설 전에 거푸집과 바닥은 충분한 습윤상태를 유지하여 콘크리트 타설온도를

낮추는 것이 필요하며 월평균 기온이하로 저감해야 한다.

-  급격한 건조수축이 일어나지 않도록 양생에 주의를 기울여야하며 양생기간을 충분히 길게       - 현장비빔 레미탈을 사용할 경우에도 상기 기온 및 타설기준에 맞도록 시공한다.

4) 양생

- 내부온도가 상승하고 있는 기간은 표면부의 온도가 급속히 냉각하지 않도록 양생한다.

양생을 위한 살수시 콘크리트 온도와 20℃이상 차이가 나는 지하수 등을 사용해서는 안 된다.

- 내부온도가 최고온도에 달한 후는 보온하여 중심부와 표면부의 온도차 및 중심부의 온도         강하 속도가 크지 않도록 양생한다.

- 거푸집널 및 보온을 위하여 사용한 재료는 콘크리트 표면부의 온도와 외기온도와의 차이가         20℃이하로 작아지면 해체한다.

- 타설표면이 최종 마감 면일 경우, 타설종료 후 12시간 만에 거푸집을 느슨한 상태로 하여         수화열의 방출을 할 수 있다.(단, 완전제거는 표면의 온도응력에 의한 균열발생이 있기 때         문에 벽체 거푸집과 콘크리트 면을 10㎝ 이내로 느슨하게 한다.)

- 해체한 후는 콘크리트 표면이 급속히 건조되지 않도록 젖은 마대 등으로 양생한다.

5) 품질관리 및 검사

- 배합 및 타설을 현장에서 감독원의 승인을 받아 시행하고,

- 압축강도는 필요시 28일 기준의 압축강도를 측정하여 검사한다.

13. 금속작업

1) 금속재료

- 이 공사에 사용하는 판형 스테인레스는 모두 한국산업규격의 규정에 있는 것은 그에

따르고, 기타에 대해서는 도면 및 공사시방에 의하거나 승인을 받는다.

판형 스테인레스 및 그 합금(이하 경금속이라 한다)의 종류와 성상 및 용도는 아래의              기준으로 한다.

2) 규격

- 건축용 경금속제의 형상 종류 재질 및 치수는 한국산업규격(KS) 및 공사시방에 따른다.

이 공사에는 스테인레스판 가로 1,220mm*세로 2,440mm*두께 1.2mm를 사용한다.

※아래 안내간판의 규격(대, 중, 소)에 따라 가로, 세로규격은 일부 변경될 수 있음

3) 일반사항

- 스테인레스는 성분 열처리 및 가공도(加工度)에 따라 강도 경도(硬度) 내식성 등이 현저히          달라지므로, 가공 조립에 사용하는 재료는 모두 그 종류 및 재질이 명확한 것을 사용한다.

- 스테인레스 재질을 항상 명확하게 하기 위하여, 공장에서 출하할 때 재질을 표시하는 마크를         적당한 곳에 각인하거나, 적당한 도료로 날인하여야 한다.

- 스테인레스는 수송할 때, 손상하지 않도록 틀을 짜서 포장하고, 부식 오염 및 손상 등이          생기지 않도록 적당한 수단을 강구한다.

-  스테인레스는 보관 중 모래 먼지가 쌓이거나, 빗물 습기 및 기름 등이 묻으면 표면이 오손          될 우려가 있으므로, 이를 방지하여야 한다.

-  스테인레스는 가공 및 운반 중에 기름손으로 표면을 더럽힌 채 방치하거나, 거친 솔등으로          표면을 닦아 흠을 내서는 안된다.

- 공사 중 스테인레스는 석탄 시멘트 모르터 등이 부착되었을 때에는 곧 물로 충분히 씻고

건조시킨다.

-  스테인레스는 흠, 우글음 및 비틀림이 눈에 띄기 쉬우므로, 가공은 이 점에 주의하고 필요          하면 가공할 때 널을 대서 보양한다. 또한 금을 그을 때는 연한 연필로 한다.

-  스테인레스는 석회 모르터 및 콘크리트 등의 알칼리성 재료에 접촉를 피한다.

14. 설치도면

1) 서울형 공공자전거용 보행자 안내판 기초콘크리트 시공도(중형)

2) 서울형 공공자전거용 보행자 안내판 앙카 설치도(중형)

15. 지장물 철거

1) 서울형 공공자전거의 거치대 및 안내간판 설치시 지장물로 인하여 거치대와 안내간판 설치가 곤란하다고 판단될때에는 지체없이 감독자와 협의하여 하여야 한다.

2) 지장물 철거물량은 증감될 수 있으며 물량증감시 비용을 정산처리 한다.

16. 거치대 예비품

아래 도면에서 락장치 및 바퀴가이드의 제품 확인

1) 락장치

연결장치 : 잠금뭉치 + 스프링 + 추 + 연결부품 포함

2) 사출물(거치홀더 조립체 + 연결장치 홀더)

거치홀더 조립체 부분 모듈을 결합한 조립체와 연결장치 홀더를 포함