설계변경 사유서

1. 공 사 명 : 행주IC 보수공사

2. 도 급 자 : ㈜중앙공사 대표 김 태 종

3. 공사개요 : 교좌장치교체 69개소, 전단키설치 2개소, 신축이음교체 29m

4. 공사기간 : 2017. 12. 18 ~ 2018. 6. 15

5. 변경사유 : 공종별 물량 증·감 및 제경비 실정산에 따른 계약금액 조정

6. 공종별 주요 변경 사항 : #별도(설계내역서 참조)

7. 설계변경 내역                                              (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공 사 비		646,965,000	631,202,000	감) 15,763,000
도급비	공 급 가 액	588,150,000	573,820,000	감) 14,330,000
	부가 가치세	58,815,000	57,382,000	감) 1,433,000
	계	646,965,000	631,202,000	감) 15,763,000