문서번호	정수시설과-1700
결재일자	2020.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
협 조
	행정관리과장

2월『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

2020. 2.

영등포아리수정수센터

정수시설과

2월『월드컵대교 건설』에 따른

T.F팀 및 공정회의 개최 결과 보고

□ 회의 개요

○ 일시 : 2020. 2. 11(화) 14:00 ~ 15:00

○ 장소 : 센터 회의실

○ 참석자

센  터 : 소장,행정관리과장,정수시설과장외 직원 3명

도기본 : 토목총괄과장,담당,설계사외 3명

시공사 : 감리단장,현장부소장,감리단 외 2명

○ 회의안건

1) 2020. 3월에 센터내 진행할 공정 설명

2) 정문 경비실 및 현장사무실 이전에 관한 사항

3) 그간 추진해온 공사에 대한 센터 간섭사항 의견 제시 등

□ 주요내용(요약)

【센터】

○ 월드컵대교 Ramp-E 에 인접한 정수센터 정문 경비실 이전 관련하여 적극적인 검토를 요청.

남단구간 설계 완료 전 관련 내용 반영 검토. 예산에 대한 문제가 있을 경우 상수도사업본부과 협의가 필요.

○ 월드컵대교 사무실의 다목적관리동 이전, 또는 정수센터 내 부지 사용은 도기본과 상수도사업본부와 협의사항이며, 협의된 사항에 대해서는 센터에서 적극적으로 지원 예정.

○ 다목적관리동 사용 시에는 서울시 내 공사라도 특수성(특별회계-일반회계)이 있어 임대료 반영 검토가 필요함

○ 침전지 주변 수시 살수 및 청소 요청드림

【토목부】

○ 정문(경비실) 이전 건에 대해 긍정적으로 검토 예정이며 시공 완료 시기는 공정 여건에 따라 조정될 수 있음

【감리단】

○ 용지경계측량하여 Ramp-E 간섭현황 확인하도록 하겠음

【시공사】

○ 2/14(금) 공사 1구역 MP16 현장타설말뚝 시공을 위해 우회도로 조성 예정이며, 2/15(토)부터 우회 시 일부구간에 양방향 통행이 제한(폭 4m) 될 수 있어 안전시설물을 설치하여 불편을 최소화조치하겠음.

○ 2/18(화)부터 공사 1구역 현장타설말뚝 공사 투입 시 공사 특성상 야간작업이 불가피하여, 필요 시 정수센터와 사전협의하여 진행하고자 함.

□ 조치자 의견 및 향후계획

○ 3월 공정에 대한 준수 여부 확인.

○ 4월 공정에 대한 T.F팀 회의 개최 .

○ 공정회의 사항을 도기본,감리단 및 시공사에 공문발송. 끝