공 사 명

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사

일  자

2018.08.27

검토건명

제10차 4회 기성부분(약식) 검토

관련문서

롯건서지현 제2018-438호(2018.08.20)

작 성 자

책임감리원 이 상 희(인)

검토자

책임감리원 이  상  희  (인)

■ 검토 목적

「지하철9호선 3단계 920공구 건설공사」와 관련하여 공사계약 일반조건 제39조 기성대가의 지급에 의해 기성검사원을 책임감리현장참여자 업무지침서 제5장 제59조에 준하여 검토하고자 함.

■ 검토내용

가. 검토관련 자료

계약서,설계서,공사계약일반조건,책임감리 현장참여자 업무지침서,

기성검사원(제10차 4회)

나. 기성검사원 검토 세부사항

○ 10차4회 기성금액                                         (단위:천원)

계약금액 (10차)	회계구분 (금액)	전회 기성금액	금회 기성금액	누 계	잔여금액	비 고
15,410,661	특별회계 (14,023,968)	3,861,000	2,770,220	6,631,220	7,392,748
	세입세출외현금 (1,386,693)	558,000	616,780	1,174,780	211,913
	합 계	4,419,000	3,387,000	7,806,000	7,604,661

○ 기성 실지급액(선급금정산)                                (단위:천원)

구분	계약금액	선급금 지급액	기성금액(A)				선금정산 B=A×42% (특별회계:44% 세입세출:18%)	실수령액
			기성 금액	선금 대상(A)	비대상	계
계	15,410,661	6,458,000	3,387,000	3,387,000	-	3,387,000	1,263,000	2,124,000
특별회계	14,023,968	6,201,000	2,770,220	2,770,220	-	2,770,220	1,225,295	1,544,925
세입세출외현금	1,386,693	257,000	616,780	616,780	-	616,780	37,705	579,075

※ 선금정산=>특별회계(2,770,220×44.22%=1,224,991→1,225,295) +

세입세출(선급금정산 잔여분 : 37,705) = 1,263,000

○ 광역상수도 이설공사 기성금액(세입세출외현금)               (단위:천원)

구 분	계약금액	기 성 금 액			잔 액	비 고
		전회까지	금회기성	누 계
10차4회	1,386,693	558,000	616,780	1,174,780	211,913

검 토 의 견 서

마. 기성내용

공 종		금 회 기 성 내 용	공사비 (백만원)	비고
토목 공사	토 공	- 되메우기 : - 1,846 m3	54	• 덕트이전
	흙막이공	- 복공판 철거 : 194 m2	-117	• 덕트이전
	구조물공	- 구체콘크리트 타설 : 869 m3	224	• 덕트이전
	포장공	- 중층(#467) : 32.03 a	80
	지장물공	- 지장물 복구 : 1식	41
	기 타 공	- 가설공 및 덕트이전 설계비 : 1식	424	• 현장정리 및 청소 • 중앙분리대 설치
	광역상수도 이설공사	- 복구공사 : 1식	617	• 수자원공사 위탁
기타 공사	건축공사	- 석공사, 내·외부E/V공사 등 : 1식	800
	기계공사	- 승강설비공사, 본선환기설비공사 등 : 1식	631
제 잡 비		- 4대보험료 및 일반관리비 외	405
물가변동(ES)		- 1회〜4회	228
합 계			3,387

바. 기성내용 적정성 검토

① 기성부분내역이 설계도서대로 시공되었는지 여부               : 적  정

② 사용 자재의 규격 및 품질에 대한 시험의 실시 여부            : 적  정

③ 사급자재의 수불 상태                                        : 적  정

④ 주요 시공과정을 촬영한 사진 확인                            : 적  정

⑤ 품질시험∙검사 성과 총괄표 내용                              : 적  정

⑥ 산업안전보건관리비 사용 내역 적정 여부                      : 적  정

■ 검토의견

「지하철9호선 3단계 920공구 건설공사」의 제10차 4회 기성검사원(약식)에 대하여 공사계약 일반조건,책임감리현장참여자업무지침서등을 적용 검토한 결과 기성검사조서와 같이 적정하다고 판단됨.

기성부분(10차 4회) 검사조서

공사명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사(10차)

2018년 12월 31일 준공

2018년 02월 06일 롯데건설(주)외 1개사와 계약분

위 공사 10차4회 기성부분검사의 명을 받아 2018년 08월 27일 검사한 결과   별지 내역서와 같이 10차 공사에 대하여 그 기성공정을 50.65% (전회28.67%, 금회 21.98%)로 조정함.

2018 년 08 월 27 일

기성부분 검사자 : 책 임 감 리 원   이  상  희  (인)

입     회    자 : 공 사 관 리 관   김  용  선  (인)

공 사 관 리 관   이  재  익  (인)

현 장 대 리 인   김  경  용  (인)

붙  임 : 기성부분(10차 4회) 내역서.

서울특별시도시기반시설본부장 귀하

기성검사사진대지

(10차공사 4회)