공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 북악산로825-36 ~ 정릉로38마길26 주변 사각형거 보수보강공사

2. 공사위치 : 북악산로825-36 ~ 정릉로38마길26 구간,

장위로21길45-1 ~ 돌곶이로37길18 구간

3. 목    적 : 정밀안전진단 결과 노후 및 손상상태가 심한 하수사각형거의 물리적․ 기능적 결함에 대하여 보수보강을 실시하여 내구성 및 구조적 안전성을 확보하고 재해를 사전에 예방코자함

4. 공사개요

- 사각형거 보수보강 □1.5×1.5~2.0×1.5m, L=345m

- 단면복구(벽체, 천장, 바닥, T=30~50㎜) : 775.3㎡

5. 설계변경조건

다음과 같은 경우에 설계변경 할 수 있다.

가. 물량의 변동이 발생한 때

나. 설계도서와 현장여건이 상이할 때

다. 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

라. 설계변경 조건의 차이가 있을 때에는 발주부서 유권해석에 준한다.

6. 공사기간

본 공사의 기간은 착공일로부터 90일간으로 하고, 다음의 경우 한하여 기간을 연장 할 수 있다.

가. 공사시행 중 천재지변 등으로 인하여 작업이 불가하였을 경우

나. 시행청의 지시에 의거 작업을 중단하였을 경우

다. 지장물의 철거, 이설 등으로 공사진행에 현저한 지장이 일을 경우

라. 주민의 민원발생으로 공사가 중단될 경우

마. 기타 우리구(시행청)의 사정에 의하여 공사기간이 연장되었을 경우

7. 예정공정표

공 종	수량	3월	4월	5월	6월	비고
1.보수공(단면제거)	1식
2.보수공(단면복구)	1식
3.부 대 공	1식

8. 안전조치

가. 계약상대자는 공사 시행으로 인하여 인명 피해나 안전사고의 발생이 우려되는 장소가 있을 때에는 즉시 위험표시 및 적절한 응급조치를 계약상대자 부담으로 하고 발주청에 보고하여야 하며, 안전사고로 인한 민ㆍ형사 사건 등이 발생할 경우에는 관련되는 모든 책임을 진다.

나. 공사에 필요한 보안조치는 관계법규에 따라 만전을 기하고 필요한 제반시설을 갖추어야 한다.

다. 공사시공 중에는 인접해 있는 기존구조물 또는 교통시설물 등에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호 시설을 설치하여야 한다.

라. 토지의 붕괴, 낙반, 가설물이나 건축물의 파손 등 기타 공정 계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를 일으켰을 때, 혹은 그러한 사고발생의 우려가 있는 사항을 발견하였을 때에는 즉시 응급조치를 취하고 발주청에 보고하여야 한다.

마. 단면보수 및 바닥 콘크리트 타설 등 공사 시행시 시멘트 물, 화학약품 등이 하천으로 직접 유입되지 않도록 분류하수관로로 물돌리기 등 현장관리에 만전을 기하여야 한다.

9. 현장근로자 실명제 시행

당 공사현장 근로자에게는 소속 회사명과 이름이 새겨진 안전조끼 및 안전장구를 착용토록 하여 근로자의 안전을 보호하고, 책임감 있고 친절한 언행으로 구민고객 중심의 공사실행으로 구정에 대한 신뢰성 향상을 위하여 건설현장 근로자 실명제를 의무적으로 시행하여야 한다.

10. 기타사항

가. 본 공사의 설계물량은 현장 여건 및 공사 진행 상황에 따라 증ㆍ감 될 수 있다.

나. 하수관거 정비공사 품질관리자(품질관리자가 없는 경우 현장 참여기술자중 1인) 및 기능공(하수관거 부설 배관공) 전원은 한국상하수도협회에서 시행하는 하수관거 정비공사 시공 전문기술 교육과정을 이수하여야 하며, 착공시 이수증 사본을 제출하고 공사 시행시 이수증을 소지하여야 한다.

다. 단, 교육기관 일정 등으로 착공전 교육이수가 불가능한 경우 교육이수 계획서를 제출하고 공사를 시행하여야 하며, 착공 후 3개월 이내에 교육을 이수하여야 한다.