발  주  개  요

1. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 (10차)

2. 공사개요

총 괄	기발주(1～9차)	금회발주(10차)	장 래
○ 총물량 토 공 : 333,920㎥ 구조물 : 54,465㎥ 굴 진 : 1,862ｍ 세그먼트 : 1,250링 - 본선(개착) 토 공 : 79,575㎥ 구조물 : 7,366㎥ - 본선(터널) 굴 진 : 1,862ｍ 세그먼트 : 1,250링 - 정거장 토 공 : 144,940㎥ 구조물 : 28,269㎥ - 환기구 토 공 : 109,405㎥ 구조물 : 18,830㎥ ○ 부대시설 - 출입구 : 4개소 - 환기구 : 4개소 ○ 기타공사 - 건축,전기,기계공사 : 1식	○ 총물량 토 공 : 333,920㎥ 구조물 : 52,650㎥ 굴 진 : 1,862ｍ 세그먼트 : 1,250링 - 본선(개착) 토 공 : 79,575㎥ 구조물 : 7,366㎥ - 본선(터널) 굴 진 : 1,862ｍ 세그먼트 : 1,250링 - 정거장 토 공 : 144,940㎥ 구조물 : 26,874㎥ - 환기구 토 공 : 109,405㎥ 구조물 : 18,410㎥ ○ 부대시설 - 출입구 : 2개소 - 환기구 : 2개소 ○ 기타공사 - 건축,전기,기계공사 : 1식	○ 총물량 토 공 : - ㎥ 구조물 : 1,815㎥ 굴 진 : - ｍ 세그먼트 : - 링 - 본선(개착) 토 공 : - ㎥ 구조물 : - ㎥ - 본선(터널) 굴 진 : - ｍ 세그먼트 : - 링 - 정거장 토 공 : ㎥ 구조물 : 1,395㎥ - 환기구 토 공 : - ㎥ 구조물 : 420㎥ ○ 부대시설 - 출입구 : 2 개소 - 환기구 : 2 개소 ○ 기타공사 - 건축,전기,기계공사 : 1식	○ 총물량 토 공 : - ㎥ 구조물 : - ㎥ 굴 진 : - ｍ 세그먼트 : - 링 - 본선(개착) 토 공 : - ㎥ 구조물 : - ㎥ - 본선(터널) 굴 진 : - ｍ 세그먼트 : - 링 - 정거장 토 공 : - ㎥ 구조물 : - ㎥ - 환기구 토 공 : - ㎥ 구조물 : - ㎥ ○ 부대시설 - 출입구 : - 개소 - 환기구 : - 개소 ○ 기타공사 - 건축,전기,기계공사 : -식

3. 공사비 현황                                                        (금액단위 : 천원, 영세율)

구 분		총 괄	도 급 비	기 타
총 괄		159,474,424	159,474,424	-
기발주	소 계	145,837,200	145,837,200	-
	1차	12,200,000	12,200,000	-
	2차	2,300,000	2,300,000	-
	3차	4,500,000	4,500,000	-
	4차	15,291,200	15,291,200	-
	5차	24,054,000	24,054,000	-
	6차	25,800,000	25,800,000	-
	7차	23,500,000	23,500,000	-
	8차	13,380,000	13,380,000	-
	9차	24,812,000	24,812,000
금 회(10차)		13,637,224	13,637,224	-
장 래		-	-	-

4. 계약자

- 롯데건설(주) 대표 하석주, 두산건설(주) 대표 이병화 공동도급

5. 공사기간

- 총  괄 : 2009. 12. 31. ～ 2018. 12. 31.

- 금  회 : 계약일 ～ 2018. 12. 31.

공사비 집행계획

1. 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 (10차)

2. 공사개요

총연장 : 1,390.5m		본 선(개착) : 118.9m
		본 선(터널) : 934.5m
		정거장(개착): 187.5m
		환기구(개착): 149.6m

3. 사업비 현황

(금액단위 : 천원, 영세율)

총사업비	도 급 비			비고
	소 계	순공사비	기 타
159,474,424	159,474,424	159,474,424	-

4. 사업비 집행계획

(금액단위 : 천원, 영세율)

예 산 액	기집행액	금회집행	향후집행액	비 고
159,474,424	145,837,200	13,637,224	-

5. 설계 및 담당자

구 분	소 속	직 명	성 명	비 고
설 계 자	벽산엔지니어링(주)	책임감리원	이 상 희
심 사 자	벽산엔지니어링(주)	기술지원감리원	최 성 규
확 인 자	벽산엔지니어링(주)	대 표 이 사	김 동 운
공사 관리관	도시기반시설본부 (도시철도 토목부)	지방시설주사(토목)	김 용 선
	도시기반시설본부 (도시철도 건축부)	지방시설주사(건축)	김 영 준
	도시기반시설본부 (도시철도 설비부)	지방공업주사보(기계)	박 명 기
		지방공업주사보(전기)	박 지 영

6. 기성지급 기준 : 매월 1회

7. 하자담보 책임기간 및 보증금율

○ 최종차수 준공검사일로부터 10년간

○ 총 공사 부기금액의 5%

8. 공사계약방법 : 장기계속공사

9. 기타 사항 : 공동도급 (공동이행방식)