「2023년 제23차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  9.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제23차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 9. 14.(목) 14:30~17:10

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성(서면), 백훈기, 박 준, 안희영, 정현정, 최승각 위원

- 설 계 사: ㈜글로벌메타 문승라 부사장 등

ㅇ 심의결과: 재보고 1건, 조건부 4건

연번	공사명	심의결과
1	봉은교 구간 교통체계 개선공사 (국제교류복합지구 도로개선 사업)	조건부
2	동부간선도로(창동 ~ 상계구간) 지하차도 건설공사 간섭 송전선로 이설 공사	조건부
3	국회대로 도로다이어트 보도정비공사	재보고
4	화랑로 열수송관 설치공사	조건부
5	영동대로 지하공간 복합개발 건설공사	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

□ 안건별 의견

1. 봉은교 구간 교통체계 개선공사(국제교류복합지구 도로개선사업) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 교통량 분석을 재검토해주시기 바람

ㅇ (1-4단계) 교통량을 고려하여 종합운동장 삼거리 내 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (2단계) 교통소통대책 도면 내 공사내용을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2단계) 교통소통대책 도면 내 공사내용을 재검토해주시기 바람

ㅇ (2단계) 작업차량 진·출입시 교통 신호수 추가배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 감안하여, 작업 전 관할경찰서 협의하여 작업시간을 탄력적으로 운영하여 교통정체에 따른 민원을 최소화 해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-4, 2단계) 종합운동장 삼거리 서측 접근로 차로배분 재검토(2차로에서 좌회전도 가능토록)

ㅇ 교통소통대책 도면 내 오타 및 오기를 재검토해주시기 바람

2. 동부간선도로(창동~상계구간) 지하차도 건설공사 간섭 송전선로 이설공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4단계) 창동교 교차로 내 유도선 설치를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (2단계) 교통소통대책 도면 내 공사내용을 재검토해주시기 바람

ㅇ (2단계) 작업차량 진·출입시 교통 신호수 추가배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1단계)마들로 11길 좌회전 차로 수 조정으로 보행동선을 확보해주시기 바람

ㅇ (1, 3단계) 1단계와 3단계 통합을 검토해주시기 바람

ㅇ 해당 공사의 공사기간을 고려하여 공사 중 모니터링을 실시하여 그 결과를 교통운영과에 보고해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 마들로 창동교 구간은 교통량이 많아 교통 혼잡 및 정체가 예상 되므로 주간 1개차로 점용, 야간 2개차로 통제 등 점용차로 최소화 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ 2개차로 이상 점용하는 당일 굴착, 당일 복구 공사의 경우 야간 시행을 검토해주시기 바람

ㅇ (3, 4단계) 교통처리계획 도면 내 유턴(U-turn) 처리 시 교차로와 이격거리를 감안하여 모범운전사 배치를 검토해주시기 바람

ㅇ 공사기간 정체 발생 등 사전 홍보 대책을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 도봉사거리 내 신호현시와 노면표시 불일치 확인후 재검토 바람

ㅇ (1단계) ①도봉경찰서 협의를 통한 청사내 임시보행통로 개설, ②마들로 도봉경찰서 동측구간 차로 재배분 등을 통한 보행동선 유지방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (3단계)창동교 내 선형을 재검토 바람(접근부 좌회전 용량 증대)

ㅇ (전단계)창동교 교차로 내 정지선 위치를 재검토해주시기 바람

3. 국회대로 도로다이어트 보도정비 공사 - 재보고

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 보고서 보완 후 교통소통대책위원회 재보고해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 범례와 도면 내용을 일치시켜주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사내용과 그에 필요한 공사기간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사로 인한 차로운영계획을 제시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사중 차로 점용에 따른 차로 축소 시 도로선형을 고려하여 차로 운영계획을 수립하여주시기 바람

ㅇ 공사 중 차로 조정 시 중앙선 주변에 설치된 안전지대를 활용하여 차로 운영계획을 검토해주시기 바람

ㅇ 공사 완료 후, 교차로 곡각지 보도 조성 시 차량 회전 반경을 고려하여 교통처리계획을 검토해주시기 바람

ㅇ 야간공사를 고려하여 표지판 등 발광형으로 설치해주시기 바람

ㅇ 공사 기간 중 정체 발생 등에 대비하여 사전홍보계획을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 각 단계별 공사일정과 공사중 소통대책을 구체적으로 제시하고, 공사중 교통소통대책과 무관한 시설이나 동선 등은 소통대책 작성시  최소화하여 원활한 검토가 이루어질 수 있도록 재작성 바람

ㅇ 각 단계 공사시 공사로 인한 교통정체나 보행자 통행불편을 최소화할 수 있는 방안을 포함하여 교통소통대책을 작성하여 주시기 바람

4. 화랑로 열수송관 설치공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1 ~ 7단계) 교통량을 고려하여 태릉입구역 교차로 인근 점용 공사 시, 공사시간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1단계) 가로변 버스전용차로 운영과 연계하여 노면표지를 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (13단계) 교차로 내 공사로 인한 사고 예방을 위하여 교통통제수 배치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 관할 경찰서와 협의하여, 가로변 버스전용차로 부분해제를 검토해주시기 바람

ㅇ (3,4,5,6단계) 원활한 차량 통행을 위하여 공정을 고려하여 공사 단계를 세분화 해주시기 바람

ㅇ (13단계) 14단계와 연계하여 교통처리계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (22단계) 회전차량의 운행 동선을 감안하여 점용구간 가각정리를 시행해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (4단계) 점용구간을 고려하여 동일로 내 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (20단계) 교통소통대책 도면 내 공정 일수에 맞춰 공사 구간을 표시해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 당일 굴착 당일 복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치여부를 명확하게 표현해주시기 바람

ㅇ 야간 공사로 사고 예방 및 공사구간 인지를 위해 사인보드카 설치를 검토해주시기 바람

ㅇ 교차로 내 공사 시 회전반경 확보 및 공사구간의 교차지점 사고예방을 위한 안전대책을 수립하여 주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (5단계) 완화구간 설치 시, 합류 방향을 편측으로 설치해주시기 바람

ㅇ (27단계) 보도부 임시보행로를 확보하여 주시기 바람

ㅇ 주간시간대 차로점용 구간에 대해서는 공사중 가로변 버스전용차로 임시해제 방안에 대해 경찰과 협의하여 주시기 바람

5. 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (26단계) 삼성역 교차로 내 회전 차량들의 동선을 감안하여 점용구간 가각정리를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (24단계) 보행통로 폭을 재검토하여 삼성역 교차로 내 선형을 재검토해주시기 바람

ㅇ (24-1단계) 영동대로 내 차로 수 조정을 통해 교차로 내 선형을 재검토해주시기 바람

ㅇ (26단계) 삼성역 교차로 내 보행량을 감안하여 글라스타워 앞 임시보행로 폭 및 횡단보도 폭을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (24단계) 삼성역 교차로 내 하수박스 이설공사(작업구) 일정을 감안하여 차로 운영계획 및 선형 변경 가능 여부 검토바람

ㅇ (27단계) 보도부 임시보행로를 확보하여 주시기 바람