「2023년 제27차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

2023.  10.

도시교통실

(교통운영과)

「2023년 제27차 도로점용공사장」

교통소통대책 자문위원회 회의록

□ 회의개요

ㅇ 일  시: 2023. 10. 26.(목) 14:30~17:00

ㅇ 장  소: 교통운영과 6층 회의실

ㅇ 참석자

- 자문위원: 교통운영과장, 김대성, 이경아, 김봉찬, 강희범, 백훈기, 김정환 위원

- 용 역 사: 동일기술공사 임법균 이사 등

- 발 주 처: 서울시설공단 김현주 등

ㅇ 심의결과: 4건(조건부 4건)

연번	공사명	심의결과
1	자동차전용도로 방음터널 방음판 교체공사	조건부
2	보광배수지 환경개선공사	조건부
3	2022년 강남지사 추가 및 개선공사(동호대교 남단 하부)	조건부
4	영동대로 지하공간 복합개발 건설공사(서면자문)	조건부

□ 공통 의견

ㅇ 야간 공사시에는 통제수 및 작업자 안전을 위해 각 단계별 점용 시점부에는 인력통제수 배치를 지양하고 로봇 신호수. 사인보드카(진행방향 LED 표시등) 설치 등을 검토하시기 바람

ㅇ 당일 굴착 당일복구 공사의 경우, 임시 노면표시 설치 여부를 명확하게 표현하여 제시하시기 바람

ㅇ 당일 굴착·복구 공사의 경우 되메우기, 다짐(층다짐)을 철저히 시행하여, 도로 임시 개방 시 지반 침하로 인한 교통장애가 발생하지 않도록 하고, 공사완료 후 본 포장계획을 포장담당기관 협의후 보완보고서에 포함하여 제출

ㅇ 현장굴착 작업시 지하매설물로 인한 공사지연이 발생하지 않도록 사전 지하매설물 조사를 철저히 이행바람

ㅇ 교차로 구간 공사시행시에는 법적으로 수신호 권한이 있는 모범운전자를 배치 바람.

ㅇ 각 단계별 주요공정 내용 및 소통관련 특이사항(특정방향 통행폐쇄, 교행통행 등)과 굴착 단면도를 보고서 및 소통대책 도면에 명시 바람

ㅇ 전체 공사단계 진행계획표(Time Table)을 보고서에 제시바람

ㅇ 동일구간에 대한 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 바탕으로 변경된 내용을 추가하여 작성 바람

ㅇ 공사시간대와 도로점용시간대가 일치하지 않은 경우 보고서 및 도면에 표현하고 교통영향 분석시 오전,오후 첨두시와 공사시간대 첨두시를 구분하여 실시

ㅇ 교통소통대책 보고서에 용역 계약서를 첨부 바람

□ 안건별 의견

1. 자동차전용도로 방음터널 방음판 교체공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (금하, 2-1 ~ ) 금하치하차도 교통처리계획 중 교통섬을 활용한 차로운영 계획은 직진차량 및 우회전 차량의 상충 등을 고려하여 재검토해주시기 바람

ㅇ (금하, 3-5단계) 우회전 차량동선을 고려하여 가각정리 등을 검토해주시기 바람

ㅇ (상도지하차도) 교통량을 고려하여 점용시간을 탄력적으로 운영하는 방안을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 고려하여 공사시간을 23시 이후로 변경해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 단계별 점용에 대한 상세도를 제시해주시기 바람

ㅇ 교통소통대책 도면 내 상세도에 대한 완화구간 길이를 현실에 맞게 재검토해주시기 바람

ㅇ (금하, 1-1단계) 점용에 따른 완화구간 방향을 재검토해주시고 하안지하차도 방면 도로의 차로 운영현황을 제시해주시기 바람

ㅇ (금하, 3-3단계) 통행속도를 고려하여 완화구간 길이를 재검토해주시기 바람

ㅇ (금하, 3-5, 8단계) 우회전 도류화를 활용하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 완화구간 설치를 직선부까지 연장하는 방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (금하, 1-1, 2단계) 지하차도 공사 이후 차단을 유지할 경우 이후 단계의 교통소통대책 도면 내 해당 내용을 표시해주시기 바람

ㅇ (금하, 2-1, 8단계) 하안지하차도 측 접근로 현행유지를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 금하지하차도 통제에 따른 홍보계획을 수립해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (상도지하차도) 완화구간 설치를 직선부까지 연장하는 방안을 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 점용기간을 고려하여 교통소통대책 보고서를 수정해주시기 바람

ㅇ 측방여유폭을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (금하지하차도) 동일차로를 점용하는 공사단계의 경우 시민불편을 최소화하기 위해 작업조 추가 투입 및 동시작업 시행을 통한 공사기간 단축방안을 검토해주시기 바람

ㅇ (상도·수락지하차도) 방향별 교통량을 고려하여 점용시간을 탄력적으로 운영할 수 있도록 교통소통대책을 검토해주시기 바람

ㅇ (수락지하차도) 관련계획(동부간선도로 노원교 진출램프 설치공사 등)을 고려하여 교통소통대책을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 교통안내표지판 예시도를 재검토해주시기 바람

2. 보광배수지 환경개선공사 - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 기존 안전지대 활용 및 측방여유폭을 감안하여 차량 운행 최소폭(3.0m)가 확보될 수 있도록 교통소통대책 도면을 재검토해주시기 바라며 안전시설물 설치도 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 안전한 공사시행을 위한 최소 작업공간 확보를 위해 공사 단계 세분화를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 공사시행에 따른 터널 내 공사안내표지판 추가 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통량을 감안하여 공사시간 변경을 검토해주시기 바람

3. 2022년 강남지사 열수송관 공사(동호대교 남단) - 조건부

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (1-2단계) 차량 유도계획을 추가로 제시해주시기 바람

ㅇ (3-1단계) 논현로 내 점용구간을 삭제하고 차로 운영계획 변경(직진 → 직우)을 검토해주시기 바람

ㅇ (4-2단계) 공사 점용 구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (5-2단계) 차로 운영계획을 사전에 운전자들이 인지할 수 있도록 올림픽대로 내 안내 표지판 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 실제 공사에 필요한 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (6-1단계) 방향별 교통량을 고려하여 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (7-2단계) 점용공간 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (3-2단계) 도로 점용에 따른 차로운영계획을 재검토해주시기 바람(좌회전, 직진 → 직·좌)

ㅇ (4-1단계) 전(前) 단계와 통일성 있게 차로운영계획을 재검토해주시기 바람

ㅇ (5-1, 2단계) 차로운영계획을 고려하여 점용구간을 재검토해주시기 바람

ㅇ (6-1단계) 보행량 등을 고려하여 안전한 차량 통행을 위하여 임시횡단보도 설치 및 점용구간을 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교차로 점멸 운영 시 올림픽대로 램프 내 속도저감시설 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ (5-1 ~ 6-1단계) 올림픽대로 램프에서 진입 차량들의 안전한 통행을 위하여 램프 내 속도 저감시설 설치를 검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교차로 교행 통행 시 점멸신호 운영을 검토해주시기 바람

ㅇ 교차로 구간 공사시작 시간을 23시 이후로 재검토해주시기 바람

<ㅇㅇㅇ 위원>

ㅇ 교통소통대책 도면 내 공사안내표지판을 재검토해주시기 바람

4. 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 - 조건부

[서면자문]