휴일 및 야간작업계획 검토

공 사 명	서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사
검 토 건 명	2014년 1월 1주차 휴일 및 야간작업계획 검토보고
검 토 일 자	2014. 1. 2.
관 련 문 서	롯건서지현 제2014-1호(2014.1.2)
작 성 자	보조감리원 이 상 희 (인)	확 인 자	책임감리원 서 경 석(인)
□ 검토 목적 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 중 계획공정율 달성 및 원활한 공정추진을 위하여 시공사에서 제출된 휴일 및 야간작업계획서에 대한 근무계획을 수립하여 공정 관리에 철저를 기하고자 함. □ 검토 내용 1. 사업개요 ○ 총 연 장 : 1,390.5m - 본 선 : 1,053.4m (개착 : 118.9m, 쉴드터널 : 934.5m) - 정 거 장 : 1개소(187.5m, 승강장기준 165m) - 환 기 구 : 4개소(149.6m) ○ 공 사 비 : 153,218백만원 (5차:24,054백만원) ○ 공사기간 : 2009. 12. 31 ~ 2015. 12. 29(전체) - 5차 : 2013.02.27~ 2014. 01.20 ○ 시공회사 : 롯데건설(주)외 1개사 ○ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주)외 3개사 2. 관련근거 ○ 공사계약 일반조건 제18조(휴일 및 야간작업) ○ 입찰안내서 제3장 계약조건(일괄입찰등의 공사계약특수조건) 제19조(휴일 및 야간작업) ○ 입찰안내서 제3장 계약조건(지하철9호선 3단계 일괄공사계약 특수조건) 제 46조(휴일 및 야간작업) ※ 계약담당 공무원의 승인 없이 휴일 또는 야간작업을 할 수 없다. ○ 책임감리용역 입찰안내서 제6장 과업내용서(휴일 및 야간작업에 대한 감리대가 지급) “야간작업시 기 계약된 감리원수 범위내에서 인원 및 기간조정 근무”

4. 휴일 및 야간작업사항 및 근무자(시공사, 감리단) 명단

구분	근무 일자	휴일 및 야간작업내용		근무 시간	근 무 자
		작업구간	작업내용		시공사	감리단
휴일 및 야간 작업	1/4(토)	터널 개착구간	- 도달부 및 발진부 갱문설치 - 토공굴착 - 띠장 및 버팀보 설치 - UPRS 레일설치 및 강관추진	09:00 ~18:00	안전: 장판상 품질: 이은구 공사: 김기성 진영민 공무: 전태중 정구진	서경석 이강선
	1/5(일)	터널 개착구간	- 도달부 및 발진부 갱문설치 - 토공굴착 - 띠장 및 버팀보 설치 - UPRS 레일설치 및 강관추진	09:00 ~18:00	안전: 최종식 품질: 이은구 공사: 김기성 진영민 공무: 최종권 이재선	김용택 이상희
	1/6(월)	터널 개착구간	- 쉴드TBM 갱문설치 - 연암 깨기, 집토 - UPRS 레일설치 및 강관추진	19:00 ~21:00	정정우	이상희
	1/7(화)				진영민	김용택
	1/8(수)				김기성	이강선
	1/9(목)				정정우	이상희
	1/10(금)				진영민	김용택

□ 검토 의견

○ 현재 진행 중인 작업의 연속성 확보 및 원활한 공정 추진을 위한 시공사의 휴일 및       야간작업 시행에 따라 감리원이 휴일 및 야간근무를 시행함이 타당하며,

○ 휴일 및 야간작업 시행으로 공사 관리의 공백이 발생치 않도록 평일과 동일하게 공       사 관리 예정임.

○ 입찰안내서 제3장 계약조건(일괄입찰등의 공사계약특수조건)제19조 및 제3장 지하철

9호선 3단계 일괄공사계약 특수조건(휴일 및 야간작업)에 의거 휴일 및 야간작업으로        인하여 발생되는 추가비용은 협의후 시공사가 부담키로 함.  끝