용   역   명

서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역(총괄 및 8차)

기술검토건명

감리용역 총괄(12회) 및 8차(3회) 계약금액 조정요청

검 토  기 간

2018.06.04.

작   성   자

책임감리원 이상희(인)

확 인 자

책임감리원 이상희 (인)

1. 현 황

지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역 수행중, 서울시도시기반시설본부와 한국수자원공사가 협약체결한“수도권 광역상수도 2단계 방이동 구간 관로이설공사”의 공사기간 연장에 따라 전면책임감리용역 계약금액 조정

2. 용 역 개 요.

○ 용 역 명: 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역

(총괄 및 8차)

○ 계약금액 : 총괄 5,720,953천원, 8차 1,853,353천원

○ 용역내용 : 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리

○ 감 리 자 : 벽산엔지니어링(주) 대표이사 김 동 운

구 분	총괄	기시행 (1차∼7차)	8차 (금회)	비 고
계약금액	5,720,953	3,867,600	1,853,353
용역기간	‵09.11.18∼ ‵18.12.31	‵09.11.18∼ ‵16.12.31	‵17.01.02∼ ‵18.12.31
투입인월	477	335	142

○ 계약 및 집행현황                                           (단위:천원)

3. 검토내용

가. 설계변경 사유

1) 서울시도시기반시설본부와 한국수자원공사가 협약체결한“수도권 광역상수도 2단계 방이동구간 관로이설공사”의 공사기간 연장에 따라 도시기반시설본부-18-3875(2018.04.19)호 및 팔당권지사-1946(2018.04.19)호에  의거 서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역의 총괄 및 8차계약금액을 조정코자 함

구분	계약금액			용약기간			비고
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
총괄(12회)	5,720,953	5,773,155	52,202	‵09.11.18∼ ‵18.12.31	‵09.11.18∼ ‵18.12.31	-
8차(3회)	1,853,353	1,905,555	52,202	‵17.01.02∼ ‵18.12.31	‵17.01.02∼ ‵18.12.31	-

나. 용역계약 설계변경 현황                                     (단위:천원)

다. 설계변경 내용

1) 총괄 12회

한국수자원공사“광역상수도 이설공사 설계변경 보완사항 의견회신”(팔당권지사-1946,2018.04.17)호 문서 중, 수도권 광역상수도 2단계 방이동구간 관로이설공사 설계변경 검토서의 감리비 증가분 52,202천원을 총괄금액에 반영하여 공사기간연장 3개월간 감리사가 근무토록 함(당초8개월→11개월)

2) 8차(3회)

구분	투입기간			용역금액			비고
	당초	변경	증감	당초	변경	증감
토목	‘17.01.02∼ ‘18.12.31	‘17.01.02∼ ‘18.12.31	-	1,853,353	1,905,555	52,202	상수도 금액포함
건축
기계
전기
상수도	‘17.06.01∼’18.01.31	‘17.06.01∼’18.04.30	3개월	136,796	188,998	52,202	8차내역에포함

- 8차 감리용역기간이 당초‘17.06.01∼’18.01.31.이나 광역상수도 관로이설공사의 공사기간이 연장되어, 연장기간인 3개월간 감리사 추가투입에 따른 감리비 증가분 52백만원을 8차 용역금액에 반영 함

4. 검토의견

-“서울지하철 9호선 3단계 920공구 건설공사 전면책임감리용역”의 시행 중, 도시반시설본부와 한국수자원공사와 협약체결 한“수도권광역상수도 2단계 방이동 구간 관로이설공사“의 공사기간연장에 따라, 발생하는 상수도 감리용역대가의 증가금액인 52,202천원을 총괄 및 8차 감리용역에 반영할 필요가 있습니다.

- 이에, 총괄12회 및 8차 3회 설계변경을 실시하여, 감리비 증액분을 내역에 추가하여 설계변경 하는 것이 적정하므로 설계변경서를 제출하오니 승인하여 주시기 바랍니다.  끝.

검 토 의 견 서