<서식 2>

2016 회계연도 사고이월 명세표

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(분임)재무관 : 직 생산부장    성명 구자훈 (인)

사업주관   과장 : 직 시설5급    성명 한희선 (인)

작     성    자 : 직 시설7급    성명 신왕근 (인)

(단위 : 천원)

사 업 명 (사업코드)	2016 회계연도 예산					지 출 원 인 행 위 (2016.12.31 기준)			지 출 액 (2016.12.31 기준)		2016 회계연도 이월예산				불용액	이 월 사 유	예산편성별 (당초․추경)
	과목코드	목 (세목)	예산현액	배정액	배정 월일	월일	금 액	준 공 예정일	월일	금액	과목코드	목 (세목)	이월액	준 공 예 정 연월일
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량 (12103)	23401	시설비및부대비(시설비)	7,065,607	5,885,813	’16.01.	’16.03 ~ ’16.12	5,600,656	’17.06.30	’16.05. ~ ’16.12.	3,068,043	234-401	시설비및부대비(시설비)	755,192	’17.06.30	1,464,951	토목·기계 공사 실시 중 유관기관과의 협의지연, 지하장애물 발생, 자재수급 불균형 등으로 인하여 토목·기계 공사 준공기한이 연기됨 - 토목·기계공사와 동시 또는 추후로 진행되는 공사 및 용역의 준공기간을 연기하고 준공기간에 맞추어 예산 이월

※ 1. 이월액은 원인행위 필‧미필금액을 구분하고, 국고보조금 이월액은 (   )로 별도 명기할 것.

2. 지출원인행위와 지출액이 수회에 걸쳐 이루어진 경우 최초～최종월일 기재하고, 지출금액은 총금액으로 기재

3. 이월사유란에는 당해사업 이월사유와 함께 미필이월 요지를 함께 명시할 것.

4. 사업코드는 5자리(예 : 노후 상수도관(송배수관) 정비 21102) 표기하고 목(세목)명은 예산과목 란에는 ’15년 목(세목)명, 이월예산 란에는 ’16년 목(세목)명 기재