설계변경자문회의(소위원회)결과(제8차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			신월지하차도 평면화공사										심의안건		① 저류조활용을 위한 지하차도 내부 보수·보강
공 사 개 요			공사규모				○ 평면화공사, B=30m L=200m(지하차도 폐쇄, 폭2차로 L=182m) ○ 하수암거(□1.6×1.5)설치, L=130m
			공사기간				2014. 01. 06 ~ 2014. 08. 29
			감 리 사				서울시시설관리공단(공사감독1처)
			설 계 사				㈜제일엔지니어링종합건축사 사무소
			시 공 사				홍문종합건설(주) 대표 김장수
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 100,300천원
설계변경 사유(요약) ○ 지하차도 내부 저류조 활용에 따라, 구조물에 대한 보수·보강으로 구조물의 내구수명 연장
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 지하차도 내부 보수․보강 단면 및 최소 피복을 심의자료로는 확인할 수 없으므로 보완하고, 면보수 등 물량은 재 확인후 설계변경시 정산을 철저히 할 것 ○ 지하차도는 폐쇄 구조물이므로 타일철거는 불필요한 것으로 보임, 타당한 사유가 있다면 근거를 보완하고, 타당한 사유가 없다면 재검토해 볼 것 ○ 신규일위대가 중 콘크리트균열보수(10호표) 공구손료(노무비의 3%)는 직접노무비만 적용하도록 조정할 것 ○ 단가산출서 기초단가 적용시기가 서로 상이하니 통일되도록 할 것 → 노임,중기단가(2013년 하반기), 자재단가(2014년 5월) ○ 신규일위대가 중 콘크리트 열화단면제거(11호표) 착암공 노무비 적용이 잘못되어 있으니 확인 후 수정할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원

설계변경자문회의(소회의)결과(제8차)

【2014. 8. 29(금)】

문서요청부서			토 목 부					담 당 자			이병환					요청일자			2014. 8
공 사 명			신월지하차도 평면화공사										심의안건		② 저류조활용을 위한 케미컬앵커 시공비 반영
공 사 개 요			공사규모				○ 평면화공사, B=30m L=200m(지하차도 폐쇄, 폭2차로 L=182m) ○ 하수암거(□1.6×1.5)설치, L=130m
			공사기간				2014. 01. 06 ~ 2014. 08. 29
			감 리 사				서울시시설관리공단(공사감독1처)
			설 계 사				㈜제일엔지니어링종합건축사 사무소
			시 공 사				홍문종합건설(주) 대표 김장수
자문요청사유							3,000만원 이상 변경사항							자문요청금액				증 102,000천원
설계변경 사유(요약) ○ 지하차도 내부 저류조 활용에 따라, 구조물에 대한 보수·보강으로 구조물의 내구수명 연장
원설계자 의견(요약)
자문결과		조건부가결			○ 케미컬앵커 규격이 서로 상이하니 통일되도록 할 것 → 내역서, 일위대가, 자재단가 등 재확인 후 수정할 것 ○ 단가산출서 기초단가 적용시기가 서로 상이하니 통일되도록 할 것 → 노임,중기단가(2013년 하반기), 자재단가(2014년 5월) ○ 케미컬앵커 수량을 확인할 수 있도록 도면 등 보완하고 설계변경시 정산을 철저히 할 것 ○ 자재단가(p16)에 대한 근거자료가 누락되어 있으니 보완할 것
자문결과 조치					자문결과를 관련부서에 통보
	이상의 내용과 같이 결정하였기 이에 서명함.
	위 원 장											간 사
	위 원											위 원
	위 원											위 원