【서식2】

한류공연관광 콤플렉스 건립 계획서

□ 사업목적

○ 한강, 홍대, 신촌지역과 연계 대표적인 문화, 관광 클러스터를 구축하여 아시아의 대표적인 공연문화관광 거점으로 조성

○ 외래관광객 1700만 시대를 맞아 테마관광으로서 넌버벌 공연   전용 컴플렉스를 설립하여 부가가치 창출

○ 한류에 대한 해외수요 증가에 부응하고, 한류 확산, 일자리 창출 등 문화관광 거점 구축

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울 마포구 마포대로 1길 9

○ 규    모 : 대지면적 6,500㎡, 연면적 11,778㎡(지상5층)

○ 사업기간 : 2019. 7.~ 2024.12.

○ 총사업비 : 71,353백만원(국비 35,677, 시비 17,838 , 구비 17,838)

□ 추진일정

사업 단계		건립계획수립		중앙투자 심사 승인		설계공모		기본 및 실시설계		공사		준공
계획		’16.12월		’19.11월		’20. 12월		’21.3월		’22.6월		’24.12월

□ 연도별 투자계획 및 재원조달

(단위:백만원)

구분	총사업비	’20년 까지 기 투입	’21년	‘22년	‘23년	‘24년
계	71,353	3,307	12,513	22,237	25,691	7,605
국비	35,677	1,654	6,257	11,119	12,846	3,803
시비	17,838	827	3,128	5,559	6,423	1,901
구비	17,838	826	3,128	5,559	6,423	1,901

* 실 추진년도만 작성

□ 추진경과

○ 2015. 12. 9. : 예비타당성 조사 대상사업 신청 및 선정(문체부, 기재부)

○ 2019. 11. 1.: 중앙투자심사 승인

○ 2020.  2.11.: 건립 변경계획 수립(대1, 중1, 소2 → 대1, 소2)

○ 2020. 7. 2.: 도시관리계획(유수지, 주차장, 광장, 문화시설) 변경 열람공고(14일)

○ 2020. 11. 4.: 도시관리계획 변경 결정 심의 가결

○ 2020. 12. 2.: 2차 건립 변경 계획 수립

○ 2020. 12. 3. ~ 12. 10.: 설계공모 공고

○ 2021. 2. 18.: 설계공모심사위원회에서 당선작 선정

□ ’21년 사업추진 계획

○ ’21년 사업예산 총괄

(단위:백만원)

계	공사비	설계비	감리비	장비(물품) 교체비	시설부대비	예비비
12,513	9,717		528		22	2,246

* 실 사업항목 기재(항목변경 가능)

○ ’21년 세부예산 내역

(백만원)

구분	예산	산 출 내 역	비 고
공사비	9,717	총공사비의 18%
감리비	528	총 감리비의 18%
시설부대비	22	공사비의 2.3%
예비비	2,246	사업비의 21.9%

□ 기대효과

○ 한류․공연관광 콤플렉스 조성으로 경의선 공원, 당인리 발전소, 홍대/신촌/여의도 및 마포 시내 면세점으로 이어지는 국제적 수준의 공연 중심 문화  관광 클러스터 구축

○ 외래객실태 조사 결과 신촌/홍대 방문 비율이 매년 크게 증가하는 등 한류ㆍ공연관광 콤플렉스 인접 지역으로의 방문이 확대되고 있어 한류에 대한 해외수요 증가에 부응하고 관광수입 극대화 및 일자리 창출 기대

○ 서울시의 ‘여의문화나루기본계획’에 따른 크루즈, 요트, 수상레저시설 및 관련 상업시설 도입과 마포유수지 한류ㆍ공연관광 콤플렉스 연계를 통해 서울의 대표적인 관광지로 개발

○ 해외 관광객과 지역내 유동인구의 증가에도 불구하고, 여의도, 반포,  뚝섬 등 주요 한강 지역에 비해 상대적으로 마포지구 한강공원과 주변지역의 관광 인프라 시설 열악하나 이 부분을 해소하여 한강지역 균형 발전에 기여

□ 향후계획

○ ’21.03. : 설계용역 계약

○ ’21.03. : 설계감리용역 계약

○ ’21.04. : 설계착수보고회, 공공건축가 자문 회의

○ ’21.04. : 소규모 재해영향평가 용역 계약

○ ’21.05. ~ 06 : 경관심의, 유니버설 디자인 심의, 기본설계VE

○ ’21.07. : 설계안전성 검토 용역 계약

○ ’21.10. : 교통영향평가 심의

□ 현황사진 및 위치도

❍ 위 치 도

❍ 현황사진

공영주차장 주출입구	마포대로 1길(사후 면세점)
공영주차장 부출입구	사업부지