				★대리			팀장	공사감독1처장
문서번호		공사감독1처-1322
보존기간		5년		협 조			대리
결재일자		2018.03.15.
공개여부		공개
설계변경(정산)보고(노들로 방음벽 설치공사)
			2018.
						공사감독1처

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
설계변경시 확인사항	●	발주청 제비율 검증프로그램 확인	:	유 ■				무 □
	●	산업안전보건관리비 및 환경보전비 사용내역 확인	:	유 ■				무 □
	●	관급자재 물량 정산	:	유 □				무 ■
	●
		주요자재 수불부 확인	:	유 ■				무 □
	●	설계변경심의 (최종 정산시) 개 최	:	유 ■				무 □
준공검사시 확인사항	●	건강보험료	:	유 □				무 □
	●	연금보험료	:	유 □				무 □
	●	퇴직공제부금	:	유 □				무 □
	●	노인장기요양보험료	:	유 □				무 □
	●	품질시험총괄표 확 인	:	유 □				무 □
	●	매몰부 등 검측대장 확인	:	유 □				무 □
	●	준공성과품 (공사서류,준공사진첩, CCTV 등) CD제작	:	유 □				무 □

Ⅰ		공사현황

가. 공 사 명 : 노들로 방음벽 설치공사

나. 공사기간 : 2017. 10. 20 ~ 2018. 03. 21

다. 도 급 비 : 1,016,753,960원

라. 공사개요

- 방음벽 설치 : H=5~6m, L=268m

마. 도 급 자

- 토목공종 : 두성도시건설 주식회사 대표이사 이정수

- 금속창호공종 : ㈜에스코알티에스 대표이사 조영철

바. 발 주 청 : 남부도로사업소(도로보수과)

Ⅱ		설계변경 현황

가. 변경사유 : 발주처 작업지시, 현장 실정보고 및 실측물량 정산에 따른 증·감 사항

나. 반영내용

1) 발주처 작업지시

- 경찰서 도로공사 야간공사 시행 협의 및 배너·안내간판·현수막 반영, 도로보수과-6243(2017.11.02)

- 파손된 인근 하수관 원상복구 조치, 도로보수과-6606호(2017.11.17)

- 기존 가정하수관 철거로 오수 악취 민원 해결 위한 배수조치, 도로보수과-6684호(2017.11.21)

- 공사 설계변경 및 준공기한 연기(~18.02.28까지) 통보, 도로보수과-7099(2017.12.08)

- 석축구간 방음벽 높이(1.5m)인상 및 지주별 앵커 2개소 추가 설치, 도로보수과-264(2018.01.19)

- 영등포구청에서 요청한 출입문 3개소 설치, 도로보수과-264(2018.01.19)

- 방음벽 기초 앞 개나리‧잔디 식재 및 델리네이터 설치, 도로보수과-626(2018.02.08)

- 방음판 미설치 구간[도로이정표 부분] 방음벽 차양막 설치, 도로보수과-797(2018.02.19)

- 공사완료에 따른 제경비 실정산 반영, 도로보수과-1205(2018.03.12)

2) 현장 실정보고 사항

- 도로보수과-6626호(2017.11.17.) 실정보고 승인통보

‧ [영등포경찰서]야간공사 승인에 따른 공사비 증액 반영

‧ 스파이럴 강관을 일반강관으로 변경, 레미콘 일부 기계비빔으로 변경 반영

‧ 교통소통대책에 따른 추가안내간판, 쏠라LED표지판, 쏠라갈매기 표지판 반영

‧ 지장물 확인을 위해 저촉되는 수목 제거 반영

- 도로보수과-58호(2018.01.04.) 실정보고 승인통보

‧ 방음벽 기초 수량변경 (PC기초 57개 → 63개)

‧ PC원심력 사각 수로관 및 집수정 추가

‧ PE이중벽관 추가설치 및 가정하수관 설치

‧ 폐콘크리트 깨기 추가반영 및 인접건물 조사 용역 추가

‧ 수목 추가 제거, 사토장 변경

- 도로보수과-975(18.02.27.) 실정보고 승인통보

‧ 준공기한 연기 승인(~18.03.21까지) 및 폐콘·폐아스콘 물량변경, 임목폐기물 증가

다. 주요공종 수량 변경(증·감)

공 종	규 격	단위	수 량		증 · 감	비고
			당초	변 경
PC 방음벽 기초(야간)설치	4000×1500×500(Type1), DHP-WALL	ea	53	-	감) 53
투명형방음판(강화접합유리 8.76T)	3460×1000×95T,유지보수형	매	55	10	감) 45
프리캐스트 기초(자재)	PC Type 1,4,000 * 1500 * 500	ea	53	63	증) 10

라. 공사비 변경현황                                                    (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		1,016,753,960	1,033,400,000	증)	16,646,040
도급비	공급가액	924,321,782	939,454,545	증)	15,132,763
	부가가치세	92,432,178	93,945,455	증)	1,513,277
	계	1,016,753,960	1,033,400,000	증)	16,646,040

※ 제비율 검증 프로그램 확인완료

Ⅲ		조치내용

상기 설계변경(정산)사항에 대하여 발주처에 제출코져 함.

따로붙임 : 1. 설계변경 심의의견 및 조치결과서 각 1부.

2. 설계변경(정산) 내역서 및 제비율 검증결과서 각 1부.  끝.