구립 사당종합체육관 건립	【사업부서명 : 생활체육과】
	담당성명	김향민	행정전화	820-1268
【서울시 업무협의 부서 : 자치행정과】	무선전화	*************

	< 요 청 내 용 >
생활체육 활성화를 위해 체육시설 취약지역인 우리구 사당권역에 종합 체육관을 건립하여, 오랜 주민 숙원사업을 해소하고 생활체육의 균형 발전을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 위    치 : 동작구 사당동 산21-9일대 (현충근린공원 내 녹천배드민턴장)

○ 규    모 : 부지 6,583㎡, 연면적 7,102㎡ (지하 1 /지상 2층)

○ 사업내용 : 다목적체육관, 체력단련장, 교육문화실, 주차장 등

층 수	면 적(㎡)	주 요 시 설
지붕층	-	지형복원 및 옥상녹화
지상2층	1,432.89	체력단련장, 교육문화실,부대시설(락카․샤워실 등), 사무실 등
지상1층	3,333.86	다목적체육관(배드민턴장12면․농구장 등), 요가․순환운동실, 교육문화(2)
지하1층	2,335.88	주차장(57대), 발전실, 전기실, 기계실 등

○ 사업기간 : 2008. 10. ~ 2015. 6.

○ 소요예산 : 총 21,911백만원 (설계 468 건축 20,384 감리 1,059)

[단위 : 백만원]

구 분	총사업비	2013년 이전	2014년	2015년이후
계	21,911	14,939 (국기금 971/구 7,468 특별교부세 2,500/ 특 4,000)	2,972 (국기금 972/특별교부세 1,000/특 1,000)	4,000 (구비 2,000/특 2,000)
공 사 비	20,384	13,669	2,972	4,743
설계․감리비등	1,527	1,270	-	257

※ 특별교부금 교부현황 : 총 50억원(’12년 20억, ’13년 20억, ’14년 10억 )

○ 금회 특교 요청액 : 2,000백만원

□ 추진현황

○ 2008. 10. 23 : 구립 사당종합체육관 건립계획 수립

○ 2010. 11 .23 : 서울시 도시공원위원회 심의(조건부)

○ 2011.  4.  1 : 서울시 투자심사위원회 심사(조건부)

○ 2011. 10. 31 : 건설기술심의위원회 심의(조건부)

○ 2013.  6.  4 : 착공식 개최

○ 2014.  6. 20 : 흙막이 및 지하터파기 토목공사 완료

○ 2014. 10. 28 : 서울시 행정과 공사 현장 확인

○ 2015. 1월 현재 : 지붕층 골조 공사 중(공정율 56%)

○ 2015. 6월 : 준공

□ 향후계획

○ 2015. 2월 : 무단 경작지 공원조성과 연계하여 옥상정원 조성

○ 2015. 3월 : 위탁법인 선정 및 체육관 내부 집기 구매

○ 2015. 6월 : 체육관 개관

□ 특별교부금 교부 필요성

○ 사당종합체육관 건립은 2008년부터 추진되어온 주민들의 오랜 숙원사업이며, 현충근린공원 기능의 회복과 주민의 행복한 삶과 건강증진 도모하고자 추진하는 사업으로

○ 어려운 구 재정여건 속에서도 자체 예산 및 국비 확보하여 사업 추진하여 왔으나, 각종 심의사항 이행 등 사업장기화에 따른 물가상승과 예산부족으로 현재 특별교부금외에는 대안이 없는 실정임

○ 사당종합체육관 준공이 2015년 6월말로 예정되어 있어 우리구 최대 현안사업의 성공적 마무리를 위해 서울시 특별교부금 지원이 절실함

□ 위 치 도

건립예정지

총신대입구역

이수역

국립 현충원

남성역

□ 현 장 사 진

□ 조 감 도