설 계 변 경 내 용

1		공 사 현 황

가. 공 사 명 : 2022년 북악산근린공원 조성사업

나. 도 급 액 : 금653,693,130원

다. 공사기간 : 2022. 03. 14 ~ 2022. 09. 09.

라. 발 주 처 : 성북구청 공원녹지과

마. 도 급 자 : ㈜아이포조경건설 대표 박주은

2		설계변경 내용

가. 설계변경 사유

- 발주처 요청사항 및 공사현장실정에 따른 변경

[공원녹지과-9430(2022.05.04.), 공원녹지과-11397(2022.05.30.), 공원녹지과-15572(2022.07.19.)]

구 분	설 계 변 경 내 용	비 고
철거 공사	◼ 현장 내 존치된 임목 및 위험수목 제거 물량 반영 ▸수목제거(B30, 지상부) : 0주 → 10주 ▸수목제거(B40, 지상부) : 0주 → 10주 ▸수목제거(B45, 지상부) : 0주 → 5주 ▸수목제거(B50, 지상부) : 0주 → 5주 ▸수목제거(B60, 지상부) : 0주 → 6주 ▸수목제거(B65, 지상부) : 0주 → 7주	기 승 인 공원녹지과 -11397 (22.05.30)
식재 공사	◼ 데크계획, 사면안정화, 경관향상 등을 고려한 수목식재 계획 변경 ▸ 스트로브잣나무(H3.0xW1.5) :30주 → 0 ▸ 서양측백(에메랄드그린 H2.0) : 0 → 25주 ▸ 산벚나무(H3.0xB6) : 35주 → 15주 ▸ 홍단풍(H3.0xR10) : 0 → 20주 ▸ 이팝나무(H3.5xR12) : 0 → 30주 ▸ 배롱나무(H3.0xR10) : 0 → 10주 ▸ 배롱나무(H3.0xR12) : 0 → 10주 ▸ 산딸나무(H3.5xR12) : 0 → 20주 ▸ 나무수국(H1.0xW0.6) : 1,200주 → 700주 ▸ 병꽃나무(H1.2xW0.4) : 200주 → 0 ▸ 산수국(H0.3xW0.4) : 2,100주 → 1,100주 ▸ 진달래(H0.4xW0.3) : 400주 → 0 ▸ 영산홍(사잇목 ,H0.3xW0.3) : 0 → 212주 ▸ 회양목(사잇목, H0.3xW0.3) : 0 → 212주 ▸ 덜꿩나무(H1.0xW0.4) : 0 → 1,000주 ▸ 낙상홍(H1.0xW0.4) : 0 → 600주 ▸ 꽃무릇(8cm) : 2,900본 → 0 ▸ 노랑꽃창포(8cm) : 200본 → 0 ▸ 맥문동(8cm) : 7,400본 → 5,000본 ▸ 부들(8cm) : 200본 → 0 ▸ 부처꽃(8cm) : 300본 → 0 ▸ 수염풀포니테일(8cm) : 300본 → 0 ▸ 줄사철(8cm) : 7,100본 → 15,000본 ▸ 큰꿩의비름아톰조이(8cm) : 300본 → 0 ▸ 타래붓꽃(8cm) : 400본 → 0 ▸ 노랑국수나무(H0.5) : 0 → 150주 ▸ 붉은국수나무(H0.5) : 0 → 150주 ▸ 왕꽃창포(6치포트) : 0 → 150본 ▸ 식물매트(수크령) : 0 → 150㎡	기 승 인 공원녹지과 -15572 (22.07.19)
시설물 공사	◼ 데크쉼터1 주변 계획 변경으로 인한 시설물 제외 ▸ 육각정자(6000x6000xH3900) : 1개소 → 0	기 승 인 공원녹지과 -9430 (22.05.04)
	◼ 데크계획 변경으로 인한 부속시설물 물량 조정 ▸ 목재난간A(W1500xH1100): 275경간 → 239경간 ▸ 목재난간B(W1500xH500): 53경간 → 35경간 ▸ 목재앉음벽(W400xH450): 16m → 19m ▸ 논슬립(100x75xT2) : 310m → 345m	기 승 인 공원녹지과 -15572 (22.07.19)
	◼ 주택 철거지 주변 안전사고예방을 위한 조경석쌓기, 메쉬휀스 반영 ▸ 조경석쌓기(3단쌓기, 4목) : 0 → 42m ▸ 조경석쌓기(4단쌓기, 4목) : 0 → 17m ▸ 조경석쌓기(6단쌓기, 4목) : 0 → 12m ▸ 메쉬휀스 : 0 → 33경간	기 승 인 공원녹지과 -11397 (22.05.30)
	◼ 벌개제근 시행 후 사면안정화를 위한 녹화공종 반영 ▸ 비탈면보호공 : 0 → 800㎡	기 승 인 공원녹지과 -15572 (22.07.19)
데크 설치 공사	◼ 데크쉼터1 주변계획 및 현장여건을 고려하여 시공수량 조정 ▸ 데크산책로1(W2000, L=141.0m, T30, 말라스) : 1개소 → 0 ▸ 데크산책로2(W2000, L=23.0m, T30, 말라스) : 1개소 → 0 ▸ 데크산책로A(W2000, L=81.0m, T30, 말라스) : 0 → 1개소 ▸ 데크산책로B(W2000, L=45.0m, T30, 말라스) : 0 → 1개소 ▸ 데크산책로C(W2000, L=29.0m, T30, 말라스) : 0 → 1개소 ▸ 데크쉼터1(S=138.0㎡, T30, 말라스) : 1개소 → 0 ▸ 데크쉼터A(S=70.0㎡, T30, 말라스) : 0 → 1개소 ▸ 데크쉼터2(S=74.0㎡, T30, 말라스) : 1개소 → 0 ▸ 데크쉼터B(S=84.0㎡, T30, 말라스) : 0 → 1개소 ▸ 데크쉼터3(S=120.0㎡, T30, 말라스) : 1개소 → 0 ▸ 데크쉼터C(S=114.0㎡, T30, 말라스) : 0 → 1개소	기 승 인 공원녹지과 -15572 (22.07.19)
부대공	◼ 상기 수량 조정으로 인한 물량 조정 ▸기계상차(건폐,혼폐) : 499.52㎥ → 411.81㎥ ▸소운반(L219.7m, 보통인부) : 179,547kg → 171,489kg ▸소운반(L187.57m, 리어카) : 507,180kg → 495,350kg
관급 자재	◼ 상기 변경으로 인한 관급자재 수량 조정 ▸ 육각정자(6000x6000xH3900) : 1개소 → 0 ▸ 논슬립(100x75xT2) : 310m → 345m ▸ 메쉬휀스 : 0 → 33경간 ▸ 꽃무릇(8cm) : 2,900본 → 0 ▸ 노랑꽃창포(8cm) : 200본 → 0 ▸ 맥문동(8cm) : 7,400본 → 5,000본 ▸ 부들(8cm) : 200본 → 0 ▸ 부처꽃(8cm) : 300본 → 0 ▸ 수염풀포니테일(8cm) : 300본 → 0 ▸ 큰꿩의비름아톰조이(8cm) : 300본 → 0 ▸ 타래붓꽃(8cm) : 400본 → 0 ▸ 식물매트(수크령, 340x500xT40) : 0 → 900매 ▸ 유기질비료(20kg/포) : 697포 → 700포 ▸ 토양개량제(20kg/포) : 409포 → 410포 ▸ 목재데크(T30, 말라스) : 930㎡ → 867㎡ ▸ 목재난간A(W1500xH1100) : 275경간 → 239경간 ▸ 목재난간B(W1500xH500) : 53경간 → 35경간 ▸ 난간기둥(100x100x1100) : 0 → 27개

나. 설계변경 내용

3		변 경 금 액

구 분		공 사 비(원)		증, 감	비고
		당 초	변 경
도급액	공급가액	594,266,482	706,302,728	112,036,246
	부가세	59,426,648	70,630,272	11,203,624
	도급비계	653,693,130	776,933,000	123,239,870
관 급 액		223,634,000	209,874,830	-13,759,170
총 공 사 비		877,327,130	986,807,830	109,480,700