【붙임 5】

투자심사사업 관리카드

□ 투자심사 결과

사 업 명	전원장치개량(UPS 및 축전지 개량)					투자심사번호		20170186
사업구분	자체 사업/재심사 사업		예산과목		선로설비		공 종		신호
심사일자	2017.11.00	심사결과(내용)		조건부 추진(***********)

□ 사업계획 및 ‘18년 예산편성 현황

총사업비	기투자	연차별 투자계획(백만원)						▶	‘18년 예산편성
		소 계	’18년	’19년	’20년	’21년	’22년~		금 액 (백만원)	물 량
1,766 (UPS:26 축전지:29)	-	1,766 (UPS:26 축전지:29)	379 (UPS:2 축전지:3)	157 (UPS:1 축전지:2)	23 (축전지:1)	-	1,207 (UPS:23 축전지:23)
									379	UPS:2 축전지:3
									세출:379 채무:0

※ ‘17년 사업비 비율 : 국비(   %), 시비(   %), 자체(100%)

□ 사업추진 상황

구 분	‘18년 분기별 집행내역(백만원)
	계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
집행계획	379	0	189	0	190
집행실적	세출:150	-	150	-	-
	채무:150
추진내용	-	-발주서 작성 (18.03) -계약의뢰(18.04)	-계약공고(18.05) -계약체결(18.05) -선금지급(18.06)	- 제작 및 설치	-설치/준공(18.12)
공정율(%)

※ 집행계획 : 예산편성액 기준, 집행실적 : 조사시점에 실제 지출한 금액 기준

□ 변동사유 및 대책

변동사유	대 책
○ ○	○ ○

※ 계획대비 사업비(재원), 용도(목적), 물량, 완공연도 등 변동사유 발생시 작성

신호사업소	소 장: 000 ☎0000	부 장 : 000 ☎0000	담 당 : 000 ☎0000

□ 사 업 명 : 전원장치개량(UPS 및 축전지 개량)

□ 추진경과

○ (예시) 「전원장치개량 사업 추진 계획」(000처-1234, 2017.00.00.)

-

○

□ 변동사유 및 대책

○ 사업계획 대비 사업비, 용도, 물량, 완공연도 등(사업추진 지연, 보류, 중단) 변동사유와

내용, 사업 추진상의 문제점 및 대책을 기재

○