사업명 : 공영도매시장 시설현대화(가락시장)

중앙관서 총사업비 자율조정 내역서

2018. 04.

농림축산식품부

사업명 : 공영도매시장 시설현대화(가락시장)

1. 사업개요

(단위 : 백만원)

총사업비	749,317	사업기간	2009년 ~ 2021년
사업주체	서울특별시 (서울시농수산식품공사)	사업지역	서울시 송파구 가락동
사업규모	ㅇ 대지 면적 : 531,830㎡ ㅇ 건축 연면적 : 513,159.4㎡

2. 총사업비 변경내용

□ 총괄표

(단위 : 백만원)

구 분	현 행(A)	변경(B)	증감(B-A)	비 고
<총사업비>	749,317	749,308	△9
ㅇ 공사비	703,166	703,157	△9	【공사비 △9백만원】 ▪ 공사비 낙찰차액 : △9백만원 - 2단계 건어제2경매장 철거공사 건설폐기물 처리용역 낙찰차액 : △6백만원(철거비) - 2단계 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역 낙찰차액 : △0백만원(철거비) - 2단계 청과직판(가동) 철거공사 가연성폐기물 처리용역 낙찰차액 : △ 3백만원(철거비)
ㅇ 시설부대경비	46,151	46,151	0	【시설부대경비 0백만원】 ▪ 낙찰차액 : 0백만원 ▪ 준공정산 : 0백만원 ▪ 공사비 조정 연동 시설부대비 조정 : 0백만원
- 설계비	25,829	25,829	0
- 감리비	18,261	18,261	0
- 시설부대비	1,235	1,235	0
- 기타부대비	826	826	0
<자율조정 한도액>	16,641	16,651	10	▪ 자율조정 한도액 추가 설정 : 10백만원

□ 자율조정한도액 외 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

공종별 (내역사업)	자율 조정일	조정액(순증)
		공사비 증감분	보상비 증감분	시설부대경비 증감분
계		△9	-	-
* (A)-①-04 공사비 낙찰차액(공사비)	2018.04	△9	-	-

□ 자율조정한도액 내 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

구 분	내 역
현행 자율조정한도액	총한도액(A)		기집행액(B)	잔여한도액(C)
	16,645		13,525	3,120
금회 자율조정한도액 집행실적	집행일	집행액(D)	세부 반영사유
<집행액 합계>	-	-
없음	-	-
조정 자율조정한도액	기집행액(B+D)		잔여한도액(C-D)
	13,525		3,120

□ 낙찰차액 자율조정

(단위 : 백만원)

공종별1｣ 내역사업)	현행 공사비	최초계약				변경 공사비
		계약일	예산상 공사비 (A)	계약액 (B)	낙찰차액 (B-A)
계	749,317				-9	749,308
<금회계약분>	112		112	103	-9	103
ㅇ 철거비	112		112	103	-9	103
- 2단계 가락시장 건어제2경매장 철거공사 건설폐기물 처리용역	49	18.03.02	49	43	-6	43
- 2단계 가락시장 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역	3	18.03.06	3	3	0	3
- 2단계 가락시장 청과직판(가동) 철거공사 가연성폐기물 처리용역	60	18.03.20	60	57	-3	57
<기계약분>	298,426		0	0	0	298,426
ㅇ 건축비	207,820		0	0	0	207,820
- 1단계 건축공사(총차)	114,559	’11.06.21				114,559
- 1단계 전기공사(총차)	20,242	’11.06.09				20,242
- 1단계 통신공사(총차)	6,409	’11.06.08				6,409
- 2단계 전력케이블공사(2.3단계 전력케이블설치공사)	920	’14.09.17				920
- 1단계 연결통로 및 환기구 이설 전기공사	153	’14.11.17				153
- 1단계 연결통로 및 환기구 이설 통신공사	66	’14.11.14				66
- 1단계 송파대로 불법주정차단속시스템 이설공사	7	’14.11.07				7
- 1단계 중대로 송파구청 가로등 이설 전기공사	2	’15.05.20				2
- 1단계 시설현대화건물 장애인편의시설 보완공사	19	’15.06.15				19
- 1단계 건축관급(환경포함)	33,890	′11.06~′16.06				33,890
- 1단계 기계관급(소방포함)	9,723	′11.06~′16.06				9,723
- 1단계 전기관급	12,340	′11.06~′16.06				12,340
- 1단계 통신관급	9,453	′11.06~′16.06				9,453
- 2단계 전기관급(2.3단계 전력케이블설치공사)	37	’14.10.08				37
ㅇ 토목비	41,117		0	0	0	41,117
- 1단계 토목공사(총차_건축공사에 포함)	27,852	’11.06.21				27,852
- 1단계 연결통로 및 환기구 이설공사(총차)	6,115	’14.06.30				6,115
- 1단계 교통안전시설물 설치공사	51	’16.05.17				51
- 1단계 송파대로 버스정류소 이전(설치)	1	’16.06.17				1
- 1단계 송파대로 버스정류소 이전(이설)	1	’16.06.17				1
- 1단계 차량계근대 CCTV 추가설치	1	’16.09.28				1
- 1단계 지하철연결통로 화장실 칸막이 추가공사(1차)	4	’16.06.22				4
- 1단계 지하철연결통로 화장실 칸막이 추가공사(2차)	12	’16.06.28				12
- 1단계 공공하수도 준설용역	13	’16.07.12				13
- 1단계 차량계근대 설치	14	’16.07.20				14
- 1단계 차량계근대 무인자동 계량시스템 설치	12	’16.08.01				12
- 1단계 가락시장역 정화조 악취저감장치 설치	14	’16.11.24				14
- 1단계 연결통로 차수판 자동차단장치 설치	14	’16.12.01				14
- 1단계 건설폐기물 운반처리용역(총차)	1,641	’11.05.23				1,641
- 1단계 연결통로 및 환기구 건설폐기물 처리용역	149	’14.07.31				149
- 1단계 폐목재 처리비	1	’16.01.27				1
- 1단계 토목관급	5,222	′11.06~′16.06				5,222
ㅇ 조경비	2,591		0	0	0	2,591
- 1단계 조경공사(총차_건축공사에 포함)	2,181	’11.06.21				2,181
- 1단계 조경관급	410	′11.06~′16.06				410
ㅇ 임시건축	2,563		0	0	0	2,563
- 대체매장 건축공사	2,386	’10.09.17				2,386
- 대체매장 전기공사(소방전기)	79	’10.09.30				79
- 임목폐기물처리용역	3	’10.11.05				3
- 건설폐기물처리용역	10	’10.10.15				10
- 석면조사용역	4	’10.09.15				4
- 대체매장방송공사	12	’10.12.01				12
- 대체매장 옥외소화전 이설공사	9	’11.05.20				9
- 건고추매장 환기시설 설치공사	45	’11.07.22				45
- 건고추매장 환기시설 전기공사	15	’11.07.20				15
ㅇ 철거비	2,421		0	0	0	2,421
- 1단계 석면해체.제거공사	82	’10.12.30				82
- 1단계 철거공사	242	’10.12.28				242
- 1단계 서비스동 도시가스 차단공사	26	’11.05.25				26
- 관리금융동 및 공익요원대기실 석면제거공사	13	15.08.12				13
- 관리금융동정보통신(CCTV,주차관제)장비이설공사	19	15.08.06				19
- 관리금융동 구역내 안전휀스 설치	12	15.08.07				12
- 관리금융동 대수선공사(철거부분) 폐기물처리용역	95	16.03.11				95
- 축산물직판장 철거공사	133	16.07.06				133
- 축산물직판장 철거공사 폐기물처리용역	156	16.09.22				156
- 제1주차동외 1개소(축산물직판장) 석면제거공사	11	16.10.12				11
- 제1주차장(직판시장 4개동) 철거공사	479	16.12.06				479
- 제1주차장 철거공사 건설폐기물 처리용역	339	16.12.23				339
- 제1주차장 철거공사 가연성폐기물 처리용역	26	16.12.30				26
- 가공처리장외 1개소(건어제2경매장) 철거공사(해지)	139	16.12.22				139
- 가공처리장외 1개소(건어제2경매장) 철거공사 폐기물 처리용역	233	16.12.27				233
- 가공처리장외 1개소(건어제2경매장) 철거공사 가연성폐기물 처리용역	13	16.12.30				13
- 가공처리장 석면제거 공사	9	17.02.09				9
- 가공처리장 방음울타리 설치공사	37	17.03.04				37
- 청과직판 다,라동 석면제거공사	17	17.06.12				17
- 청과직판 4개동 철거공사 건설폐기물 처리용역	18	17.06.28				18
- 청과직판 철거공사 가연성폐기물(소각) 처리용역	55	17.10.12				55
- 가공처리장 지하부 철거공사	76	17.09.21				76
- 가공처리장 지하부 철거공사 건설폐기물 처리용역	75	17.11.07				75
- 제1주차장 철거공사 건설폐기물(폐아스콘) 처리용역	52	17.11.22				52
- 가락시장 청과직판(가,나동) 석면제거 공사	18	18.02.01				18
- 2단계 가락시장 채소2동 임시휀스 설치공사	37	18.01.12				37
- 2단계 가락시장 청과직판(가,나동) 및 건어제2경매장 철거공사	9	18.01.31				9
ㅇ 미술장식품비	978		0	0	0	978
- 1단계 미술장식품	978	’14.11.08				978
ㅇ 조사용역비	1,733		0	0	0	1,733
- 1단계 조사용역(총차_설계계약 포함)	548	’09.12.31				548
- 1단계 시설현대화사업 제영향평가(총차)	616	’09.09.04				616
- 1단계 교통영향분석 및 개선대책수립 변경(1~3단계)	71	’11.12.08				71
- 1단계 교통영향분석 및 개선대책수립 변경 및 교통소통대책	63	’14.01.10				63
- 1단계 가락시장역(8호선) 구분지상권 설정 측량용역	5	’16.04.28				5
- 1단계 공사 공공하수도 GIS 구축	4	’16.06.03				4
- 1단계 교통영향분석 및 개선대책 이행확인 용역	13	’15.03.16				13
- 1단계 가락시장역 3․8호선 초기안전점검 용역	14	’16.08.17				14
- 2단계 채소2동 후보지(제1주차,가공처리, 직판 다,라동) 사후환경영향조사용역	17	’17.02.14				17
- 2단계 채소2동 교통영향평가 개선대책수립 용역	131	’17.03.17				131
- 2단계 환경영향평가(변경협의) 용역	61	’17.04.18				61
- 2단계 녹색건축 및 에너지효율등급 인증 용역	76	’17.05.04				76
- 2단계 녹색건축 및 에너지효율등급 인증 수수료	60	-				60
- 2단계 문화재표본조사	39	’17.06.09				39
- 2단계 직판 가, 나동 사후환경영향조사용역	15	17.07.27				15
ㅇ 부담금	4,998		0	0	0	4,998
- 1단계 동문이설 도로점용료	65	’12.03.12				65
- 1단계 하수암거이설완료 도로사용료	26	’12.06.25				26
- 1단계 하수암거이설완료 원인자부담금	12	’12.06.25				12
- 1단계전용전기공급 시설부담금(1차)	1,650	’12.06.19				1,650
- 1단계전용전기공급 시설부담금(2차)	918	’14.04.24				918
- 1단계 상수도인입 공사비	603	’14.06.18				603
- 1단계 전기설비 사용전검사	13	’14.10.01				13
- 1단계 LG유플러스 통신관로이설 수탁공사비	90	’14.10.23				90
- 1단계 KT 통신관로이설 수탁공사비	49	’14.10.22				49
- 1단계 전력요금 지출	40	’14.11.17				40
- 1단계 전력요금 시공사 사용요금 납부	-7	’14.11.28				-7
- 1단계 전용전기설비 시설부담금 정산	-326	’15.02.10				-326
- 1단계 전기설비 부담금 추가 납부	32	’15.03.25				32
- 1단계 LG유플러스 통신관로이설 수탁공사비 반환	-7	’15.04.28				-7
- 1단계 KT 통신관로이설 수탁공사비 반환	-16	’15.04.30				-16
- 1단계 에너지효율등급 수수료	19	’15.05.21				19
- 1단계 하수도 원인자 부담금	1,128	’15.04.16				1,128
- 1단계 전기설비 부담금 추가 납부(2차)	65	’15.07.24				65
- 1단계 교통신호기 도로복구 원인자부담금	38	’15.12.10				38
- 1단계 연결통로 배전선로(한전)수탁공사비	107	’14.07.11				107
- 1단계 연결통로 도시가스 중간밸브 이설	57	’14.08.05				57
- 1단계 연결통로 도시가스 중간밸브 이설비 반환	-2	’14.11.03				-2
- 1단계 연결통로 도시가스 배관 이설	133	’15.04.17				133
- 1단계 연결통로 배전선로(한전)수탁공사비 반환	-18	’15.11.08				-18
- 1단계 연결통로 도로점용료(1차)	28	’15.12.14				28
- 1단계 서울메트로 기술지원비	75	’14.07.21				75
- 1단계 서울도시철도공사 기술업무지원비	107	’14.07.28				107
- 1단계 서울도시철도공사 기술업무지원비 납부(추가)	49	’16.06.24				49
- 1단계 서울메트로 기술지원비 납부(추가)	12	’16.06.24				12
- 1단계 연결통로 도시가스배관 이설 수탁공사비 정산	-53	’16.09.09				-53
- 1단계 연결통로 도료점용외 2건 납부	107	’16.10.27				107
- 1단계 사용전검사 수수료(2.3단계 전력케이블 검사)	4	’14.11.03				4
ㅇ 설계비	13,842		0	0	0	13,842
- 1단계 설계용역(총차)	9,287	’09.12.31				9,287
- 1단계 도시계획시설(변경)	222	’09.08.10				222
- 1단계 임대상인 이전재배치 연구용역	128	’09.12.22				128
- 2단계 설계용역(해지)	1,283	’11.09.16				1,283
- 2단계 제1주차동 철거 설계용역	13	’16.08.08				13
- 2단계 가공처리장외 5개동 철거 설계용역	19	’16.09.12				19
- 2단계 가락시장 시설현대화사업 채소2동 설계용역	2,890	’17.03.17				2,890
ㅇ 감리비	19,146		0	0	0	19,146
- 1단계 건설사업관리용역(총차)	8,084	’09.12.10				8,084
- 1단계 연결통로 및 환기구 전기감리용역	19	’15.04.14				19
- 1단계 교통안전시설물 설치공사 설계감리	5	’15.05.13				5
- 도매단계(2~5단계) 건설사업관리용역(총차)	11,038	17.12.22				11,038
ㅇ 시설부대비	718		0	0	0	718
- 착공식행사 대행용역(준공)	97	’11.05.02				97
- 조달수수료	621	′11.06~′17.02				621
ㅇ 기타부대비	499		0	0	0	499
- 1단계 사후환경조사용역(총차)	96	’10.12.30				96
- 2단계 조사용역비(해지_2단계 설계계약 포함)	290	’11.09.16				290
- 2단계 석면조사 및 지도작성(준공)	113	’13.06.05				113
<미계약분>	450,779		0	0	0	450,779
ㅇ 건축비	386,480					386,480
ㅇ 토목비	33,818					33,818
ㅇ 조경비	5,381					5,381
ㅇ 임시건축	2					2
ㅇ 철거비	10,659					10,659
ㅇ 미술장식품비	1,963					1,963
ㅇ 조사용역비	0					0
ㅇ 부담금	530					530
ㅇ 설계비	11,987					11,987
ㅇ 감리비	-885					-885
ㅇ 시설부대비	517					517
ㅇ 기타부대비	327					327

□ 자율조정 한도액 설정

(단위 : 백만원)

구 분		내 역
현행 총사업비		<총사업비>		749,317
		○ 공 사 비		703,166
		○ 보 상 비		-
		○ 시설부대경비		46,151
현 행 자율조정한도액		총한도액(A)		기집행액	잔여한도액(B)
		16,645		13,525	3,120
변 경 자율조정한도액		계 약 일	계 약 액	자율조정 한도액(순증)
				설정 한도액 (C)	비 고
공 종	소 계	-	103	10
	* 2단계 가락시장 건어제2경매장 철거공사 건설폐기물 처리용역	’18.03.02.	43	4
	* 2단계 가락시장 건어제2경매장 철거공사 가연성폐기물 처리용역	’18.03.06.	3	0
	* 2단계 가락시장 청과직판(가동) 철거공사 가연성폐기물 처리용역	’18.03.20.	57	6
조 정 자율조정한도액		총 한 도 액 (A+C)		기 집 행 액	잔여한도액 (B+C)
		16,655		13,525	3,130

※ 자율조정한도액은 도급공사비(관급자재비는 제외)의 10%로 계약공종별로 설정