검 토 의 견 서

□ 제    목 : 기존지하차도 배수계통 개선 및 추가보완사항

◯ 사     유 :	서부도로사업소에서 요청한 현장 개선사항 및 추가 보완사항

- 배수계통 개선, 도로표지병 손상, 연석부 재도색, 교명주 위치조정 사항  에 대해 개선함.

◯ 관련 근거 : 의주로지하차도 시설물 보수・보강 관련 협의사항

토목부-10962(2015.05.28.)

◯ 검토 내용

내 용	검 토	비 고
1. 배수계통 개선 1)집중호우시 대비 개수로 설치 2)집수정에 이물질 침투장치 설치 3)측구배수로 파손 아스콘밀림 보수	1)기존 집수정에 연결할 수 있도록 0.3m×0.1m크기 4개소 개수로 설치 2)배수로 입구에 그물망 설치 3)배수로 U형 철물설치 L=15M 아스콘 밀림 방지 보수	반영
2. 현장개선 1)도로표지병 재설치 2)연석부 재도색 3)교명주 이전	1)도로표지병 재설치 2)연석부 재도색 3)교명주 2개소 이설	반영

◯ 수량 및 공사비 증감 대비표

공 종	규격	단위	수량		증	금액		증
			당초	변경		당초	변경
1.부대공
1)아스팔트및콘크리트절단	인력	m	-	70	70	-	151,335	151,335
2)기존배수로 이토제거	인력	인	-	15	15	-	1,317,075	1,317,075
3)차선규제봉설치및해체	개	40	-	40	40	-	1,839,840	1,839,840
4)도로표지병재설치	개	250	-	250	250	-	3,667,000	3,667,000
5)후레씽및드래인설치	55*50 및 130*180*4.5t	식	-	1	1	-	6,880,000	6,880,000
6)연석부도색	조합페인트	㎡	-	250	250	-	2,790,500	2,790,500
7)교명주이전설치		개	-	2	2	-	400,000	400,000
직접공사비							17,045,750	17,045,750
제 잡 비							7,894,250	7,894,250
공급액							24,940,000	24,940,000
부가세							2,494,000	2,494,000
도급액							27,434,000	27,434,000

◯ 검토의견

서부도로사업소에서 요청한 현장 개선사항 및 추가 보완사항에 의한 추가 발생분에 대해 적절하다고 사료됩니다.

2015. 7.   .

책임감리원  김 한 귀