과  업  내  용  서

< 한강 수로조사 및 하상 종합관리방안 수립용역>

2018. 2.

서 울 특 별 시

(한강사업본부)

목      차

제1장  일반사항

1.1 과업의 목적	3

1.2 과업의 범위 및 내용	3

1.3 과업의 내용	3

1.4 과업수행기간	4

1.5 설계변경 조건	5

1.5 기타사항	5

제2장 과업내용

2.1 일반사항	6

가. 주요업무의 사전승인	6

나. 과업수행 및 공정보고	6

다. 용역감독 등	8

라. 계약상대자의 책임	8

마. 보안 및 비밀유지	9

바. 계약상대자와의 업무한계	9

사. 설계변경	9

아. 용역수행자의 교체	10

자. 용어의 해석	10

차. 적용규정 및 설계기준	10

카. 특기사항	10

타. 기타사항	11

2.2 특별사항	12

가. 측 량	12

나. 하상변동예측	13

다. 준설종합관리방안수립	15

라. 보 고 서 작 성	16

제3장 성과품 작성

3.1 일반사항	17

3.2 실시설계	17

3.3 성과품 제출	17

Ⅰ. 일반사항

1. 과업의 목적

한강종합개발사업 이후 매년 실시한 수로조사 측량을 실시하고 그 성과도를 분석․조사․검토를 시행하여 평시, 홍수 시 본류 및 지천 합류점 등으로 유입된 토사로 인한 하상변동 상태를 조사하여 치수, 이수, 환경 영향에 대한 모니터링 및 하상관리방안을 마련한다. 한강의 유지관리 및 정비에 필요한 자료와 수로조사 자료 활용 및 보존을 위한 DB 구축을 통해 한강의 치수, 이수, 환경측면 양자가 양립 할 수 있는 종합관리 Master Plan을 수립하는데 그 목적이 있다.

2. 과업의 범위 및 내용

가. 대상하천 ⇒ 한강 41.5㎞, 서울시계 내의 한강수계 및 지천

나. 과업대상 구간 ⇒ 시점 : 서울시 강동구 하일동 시계

종점 : 경기도 김포시 고촌면 신곡수중보

3. 과업의 내용

가. 측량

(1) 수심측량

(가) 한강 수심측량(45.75km)

- 측심간격 500m(1/5,000)

(나) 한강하류 수심측량(108.70km, 3회)

- 측심간격 250m(1/5,000) 평시1회, 홍수 이후 2회(5천톤 이상)

(다) 지천합류부(7) 및 취수장주변(6) 수심측량(26.68km)

- 측심간격 20m(1/2,500)

(2) 제도 및 검사

(3) 횡단면도 작성

나. 하상변동

(1) 하상변동 실태조사

(가) 유로의 평면적 변동조사

(나) 종단적 하상변동

*************

***********

***********

(3) 하도안정

(가) 하상변동 원인분석

(나) 장래 하상변동 예측 및 평형하상 검토

(다) 수위변화

(4) 하상변동에 따른 영향분석

**********

(************

(***************

(**************

(*************

***************

라. 보고서 작성

4. 과업수행 기간

가. 과업기간은 착수일로부터 8개월로 하고 다음의 경우에 발주처의 승인을 받아 과업기간을 연장 할 수 있다.

(1) 천재지변으로 과업수행의 차질이 있을 때

(2) 발주처의 계획변경 방침에 따라 과업수행의 중단 또는 과업내용의 현저한 변경이나 증감이 있을 때

(3) 과업 시행중 예기치 못하였던 사항의 발생으로 변경이 불가피할 때

(4) 기타 부득이한 사유가 발생하였을 때

5. 설계변경 조건

가. 조사구간에 대한 과업수행 중 직접경비 항목에 대한 추가가 필요한 경우

나. 경비 등 각종 비목에 계상된 금액을 사후에 정산함이 타당하다고 판단되는 경우

다. 기타 발주처의 사정에 의해 과업 변경이 필요한 경우

6. 기타 사항

예정가격 작성은 엔지니어링 기술진흥법 제10조 제2항의 규정에 의한 엔지니어링 사업대가의 기준(실비정액 가산방식) 및「수자원개발 표준품셈 - 하천편 - ( 한국엔지니어링진흥협회 )」에 의한다.

Ⅱ. 과 업 내 용

1. 일반사항

가. 주요업무의 사전승인 등

계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주기관과 협의를 하여 과업을 수행하여야 한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

(2) 관계기관과의 협의사항

(3) 기타 용역감독자의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

나. 과업수행 및 공정보고

(1) 과업수행방법

(가) 계약상대자는 본 과업내용서를 포함한 계약의 내용과 관계법령 및 제반규정에 따라 성실하게 과업을 수행하여야 한다.

(나) 용역수행처리절차는 본 과업내용서에 따르고, 과업수행과정에서 예측하지 못한 부득이한 사항 발생시 등 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주기관과 상호 협의․처리함으로써 내실있는 설계가 되도록 하여야 한다.

(다) 사업책임기술자 및 분야별 참여기술자는 사업수행능력평가시 제출한 기술자를 본 용역에 투입하여야 한다. 단, 퇴직․질병 등 특별한 사유가 있어 변경하고자 할 때에는 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 가진 기술자로 승인을 득하여야 한다.

(2) 착수신고서 제출

-  계약상대자는 계약일로부터 7일 이내에 기술용역계약 일반조건의 규정에 따라 다음 서류를 각 3부 제출하여야 한다.

(가) 착수보고서

- 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부) 및 과업수행조직표

- 기술용역 예정공정표

(나) 분야별 참여기술자

(다) 용역수행에 필요한 다음서류

- 내국기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서

- 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수 있는 서류

(3) 과업 수행계획서 제출

(가) 과업 수행계획서 제출

- 계약상대자는 계약 후 10일 이내에 과업의 특성 및 현장여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주기관의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

- 세부공정계획서

․ 기술용역예정표를 기준으로 공정을 세분화하여 작성

․ 구체적인 일정계획과 세부공정계획을 수립

- 과업의 단계별 성과품 제출 계획서

- 과업수행조직 및 인력투입계획서

- 건설기술 경력사항 확인서

- 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 및 참여예상기간

- 참여기술자의 보안대책 및 보안각서.

(4) 업무협의 및 공정보고

(가) 보고시기

다음의 경우에는 발주기관에 사전 보고하여 검토를 받아야 한다.

- 용역 착수시 : 과업수행계획서

- 조사 및 자료수집 완료 시

- 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

- 자문회의시

- 성과품 작성시

- 기타 발주기관의 요청이 있을 경우

(나) 월간 공정보고

- 계약상대자는 착수신고시의 예정공정표에 따라 매월 말을 기준으로 아래사항을 포함하여 작성한 월간공정보고를 익월 5일까지 발주기관에 제출하여야 한다.

- 과업추진내용 및 공정현황

- 관련기관(부서) 업무협의 등 추진사항

- 업무관련 회의 및 발주기관 지시사항 처리결과(승인사항 포함)

- 과업수행상 중요한 문제점 및 대책

- 참여기술자 현황

- 다음달 과업수행 계획

다. 용역감독 등

(1) 용역감독

발주기관은 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다.

(가) 기술인력 동원 현황

(나) 용역단계별 과업추진 내용 및 공정 현황

(다) 기타 확인에 필요한 사항

(2) 용역점검

계약상대자는 설계품질 확인 및 원활한 용역업무 수행을 위해 계약상대자에 대한 정기 또는 수시 점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독원과 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

라. 계약상대자의 책임

(1) 책임범위

계약상대자는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행 상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관기관의 수정․보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치  하여야 한다.

(2) 문서의 기록 비치

계약상대자는 과업을 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

(3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

(4) 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

마. 보안 및 비밀유지

(1) 계약상대자는 보안대책을 수립하여 대표자의 보안각서와 함께 착수계 제출시  제출한다.

(2) 모든 성과품은 발주기관의 승인 없이 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 된다.

(3) 과업폐기물은 소각 처리해야 하며, 작업용 보안사진은 발주기관에 제출하 여야 한다.

(4) 기타 보안상 하자가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

바. 타 계약상대자와의 업무한계

본 과업을 수행함에 있어 다수의 공동계약에 의거 과업을 수행할 때는 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

사. 설계변경

(1) 아래와 같은 사항이 발생하였을 경우 계약상대자는 지방자치단체 용역계약 일반조건(행정자치부 예규 제334호, 2010. 10. 26)에 따라 설계변경을 검토하여 발주기관에 보고하여야 한다.

(가) 조사구간의 시․종점 위치 변경이 있는 경우

(나)  과업수행 중 발주기관의 계획변경으로 인하여 과업내용의 변경이 있는 경우

(다) 실조사(교통, 지표조사 등) 비용이 설계내역과 상이한 경우

(라) 실 지급된 설계자문비가 설계내역과 상이한 경우

(마) 기타 추가과업 등의 내역 변경사유가 발생한 경우

(2) 설계자문비는 정산한다.

아. 용역수행자의 교체

(1) 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 감독원이 과업의 적정한 수행에 부적격하다고 판단하는 경우, 그 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

(2) 과업에 참여중인 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등하거나 그 이상의 자격, 경력을 가진 기술자로 발주기관의 승인을 받아 교체하여야 한다.

자. 용어의 해석

(1) 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

(2) 과업 성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현방법 등은 발주기관과 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기 쉽게 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

차. 적용규정 및 설계기준

(1) 각종 규정 및 설계기준은 가장 최근의 자료를 적용하며, 관련규정 및 설계기준이 개정된 경우 수정된 최신 설계기준을 적용하고 특별히 규정되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여 적용한다.

(2) 통계자료는 공신력 있는 기획재정부, 국토해양부 및 정부기관, 지방자치 단체, 기타 한국은행 등 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 통계자료는 반드시 출처를 명시한다.

카. 특기사항

(1) 계약상대자는 본 과업을 수행하기 위한 과업수행팀을 별도 구성하며, 과업의 내용에 따라 단계별 과업기간을 세분한 과업수행 계획서를 작성 제출하여 효과적인 사업관리가 될 수 있도록 한다.

(2) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 본 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업지시를 변경할 수 있다.

(3) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이라도 발주기관이 과업수행상 필요하다고 인정하는 추가 과업에 대하여는 상호 협의하여 결정하며, 계약상대자는 이를 성실히 수행하여야 한다.

(4) 본 과업내용서의 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시에는 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률의 규정에 따른다.

(5) 발주기관은 다음과 같은 사유로 계약상대자가 과업 수행을 계속하기가 곤란하다고 판단될 때는 해약할 수 있다.

- 과업 수행이 불가능하다고 인정될 때

- 발주기관의 정당한 지시에 불응할 때

- 기타 중대한 계약 조건의 위반이 있을 때

타. 기타사항

(1) 사용언어 및 문자

(가)  과업수행상 사용언어는 한글로 작성하며, 계약상대자의 필요성에 의한 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

(나) 사용단위는 “계량 및 측정에 관한 법률”에서 규정한 단위를 사용한다.

(다)  사용언어의 해석에 있어 발주기관과 계약상대자 간에 의견을 달리하여 분쟁이 야기될 수 있으므로 이해가 상충되거나, 그 뜻이 분명치 못한  용어는 알기 쉽게 풀이하여 정의한 후 사용하여야 한다.

2. 특별사항

수급자는 본 용역의 목적달성을 위하여 본 특별사항에 의하여 수행하여야 한다.

가. 측량

수심도 및 항정도가 동시 자동으로 출력 가능한 장비를 이용하여 수심도를 작성할 것

(1) 측량구간

(가) 수중보(2개소) 상․하류 수심측량

(1/5,000 축척, 측심간격 250m, 500m) : 149.64km

(나) 지천 및 취수장 주변(1/2,500 축척, 측심간격 20m) : 26.68km

- 합류부주변(7) : 욱천, 중랑천, 탄천, 안양천, 홍제천, 반포천, 여의하류

- 취수장주변(6) : 풍납, 성남, 일산, 암사, 자양, 강북취수장

(다) 횡단면도 작성

(라) 한강의 거리표 위치 확인 (둔치 끝단에 위치와 표고 확인 표시)

(2) 측량장비

(가) 수심측량에 사용되는 음향측심기의 정도는 ± (10Cm+d/1,000)이내를 원칙으로 하고 기록지 판독에 이상이 없도록 한다(단 d는 수심)

(나) 평면위치 측량에 사용되는 장비는 전자위치측정기 또는 위성측위시스템(DGPS)장비를 사용한다.

(3) 선상위치결정

양안에 해상기준점을 설치하여 전자위치측정기 또는 위성측위시스템(DGPS)장비를 이용하여 선상위치를 결정하여야 한다.

(4) 측심간격

(가) 저수로 수심측량(축척 1/5,000)의 측선 위치는 계획 횡단면 위치에 측심선 간격으로 균등 분할하여 측량 한다.

(5) 바-체크

바-체크는 측심작업 전,후와 기록침이나 벨트의 조정, 교환 시 반드시 실시하고 최심하상지역에서 배를 고정시킨 후 실시하며 이상이 있을 경우 보정한다.

(6) 측심간격

(가) 음향측심기에 의해 작업이 곤란한 지역은 연추 혹은 다른 방법에 의하여 실시한다.

(나) 수심측량은 남․북단 둔치와 접하는 면까지 측량하며, 지천합류부는 한강과 지천의 경계지점까지 측량한다.

(다) 수심평면도 작성 시 점고법과 등심선 평면도로 작성한다.

(라) 등심선 간격은 1m단위로 가는 실선으로 표시하고, 가는 실선 5개마다 굵은 실선으로 표시한다.

(마) 금회 실시한 횡단면에 ‘87년 및 최근 5년간 실시한 수심측량 횡단면을 삽입하여 퇴적량과 세굴량을 산출한다.

(바) 과업구간내의 하상 종단면도를 작성한다.

(사) 수심평면도, 횡단도 및 종단도는 SSD에 저장하여야 한다.

(아) 수심평면도(수심, 바닥고)를 각 1장의 도면으로 제작하여야 한다.

(자) 검측선은 주 측심선과 직교되게 시행한다.

(차) 종, 횡단도는 CAD로 작성하여 디스켓과 함께 제출하여 매년 실시되는 수로조사 용역 및 전산화 작업의 기초 자료가 될 수 있도록 하여야 한다.

(7) 제도 및 검사

(8) 횡단면도 작성

나. 하상변동 예측

(1) 하천의 일반사항

(가) 과업대상 하천의 유로, 지리적 위치, 유역의 지형 및 지질 등에 관한 사항 등 하천현황을 조사한다

(나) 과업대상 하천의 기상, 강수, 수위 및 유사량 등의 수문자료를 수집한다.

(2) 하상변동 실태분석

(가) 유로의 평면적 변동조사

과거 조사 자료와 현 하도 조사 자료를 비교 검토하여 유로의 평면적 변동 상태를 분석하고, 유로곡률과 하폭 등 조사 구간 내 유로의 평면적 실태를 파악할 수 있도록 수록하여야 한다.

(나) 종단적 하상변동

기 조사된 자료와 비교 검토하여 구간별 하상고의 변천을 분석하고 하상변동에 따른 연평균 저수위 변화에 대하여 검토하여야 한다. 이때 강우량에 따른 수위변동 영향을 충분히 고려하여야 한다.

계획홍수위를 기준으로 한 평균 하상고 실태를 조사하여 “하천설계기준”에 의거 정리수록하고, 평균하상고의 변동 및 최심하상고의 변화를 분석하여야 한다.

(3) 하도안정

(가) 하상변동 원인분석

금번 조사한 하상변동 실태를 정확히 분석 정리하여 하상변동의 인위적, 자연적 원인을 추정한다.

(나) 장래 하상변동 예측 및 평형하상 검토

적절한 하상변동모형을 이용하여 하천유하, 유사이송 등에 의한 장래 하상변동 경향에 대하여 예측하고 평형하상경사에 대하여 검토한다. 또한 유로의 사행요소를 분석하여 평면적으로도 안정하상을 유지하고 있는가를 검토한다. 여기서 하상변동모형은 검증된 방법(HEC-6 등)을 사용한다.

(다) 수위변화

하상변동의 영향에 따른 계획홍수위의 변화에 대하여 구간별 분석한 후 조사이전의 계획홍수위, 기왕 최고홍수위 등과 비교 검토하여 분석하여야 한다.

구간별 하상변동 자료, 준설량, 퇴적량, 세굴량, 수심 변화 등 종합적인 검토 후 분석자료를 그래프화 한다.

수중보의 영향 및 수위변화에 대하여 검토한다.

(라) 안정하도 유지 대책

(가)～(다)항의 결과를 고려하여 안정하도를 유지하기 위한 대책을 검토해야 한다.

안정하도 유지를 위하여 적정 준설량 및 준설방향을 제시한다.

하도의 평형하상 경사를 고려하여 고수 및 저수부지별로 안정하도 유지를 위한 하도정리계획을 검토 분석하되 하천 구조물의 유지관리 및 치수, 이수 등 종합적인 관점에서 분석하여야 한다.

주요지천의 강우량 등 수문현황, 주변의 개발현황 등의 자료를 수집 후 지천합류부 토사퇴적이 지천에 미치는 영향을 분석하고, 지천 합류부의 토사 퇴적량, 준설량, 준설방향을 제시하며, 지천의 토사 퇴적원인 분석한다.

(4) 하상변동에 따른 영향분석

하상변동에 따른 평면양상(쇄굴, 퇴적 양상)을 검토하기 위하여 전구간에 대하여 2차원 분석을 시행한다.

주요 퇴적구간(지천합류부, 취수장 주변)에 대하여 2차원 분석을 통해 횡단면별 퇴적양상을 검토하여 퇴적량, 수리적 영향, 안정하도 유지방안 등을 종합적으로 분석한다.

*************

*************

***********************************************

****************

***************

****************************************************

*****************************************************

***************

*****************************************************************

**************************************

************************************************

*******************************

**************

**************************************************

*****************************************************

************************

****************************************************

************

*************************

**********************************************************

라. 보고서 작성

준공 30일전에 초안을 제출하여 발주자의 검토를 거친 후 최종 작성(SSD, USB), 설계내역서, 수량산출서)하여 납품하여야 한다.

Ⅲ. 성과품 작성

1. 일반사항

가. 성과품 작성기준

계약상대자는 성과품 작성시 “건설공사의 설계도서 작성기준(국토해양부)”, “설계용역관리편람(서울특별시)” 에 의하여 작성하고 발주기관의 검토 후 제출하여야 한다.

나. 성과품의 인쇄

모든 성과품 인쇄는 발주기관과 협의 후 실시하여야 하며, 발주기관의 요구에 따라 작성하여 제출하여야 한다.

다. 도면상의 문자, 숫자

도면상의 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아 숫자를 사용한다.

2. 준설계획 수립

가. 설계도서 작성

다음 연도 한강준설(저수로, 취수장) 준설공사 발주 대비하여 공사원가 계약심사를 수행할 수 있도록 설계도서 작성한다.(탄력적 운용)

3. 성과품 제출

(1) 보고서 작성(16절 규격)	10부

(2) 음향 측심 기록지, 항적도(주운수로), 수심측량야장	2부

(3) 횡단면도	2부

(4) 한강(지정구역) 측량구간, 1/5,000 수심도, 수심평면도 원도	각 2부

(5) 한강(지정구역) 측량구간, 1/5,000 수심도 수심평면도 A3	각 2부

(6) 지천합류부(취수장) 측량구간, 1/2,500 수심도, 수심평면도 원도	각 2부

(7) 지천합류부(취수장) 측량구간, 1/2,500 수심도, 수심평면도 A3	각 2부

(8) 원도(축소)도집(평면도, 종단면도, 대황단면도)	각 3부

(9) 설계자료 DATA CD 10부, SSD 1T(solid state drive) 2부 저장	11부