가락종합사회복지관 기능보강사업계획 변경 요청

다음과 같이 가락종합사회복지관 기능보강사업계획을 변경코자 하오니

승인하여 주시기 바랍니다.

2016. 04.

1. 시설에 관한 사항

▢ 시설종류 : 사회복지관

▢ 시 설 명 : 가락종합사회복지관 (☏02-449-2341)

▢ 소 재 지 : 송파구 양재대로 897

▢ 시 설 장 : 김양선 (☏02-449-2348)

2. 당초․변경 대비표

(단위:천원)

변 경 대 상		당 초	변 경	증(△)감	비 고
총 계		21,710	19,840	△1,870
변경전	석면 텍스 제거 및 강당 환경개선	21,710
변경후	석면 텍스 보완 및 강당 환경개선		19,840

3. 변경사유

▢ 기능보강 목적 변경에 따른 예산변경

❍ 예산액 : 19,840

가락종합사회복지관 기능보강사업 설명서

*구체적으로 기재 요망

□ 사 업 명 : 지하 대강당 석면 보완 및 환경 개선

□ 사업목적(필요성)

❍ 개․보수공사 대상의 최초 공사(설치)및 구입: 1990 년 8 월 30 일

❍ 노후화의 정도 :

1. 지하 대강당 천정 노후로 석면자재 텍스 노출이 되고 있음.

2. 지하 대강당 벽면 페인트부 곰팡이 발생 및 창호 노후화로 방풍력 상실.

3. 지하 대강당 출입문(철문) 부식 및 환기저하

❍ 개․보수의 시급성 :

￭개․보수 변경 요청의 이유

1. 2015년 기능보강 신청 시 지하 대강당의 천정이 석면자재로 되어있어 석면텍스 제거 및 조명 교체의 환경개선이 시급한 상황이었음

2. 2015년 기능보강사업 신청 후 선정 결과가 확정되기 전 12월에 서울시 환경정책과 지원으로 지하 대강당 조명을 LED로 교체하여 조명이 개선됨

3. 2016년 공사 현 시점에서 석면텍스 제거 공사의 법령 강화로 인해 기능보강 신청시점과 달리 석면제거 전문 업체 선정 및 석면제거 비용이 3배 이상 추가로 발생하여 본예산으로 진행할 수 없는 상황임.

4. 그렇기 때문에 당초 신청한 석면텍스제거 예산으로 가능한 석면텍스 방염 실크벽지 시공으로 변경하여 기능보강 사업을 실시하고자 함.

5. 대강당이 지하에 위치해 있으며 밀폐형 출입문(철문)과 창호 노후로 인한 환기가 제대로 이루어 않아 벽면 및 천정에 곰팡이가 발생하고 있음. 이로 인한 악취로 이용자들이 대강당 이용 시 건강에 나쁜 영향을 끼치고 있어 이에 대한 환경개선이 시급한 상황임.

6. 변경 전 후 사업 내용

변경 전	변경 후
1. 지하 대강당 석면텍스 제거 2. 강당 환경 개선	1. 석면텍스 제거 대신 방염실크벽지 시공 (예산절감 등 합리적방안검토) 2. 강당 환경 개선 - 지하대강당의 곰팡이 제거를 위한 벽면 페인트 시공 및 창호공사 - 출입문(철문) 교체

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 지하 대강당 석면 보완및 환경 개선

❍ 사업근거 : 사회복지관 시설보수 및 기능보강 지원사업

❍ 사업기간 : 2016년

❍ 규    모 : 192.34㎡

□ 사업추진계획

❍ 자치구예산 반영여부 : 구비(45%)

❍ 사업수행주체  : 시설

❍ 사업진행절차 : 재무회계 규칙의 절차에 의해 실시함

❍ 예산지원형태 및 수준 : 시비,구비(90%) 자부담(10%)

□ 사업효과

❍ 지하대강당의 석면텍스 제거 대신 석면이 인체에 끼치는 안 좋은 영향을 완화 시켜주는 방염실크벽지 시공을 통해 이용자의 건강한 시설 이용에 도움을 줄 수 있다.

❍ 창호공사를 통해 강당의 환기성과 방풍력을 향상 시킬 수 있다.

❍ 내부 페인트 시공과 철문교체로 이용자의 시설 이용에 대한 접근성을 높이고, 보다 쾌적한 환경에서 시설을 이용할 수 있도록 한다.

□ 소요예산

(단위 : 천원)

개보수 공사명 (장비 구입명)	공 사 내 역 (구 입 내 역)	예 산 내 역				비고
		계	시 비	구 비	자부담
석면 보완및 환경 개선	19,840	19,840	8,928	8,928	1,984