납품기한 연기의뢰서

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

1. 계약내용

가. 계약건명 : 제1,2송풍기동 배전반 제작구매 설치

나. 계약업체 : (주)삼성파워텍(대표 박봉서)

다. 계약금액 : 금772,875,040원(금칠억칠천이백팔십칠만오천사십원)

라. 계약년월일 : 2019. 04. 022.

마. 납품기한 : 2019. 07. 11.

2. 위 계약의 납품기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : 2019. 08. 11.(30일 연장)

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 난지물재생센터

다. 지체상금 부과여부 : 부과 없음

라. 연기사유

- 제1,2 송풍기동 배전반 제작구매 설치는 기계분야의 송풍기 제조

구매 설치 건과 병행으로 작업이 진행되어야 하나,

- 기계분야 사업기간이 연기(당초 ’19.6.30→변경’19.7.30)됨에

따라 정상적인 사업추진을 위하여 계약기간 연장이 불가피 함

2019년  6월 28일

작성자	난지물재생센터 시설보수과	지방공업주사	이호복
확인자	난지물재생센터 시설보수과	시설보수과장	조선행