동절기 및 가을철 미 조치 현황

○ 동절기 점검 : '13. 11. 18(월) ～ 12. 5(목)

공사명	분야	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치유형
방화대교남단 접속도로 건설공사 (터널건설과) (추진공정률 :84%)	안전	Ramp-D의 설계지진력이 P9, P10에 크게 작용하나 받침고정은 P10만 설치되어 있으므로 해석결과를 재검토 바람 또한 기존 교량(기시공구간)에 대한 내진검토를 전반적으로 재 검토 하기 바람 (받침 정·부 반력부의 내부 수직보강재 안전성 검토요망)	현재 설계 지진력 및 교량에 대한 내진 검토 중 으로 조숙한 시일 내로 보완 조치 예정임 (‘14.2.27까지 완료예정)	조치중
강남순환도시고속도로 4공구 건설공사 (도시고속도로과) (추진공정률 :28%)	안전	교각 코핑부 거푸집 철거나 콘크리트 타설시 인근 전선 감전사고 방지 (보호캡) (크레인이나 펌프카 등 장비 사용시 주의요망)	- 전선 보호시설 한국전력공사에 보완 요청 중	조치중
지하철9호선 2단계 915공구 (9호선 2과) (추진공정률 :83%)	안전	927정거장 승강장 시점부(좌측) 계단과 종점부(좌측) 계단에 시스템 트라우 간섭으로 인한 계단기능 유지가 어려움	관련부서 간 업무 협의 후 시행 예정	조치중
	안전	927정거장 종점부 터널구간의 도상 con’c화 헌치사이 간격이 약 50cm로 비상 대피시 불안전한 요인이므로 추후 시공시 감안 할 것	관련부서 간 업무 협의 후 시행 예정 (현재 터널 내부 작업이 없으므로 승강장에서 대피를 유도함)	조치중
지하철9호선 2단계 916공구 (9호선2과) (추진공정률: 81%)	품질	STA 30K 020 지점 배수로에서 반월관과 맨홀그레이팅과 근접되어 반월관이 제대로 형성되지 못함	관련부서 간 업무 협의 후 시행 예정	조치중
	품질	STA 30K 020 지점에서 T/L구간 콘크리트도상 중앙부의 배수로 폭이 1.4m정도로 넓어서 체수가 발생	궤도분야 도상청소 완료 후 배수로 조치 예정 (‘14.1월)	조치중

○ 가을철 점검 : '13. 9. 30(월) ~ 10.14(월)

공사명	분야	점검결과 지적사항	발주부서 조치결과(계획)	조치유형
천호대로(광나루역)확장공사 (교량건설과) (추진공정률 : 48%	안전	- 가교(보.차도용)는 앞으로도 상당기간 사용되어야 하나 현재 녹 발생으로 단면 손실이 있을 수 있으며 특히 girder에 stress를 가한 강봉의 녹 발생 구간 안전성 검토필요	- 실정보고승인(13.12.10)완료 되었고 가교에 대한 전체적 안전성검토(정밀안전진단 등)를 실시할 계획임. (‘14. 2.28까지 안전성검토 실시예정)	조치중
장충체육관 리모델링공사 (의료시설과) (추진공정률 : 45%)	품질	- 기존건물중 존치부분의 구조체 품질이 비교적 양호하지 않음. 골재 분리, 콘크리트 탈락, 철근 노출 및 부식 등이 다수 발생하였고, 관중석 켄틸레버보 장착부에 배관파이프가 수직으로 매입이 되어있고, 보 하부의 콘크리트가 탈락된 부분이 발견되어 - 골조의 상태를 전수 조사하여 하자가 발생한 부분과 단면 응력이 부족한 부재에 대해서는 보수∙보강 방안을 강구할 것.	- 존치부분의 배관파이프는 제거하고 콘크리트 탈락부위는 미장 조치완료 하였으며, 존치구조물은 전수조사 및 구조체 안전진단을 하여, 보수·보강방안에 대한 검토를 진행하고 있어 그 결과에 따라 조치예정임	조치중