문서번호	도시철도설비부-2488
결재일자	2015.3.11.
공개여부	비공개
방침번호

					시 민
주무관		도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
협 조	교통정책과장
	예산담당관
	도시철도계획부장
	건설총괄부장
	계획과장
	기획예산과장
	차량과장

지하철 9호선 혼잡도 개선을 위한

도시철도 9호선 전동차 구매 계획

2015. 3.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

지하철 9호선 혼잡도 개선을 위한

도시철도 9호선 전동차 구매 계획

지하철 9호선 2단계 구간 개통 시 차량 혼잡도가 가중 될 것으로

예상되고 있어 교통이용 시민의 불편해소와 전구간 개통을 대비한

차량을 증차 구매하고자 함

Ⅰ		관 련 근 거

□ 행정1부시장 방침 제88호 ( 2015. 3. 10) ; 지하철 9호선 혼잡도 개선 및 증차 계획

- 도시교통본부(교통정책과)

❍ 주요내용

- 구매수량  : 70량(편성수 36편성→45편성)

- 편성방안 : 신규 6량 9편성(54량), 기존 4량 → 6량 증결 8편성(16량)

- 운영방안 : 일반 4량, 급행 6량 운영

Ⅱ		차량 운행 현황

□  9호선 2단계 열차 운행 현황

❍ 운행구간 : 김포공항역~종합운동장(일반 30개역, 급행 12개역)

❍ 열차대수 : 총 36편성 144량

구 분	총 계	1단계	2단계	3단계
계획차량 대수	198량	96량(`09)	34량(`14)	68량(`17)
현재 확보차량 대수	144량	96량(`09)	48량 (`11)	-

Ⅲ		추 진 경 위

□ ′05. 8  : 지하철 9호선 예비타당성 조사

□ ′07.10 : 지하철 9호선 도시철도기본계획 변경

□ ′09. 7 : 지하철 9호선 1단계 민자사업구간 개통 (24편성 96량)

□ ′10. 4 : 지하철 9호선 도시철도기본계획 변경(33편성 198량)

□ ′11.10 : 지하철 9호선 2단계 구간 조기증차 완료 (12편성 48량 추가)

□ ′14.12 : 32량 증차에 대한 국비(40%, 3년간 240억) 추가 확보

Ⅳ		차량구매 세부계획

□ 차량 구매‧제작 현황

❍ 구매수량 : 70량(Tc:18량, M1:18량, M2:17량, T:17량)

❍ 편성방안 : 신규 6량 9편성(54량), 기존 4량→6량 증결 8편성(16량)

- 열차편성 : 총 45편성 214량 (28편성 4량, 17편성 6량)

□ 구매방안

❍ 현재 운행중인 4량 편성과 동일 사양으로 조기 반입

․ 조기투입을 위한 편성량 변경 : 신규 6량9편성⇒4량 8편성 우선

제작 투입(계약 후 18개월)

❍ 이후 추가 투입분은 정상적인 제작 추진

․ 신규 6량 1편성

․ 증결 4량→6량 16편성(조기투입 4량 8편성, 기존 4량 8편성)

□ 구매방법 및 소요예산

❍ 구매방법 : 조달구매

❍ 입찰방법 : 국제경쟁입찰(긴급공고)

- 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제5조(국제입찰에 의한         정부조달계약의 범위)에 의함

❍ 납품기한 : 2017. 12. 31.

- 편성별 납품 기한 내역

구 분	수 량	납품기한	비 고
4량 편성	32량	2016. 12. 31	기지도착 기준
6량 편성	6량	2017. 12. 31
6량 증차용 M,T	32량	2017. 12. 31
지정예비품,시험기 등		2017. 12. 31
합 계	70량	2017. 12. 31

❍ 소요예산 : 총 1,237억원

- 년도별 소요예산 내역

구 분		총 계	`15년	`16년	`17년
총 계		1,237억원	233억원	521억원	483억원
총사업비반영 32량분	계	601억원	233억원	368억원	-
	국 비(40%)	240억원	30억원	210억원	-
	시 비(60%)	361억원	203억원	158억원	-
시비 추가 확보 38량분		636억원	-	153억원	483억원

※ 국비 투입일정은 기재부,국교부와 협의결과에 따라 변동 가능

❍ 2015년 구매발주 예산 : 233억

-  ′15년도 반영된 국비예산 30억과 시비 203억원 활용 발주.

Ⅵ		행 정 사 항

□ 9호선 차량 구매 발주 : 도시철도설비부

❍  70량 (6량×9편성/54량, 증결(4→6량)×8편성/16량)

□ 운영단계 증차 차량 소요예산 시비확보 조치

❍ ′15년도 차량구입비로 추가 확보 된 물량 32량(601억)을 제외한

증차분 38량(636억)에 대한 소요예산 시비 확보 조치

- 협조부서 : 도시교통본부(교통정책과), 예산담당관

□ 차량 증편에 따른 검수시설 유치선 확충

❍ 현재 9호선 개화기지 등 차량 유치가능 편성수는 24편성으로 차량 증편 시 추가 유치선이 필요함  ( 50편성 유치선 부지 기확보)

- 주박 및 유치 계획

구 분	2009년(1단계 개통)	2016년 이후(3단계 개통)
계	24편성	41편성
본선 주박	8편성	12편성
차량기지 유치	16편성	29편성(최대 50편성)

※ 자료 : 도시철도 9호선 2,3단계 교통수요 조사연구(한국교통연구원 ; 2011.11월)

- 협조부서 : 도시철도계획부

붙임 : 행정1부시장 방침 제88호  1부.  끝.