『 경원선 월계~녹천간 철도이설공사 』

사업기간 연장 검토 보고

2018. 03.

한국철도시설공단

사업 기간 연장

1. 사업개요

○ 사 업 명 : 경원선 월계∼녹천간 철도이설공사

○ 사업위치 : 서울특별시 노원구 월계4동, 도봉구 창4동 일원

○ 사업물량 : 노반 : 용기(현)19km300.00 ∼ 20km760.00(L=1,460.00m)

궤도 : 용기(현)19km267.87 ∼ 20km765.95(L=1,498.08m)

건축/전철·전력/신호/통신설비공사 : 1식

○ 사업기간 : 2009. 10. 19 ∼ 2018. 03. 30

2. 노선도

2. 추진경위

○ ’07.11.15 : 위․수탁 협약 체결(서울시, 공단)

○ ’08.05～’08.12 : 노반 실시설계(보완) 및 궤도 실시설계

○ ’09.09.14 : 노반공사 착공

○ ’09.10.19 : 사업실시계획 승인

○ ’12.08.31  : 사업실시계획변경 승인  *사업기간 ’12→’14, 월계역사 증축 추가

○ ’12.12.24 : 건축(월계북부역사) 공사 착공

○ ‘14.07    : 월계4구역 용지매수(서울시) * ’15.5 전체구간 용지보상 완료

○ ‘14.11   : 사업실시계획변경 승인(사업기간 변경 ’14→’16.12)

○ ‘16.12   : 사업실시계획변경 승인(사업기간 변경 ’16→’17.09)

○ ‘17.09   : 사업실시계획변경 승인(사업기간 변경 ’17.09→’18.03)

3. 사업기간 변경현황

1) 1차 변경(2012년)

○ 사업기간

2009.10.19∼2012.10.18(36개월) → 2009.10.19∼2014.12.31(63개월)

○ 연장사유

⦁용지보상(서울시 제공) 및 월계4구역 재개발사업 착공지연

2) 2차 변경(2014년)

○ 사업기간

2009.10.19.∼2014.12.31(63개월) → 2009.10.19.∼2016.12.31(87개월)

○ 연장사유

⦁월계4구역 재개발사업 착공지연으로 공사부지 기부체납 지연

3) 3차 변경(2016년)

○ 사업기간

2009.10.19.∼2016.12.31(87개월) → 2009.10.19∼2017.09.30(96개월)

○ 연장사유

⦁월계4구역 재개발사업 착공 및 지장물 이설 지연

4) 4차 변경(2017년)

○ 사업기간

2009.10.19.∼2017.09.30(96개월) → 2009.10.19∼2018.03.30(102개월)

○ 연장사유

⦁한라공업사 철거, 월계제4구역 재개발사업에 따른 길내기#1, 옹벽공사 지연

5) 5차 변경예정(2018년)

○ 사업기간

2009.10.19.∼2018.03.30(102개월) → 2009.10.19∼2018.11.30(110개월)

○ 연장사유

⦁길내기#2 도로공사구간(한라공업사 및 고물상) 보상지연

4. 사업기간 연장사유

길내기#2 공사구간 보상지연에 따른 용지보상 대집행(한라공업사 및 고물상)에 소요되는 행정소요기간 및 잔여공사기간 필요

☞ 도봉구청 보상팀에서 길내기#2 지장물(한라공업사, 고물상)을 보상을완료(‘12년)하고 “건물일부 철거 및 이전”을 촉구하였으나, 소유주들이 응하지 않아 공사시행이 불가한 실정임

☞ 사업주관부서인 서울시에서『대집행계고→완료기간(5개월) 및 잔여공사 완료(3개월)』까지 총 8개월이 소요되어 사업기간을 연장하고자 함.

[별첨] 예정공정표