설계변경사유서

○ 공 사 명 : 2018년 난지수계 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 04. 09 ~ 2018. 12. 31

○ 도 급 자 : 금원종합건설(주) 대표 박주범

○ 설계변경 사유

1) 작업지시에 따른 시공수량 증 ․ 감사항 발생 : 차집관거준설 외 14개 공종

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
1. 준설공
차집관거준설	혼기젯트펌프+활차	㎥	2,500	1,260	감) 1,240
침사지준설	혼기제트펌프	㎥	100	50	감) 50
침사지준설	혼기제트펌프+크레인	㎥	1,800	3,200	증) 1,400
침사지준설	인력집토	㎥	400	850	증) 450
흡입준설(소내)	준설차(25ton)	㎥	290	890	증) 600
2. 운반공
1공구소운반(마포지구)	현장사토	㎥	900	500	감) 400
1공구운반(마포지구)	현장~사업소	㎥	900	500	감) 400
2공구소운반(옥수지구)	현장사토	㎥	300	160	감) 140
2공구운반(옥수지구)	현장~사업소	㎥	300	160	감) 140
3공구소운반(불광,홍제)	현장사토	㎥	200	100	감) 100
3공구운반(불광,홍제)	현장~사업소	㎥	200	100	감) 100
하늘공원 소운반	인력(관내부)	㎥	1,100	500	감) 600
하늘공원 운반	센터내~사업소	㎥	1,100	500	감) 600
사업소내 운반	센터내~사업소	㎥	1,800	1,865	증) 65
사업소내 운반	사토장~계근대	㎥	279	1,350	증) 1,071

※ 침사지준설 (혼기제트+크레인) 증가사유(관련 보고서 참조)

구분	위 치	규 격	단위	지시량	완료량	비고
1차	최초침전지1-5지	혼기제트펌프+흡입준설	㎥	320	329
2차	분뇨처리장A지	혼기제트펌프+인력준설	㎥	2,889	2,889
3차	최초침전지3-2 계열 유입수문	준설차(25ton)	㎥	100	99
4차	1처리장 오수1펌프장	준설차(25ton)	㎥	169	150
	2처리장 최초침전지 4-2~6-8지 유입수문	준설차(25ton)	㎥	517	458