설계변경사유서

○ 공 사 명 : 2017년 난지수계 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2017. 03. 20 ~ 2017. 12. 31

○ 설계변경 사유

1) 신규공종 추가 : 흡입준설(홍제천) 1개 공종

2) 시공수량 증 ․ 감사항 발생 : 차집관거준설 외 23개 공종

주 요 공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
1. 준설공
차집관거준설	혼기젯트펌프+활차	㎥	300	1,237	증) 937
침사지준설(분배조,급수동)	혼기제트펌프	㎥	80		감) 80
침사지준설(초침,종침)	혼기제트펌프+크레인	㎥	50		감) 50
흡입준설(농축조)	준설차(25ton)	㎥	100		감) 100
흡입준설(소내)	준설차(25ton)	㎥	80	275	증) 195
흡입준설(펌프장)	준설차(25ton)	㎥	30		감) 30
흡입(역싸이펀)	준설차(25ton)	㎥	30		감) 30
U형수로 준설(욱천)	로더+03W	㎥	30		감) 30
버킷준설	경운기1ton	㎥	5		감) 5
장비설치및해체	0~6m미만	회	3	2	감) 1
장비설치및해체	6~11m미만	회	3	8	증) 5
장비설치및해체	6~11m미만(2/3적용)	회	3	5	증) 2
맨홀교체	□ 2.2*2.2	개소	1		감) 1
맨홀제작	□ 2.2*2.2	개소	1		감) 1
2.운반공
1공구소운반(마포지구)	현장사토	㎥	100	897	증) 797
1공구운반(마포지구)	현장~사업소	㎥	100	897	증) 797
2공구소운반(옥수지구)	현장사토	㎥	100	340	증) 240
2공구운반(옥수지구)	현장~사업소	㎥	100	340	증) 240
준설토운반(버킷준설)	홍제~사업소	㎥	5		감) 5
욱천 기계준설 운반	현장~사업소	㎥	30		감) 30
준설토 소운반(불광천)	인력(관내부)	㎥	5		감) 5
사업소내 운반	사토장~계근대	㎥	207	326	증) 119
3.부대공
하수관내CCTV검사 및 보고서작성	800mm미만	m	300	1,538	증) 1,238
하수관내육안검사 및 보고서작성	800mm이상	m	365	644	증) 279