설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제8차)

문서번호		요청부서	토목부 담당 이정원	요청일		2016년 7월 일
공 사 명	응봉교 확장 및 성능개선공사
공사개요	공사규모	주경간교 - 중로아치교(L= 225.0M, B=31.2M) 접 속 교 - STEEL BOX교(L=408.0M, B=25.8M ~ 26.9M)
	공사기간	2008. 10. 20. ~ 2016. 08. 31.
	감 리 사	㈜건화, (주)제일엔지니어링
	설 계 사	(주)제일엔지니어링, (주)천일기술단
	시 공 사	한신공영㈜
자문 안건명		교통우회용 3차 가설교량(철도횡단구간) 정산			요청금액		증 250,539천원
자문요청사유		- 5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형		- 현장여건 상이(지질, 용수 등) - 민원해결, 보수, 보강 - 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 기존 응봉교를 철거하고 신설 응봉교 건설을 위한 단계별 교통처리 계획에 의거 교통우회용 3차 가설교량(중앙선 철도횡단구간)을 설치함에 있어 유관기관인 한국철도공사 수도권동부본부 협의사항을 반영하고, 인접 건물 소유주(민원인 : 지원석) 민원사항 및 지장물 저촉에 따른 현장여건 등을 반영
원설계자 의견(요약)
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 정산 실정보고를 2016. 7월 발주처에 제출시 데크플레이트, 석면포설치 등 전체적으로 노무비는 2013.9.1.일 적용하고 재료비는 2016.4월 적용한 바 적용일이 일치되도록 수정 ○ 철골철거(야간) 재료비 산출이 2008년도 품셈으로 산출되어 있으므로 2013년도 품셈으로 조정

설계변경자문회의(소위원회) 결과 (제8차)

문서번호		요청부서		토목부 담당 이정원	요청일		2016년 7월 일
공 사 명	응봉교 확장 및 성능개선공사
공사개요	공사규모		주경간교 - 중로아치교(L= 225.0M, B=31.2M) 접 속 교 - STEEL BOX교(L=408.0M, B=25.8M ~ 26.9M)
	공사기간		2008. 10. 20. ~ 2016. 08. 31.
	감 리 사		㈜건화, (주)제일엔지니어링
	설 계 사		(주)제일엔지니어링, (주)천일기술단
	시 공 사		한신공영㈜
자문 안건명			고재처리 PS단가 정산			요청금액		증 762,300천원
자문요청사유			- 5,000만원 이상 변경사항
설계변경 유형			- 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순
설계변경사항(요약) ○ 내용 : 『응봉교 확장 및 성능개선공사』와 관련하여 발생한 고재처리 수량에 대한 비목이 PS(Provisional Sum) 항목으로 산정되어 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제73조 ③항에 의거 정산 반영
원설계자 의견(요약)
자문결과 : 조건부 가결 ❑ 자문의견 ○ 한신공영에서 공문(2016.7.26.)으로 계약낙찰율 69.747%를 요구하였으나 실정보고 단가 적용은 협의율 84.874%을 반영하였으므로 협의율 적용 합의서를 첨부