설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서		토목부 담당 김 구	요청일		2019년 8월 일
공 사 명	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
공사개요	공사규모		폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 829m, 본선교량:820m, 토공: 900m
	공사기간		2001. 12. 29. ~ 2020. 5. 31.
	감 리 사		㈜서영엔지니어링
	설 계 사		㈜서영엔지니어링
	시 공 사		롯데건설(주)
자문 안건명			공사중 교통처리에 따른 방음벽 철거 및 복구 공사			요청금액		증 205,500천원
자문요청사유			☑ 5,000만원 이상 변경사항 ▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우
설계변경 유형			▢ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등) ▢ 설계도서내용 불투명, 누락, 오류, 상호모순 ☑ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ☑ 민원해결, 보수, 보강 ▢ 문화재 및 지장물 이설 ▢ 공법변경(신기술, 신공법 포함) ▢ 제도, 기준변경 ▢ 유관기관 협의 미흡
설계변경사항(요약) ○ 내용 : - 금하지하차도(A, B-LINE U-TYPE 및 구조물) 공사중 교통처리계획(17단계)에 저촉되는 방음벽은 임시 철거가 불가피한 실정으로 시설물 유지관리기관(서울시설공단 도로관리처) 협의한 결과 방음벽을 철거하되 추후 원상복구하도록 협의되어 방음벽 철거 및 복구 공사비를 반영함.
원설계자 의견(요약)
주 요 변 경 내 역 및 공 종
▪ 변경개요 - 당 초: - - 변 경: 지장방음벽 철거 및 원상복구 ▪ 물량 증·감내역 - 당 초 : - - 변 경 : 기존방음벽 철거(L=66m) : 방음판 396 m2, 지주 33 개소 방음벽 원상복구(L=66m) : 방음판 396 m2, 지주 33 개소					▪ 공사비 증·감내역 - 당 초 : - 천원 - 변 경 : 205,500 천원 - 증 감 : 205,500 천원 ▪ 설계변경 주요 공종 - 토목공종
별첨서류	1. 감리단 검토 의견서 1부. 2. 공사비 증·감 집계표 및 내역서 1부. 3. 수량산출서 1부. 4. 도 면 1부 5. 관련문서 1부.				▪ 공사예정시기 - 2019. 8. ~ 2019. 12. ▪ 소요관급자재 - 없음

□ 전체분 공사현황

계 약 명 (공사명)	강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사
계약금액	199,916,000천원	계약일	2001. 12. 28.	시공사	롯데건설(주)
공사기간	2001. 12. 29. ~ 2020. 5. 31.	협의률	84.64%	설계자	㈜서영엔지니어링
계약형태	공개경쟁입찰(●), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사			감리자	㈜서영엔지니어링
공사규모	폭: 왕복 4~8차로, 연장: L=2.48km 지하차도: 829m, 본선교량:820m, 토공: 900m			※ 작성자 : 김 구 (☎3708-8664)

□ 심의 안건 설계변경 현황

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증·감
변 경 개 요	-		서부간선도로 방음벽 원상복구	증
공 사 비	-		205,500천 원	205,500천 원
적 용 요 율	협의율 84.64%		협의율 84.64%	협의율 84.64%
설계변경요구자	☑ 발주처 □ 계약상대자
협의률 적용 근거	시점부 지하차도 신규비목 협의율 적용(도시기반시설본부-16-3051, 2016. 4. 21.)
설계변경 근거	방 침	실정보고 승인(도시기반시설본부-19-8213, 2019. 7. 16.)
	관련규정	공사계약일반조건 제19조의 2
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡
설계변경 내용	- 서부간선도로 방음벽 원상복구 반영
효 과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진
제비율 검증 이행여부	☑ 이행 □ 미이행

□ 관련문서

· 실정보고(서부간선도로 방음벽 원상복구 반영) - 롯건강남4 제2019-127호(2019. 7. 10.)

· 실정보고(서부간선도로 방음벽 원상복구 반영) 검토보고 - 서영강남 19-166호(2019. 7. 10.)

· 승인 이첩 – 업무연락전[도시기반시설본부-19-8213(2019. 7. 16.)]관련